	예산서 P.
망우로 72길 49주변 하수관로 개량 사업명 기재시 주의사항 주1) 위치는 필히 도로명주소로 작성 바람 예시) 망우동 153-1주변 하수관로 개량(×) 망우로72길 49주변 하수관로 개량(◯) 주2) ◯◯ 하수관로 개량, 하수관로 정비 등 신설교체 사업은 하수관로 개량으로 통일 주3) 사각형거 보수보강 사업명 작성시 주의사항 가. 단면보수 및 방청보수 등의 사업은 ◯◯ “사각형거 보수”로 작성 나. 관거재구축(전단면보강) 사업은 ◯◯ “사각형거보강”로 작성 다. 단면보수+관거재구축 복합사업은 ◯◯ “사각형거 보수보강”로 작성 라. 사업설명서 작성시 하수암거 대신에 “사각형거”로 통일하여 작성 제출 주4) 하수관로 비굴착 보수사업은 ◯◯주변 “원형관로 보수”로 표기 주5) 원형관로 보강(관거재구축)사업은 ◯◯주변 “원형관로 보강”로 표기 주6) 사업설명서는 신주소(도로명 주소)로 표기하고 대표건축물(학교, 지하철역, 아파트 단지 등)주변 으로 사업명 표기 가능함. 예시)◯◯초등학교주변 노후 하수관로 개량

1		기본현황

□ 사업개요
사업기간	□연례반복, ☑ 2022. 01. ~ 2022. 12.
사업위치	중랑구 망우동 153호-1 일대
총사업비	총 1,050,000천원		[국비] 천원	[시비] 1,050,000천원	(보조율) %	[구비]
사업내용
	○	노후 불량 하수관로 개량
사업형태	☑직접수행 □자치단체 보조 □민간이전 □출연출자 □민간위탁 □기타
사업시행주체	서울특별시 중랑구

□ 사업 성격 및 사전절차 대상 여부
신규	계속	투자심사	학술용역	기술심사	민간보조심의	정보화심사	공유재산	안전예산
☑	□	□	□	□	□	□	□	☑
경상	투자
□	☑

□ 재정사업 평가 결과
매우 우수	우수	보통	미흡	매우미흡	해당없음
□	□	□	□	□	☑

□ 사업 담당자
실․국	부서명	과 장	팀장	주무관
물순환안전국	물재생계획과	이임섭 2133-3780	이한복 2133-3794	박영호 2133-3792

2		예 산 (안) 설 명
□ 예산(안) 총괄 (단위 : 천원)
구 분			2020년 본예산	2021본예산 (A)		2022예산(안) (B)	증감 (B-A)
								(B-A)*100/A
계						1,050,000	1,050,000
시설비						1,050,000	1,050,000

□ 예산(안) 요구내역 및 산출근거 (전년대비하여 과목별 작성)

과목구분	2021년 본예산
시설비
	○	해당사항 없음

과목구분	2022년 예산(안)
시설비
	○	하수관로 개량 D450m/m 886,000원×192m 주1) 단가는 원단위로, 사업물량 단위(m, ㎡등) 필히 기재 바람 주2) 환경부 2021 하수도분야 보조금편성 및 집행관리 실무요령에 따라 작성된 서울시 공사비 단가적용(참고자료)	=	170,112천원 ※ 단위는 천원단위로 기재할 것
	○	하수관로 개량 D600m/m 1,016,585원×707m	=	718,725천원
	○	실시설계 및 도로공사장 교통처리계획 70,000,000원×1식	=	70,000천원
	○	지장물 이설비 91,163,000원×1식	=	91,163천원 폐기물 처리비는 단가에 포함되어 있음 이설비는 공사비의 20%이내 산정할 것 단, 불필요시 삭제

과목구분	증 감 사 유
시설비	노후화에 따른 균열, 파손, 단차 등의 결함발생에 따른 정비필요

□ 연차별 투자계획(투자사업의 경우)                       (단위 : 백만원)

구 분	계	기투자 (~2020)	2021	2022	2022 이후	비고
계	1,050			1,050
시설비	1,050			1,050

3		사 업 설 명

□ 사업목적
○	구배 불량으로 인한 관로 내 배수 불량, 이음부 단차 및 결함·균열 등이 발생한 중랑구 망우동 153일대(망우초교 주변)의 하수관로 정비를 실시하여 수해 및 안전사고 예방에 만전을 기하고자 함.

□ 사업근거
○	하수도법 제3조(국가 및 지방자치단체의 책무)
○	지반침하 대응 하수관로 정밀조사 매뉴얼(환경부, 2015.12.)

□ 사업내용 단위사업에 대하여 기재 - 사업규모, 소요예산 기재시 참고하여 간단명료하게 작성하고 정비단위(㎜, m, ㎡) 및 소요예산(백만원) 작성시 주의할 것
○	사업위치 : 중랑구 망우동 153 일대
○	사업규모 : 하수관로 정비 D450~600㎜, L=899m
○	사업기간 : 2022. 01. ~ 2022. 12.
○	사업내용 : 노후·불량 하수관로 정비
○	총사업비 : 1,050백만원(시설비 1,050백만원)

□ 사업계획(투자사업의 경우) 신규사업은 사업내용과 사업계획 동일 - 사업규모, 소요예산 기재시 참고하여 간단명료하게 작성하고 정비단위(㎜, m, ㎡) 및 소요예산(백만원) 작성시 주의할 것
○	사업위치 : 중랑구 망우동 153 일대
○	사업규모 : 하수관로 정비 D450~600㎜, L=899m
○	사업내용 : 노후·불량 하수관로 정비
○	소요예산(안) : 1,050백만원(시설비 1,050백만원)

□ 추진경위
○	`21.05.03. ~ 06.10. : 하수관로 점검 및 CCTV 조사
○	`21.06.21. : ‘22년 하수관로 정비사업 세출예산 편성요구서 제출

□ 중점추진사항(사업추진의 필요성)
○	중랑구 망우동 망우초교일대 하수관로의 구배 불량으로 인한 관내 배수 불량, 이음부 단차 및 결함·균열과 관경 축소 등의 이상 항목이 발견됨에 따라 수해 및 안전사고 예방을 위한 하수관로 정비가 필요한 실정임

□ 사업추진절차
○	집행절차
-		예산편성⇒ 공사발주 ⇒ 공사계약 ⇒ 공사시행 ⇒ 준공
○	계약체결
-		입찰공고 ⇒ 현장설명 ⇒ 업체선정 ⇒ 적격심사 ⇒계약체결

□ 2022년도 추진일정 추진기간별 세부내용(예산집행금액, 세부내용)을 간략하게 작성바람 단, 기간별 금액과 합계금액 일치되도록 작성 (단위 : 천원)
사업추진절차	추진기간	예산집행금액	추진세부내용
계		1,050,000
공사발주	2022.01. ~ 02.		설계서 작성, 일상감사 의뢰 공사발주 및 입찰
공사시행	2022.02. ~ 06.	450,000	공사시행 및 기성금 지급
공사시행	2022.06. ~ 09.	600,000	공사시행 및 준공금 지급

4		사 업 효 과

□  최근 3년 추진실적

2019년도
	○	해당사항 없음
2020년도
	○	해당사항 없음
2021년도
	○	해당사항 없음

□   향후 기대효과

○	노후 하수관로 정비로 배수불량 및 하수악취 해소 등 주민불편사항 해소
○	하수배제 능력 향상을 통한 도시침수 및 안전사고 예방에 기여

5		최근 3년 결산현황

(단위 : 천원)
연도	당초예산	전년이월	예산변경	예산현액	집행액	차년이월	집행잔액
2018
2019
2020

참 고 자 료

▢ 위치도 및 조감도(현황도)

위 치 도
현 황 사 진 사진은 동 사업을 대표할 수 있는 사진으로 엄선하여 제출하고 사이즈 80*50㎜ 그림파일 작성시 문서에 포함하여 제출 그림파일 → 개체속성 → 그림 → ☑문서에 포함
이음부 단차 및 파손	관침하로 인한 관내 체수
관로 상단부 파손	관 단절

사업위치 : 중랑구 망우초교주변

사업내용 : 노후 하수관로 정비

사업위치, 사업내용, 사업규모 등을

사업설명서와 일치되도록 작성하여 기재

사업위치도 및 현황도(사진) 작성을 동 사업의

필요성 및 시급성 등을 나타내는 매우 중요자료로 작성시 주의해서 작성 요망

※ 사진은 동 사업의 대표사진을 엄선하여 제출

위치도 사이즈 165*85㎜로 맞출 것

그림파일 작성시 문서에 포함하여 제출

그림파일 → 개체속성 → 그림 → ☑문서에 포함

사업규모 : D450~600㎜, L=899m

▢ 하수관망도

하수관망도

사업위치, 사업내용, 사업규모 등을

고려하여 일치되도록 작성하여 기재

그림파일 작성시 문서에 포함하여 제출

그림파일 → 개체속성 → 그림 → ☑문서에 포함

사이즈 165*100㎜로 맞출 것

▢ 안전점검 용역보고서(용역보고서 표지, 시설물 등급 및 개략사업비 부분 첨부)

▢ 시설물 상태등급평가자료, 수리검토서 등