공립박물관 건립사업 이월명세서

< 시 도 명  :  서울특별시 >

□ 사업추진현황 및 계획

(단위 : 백만원)

시도 시군구	시설명	2013년 지방비 확보 현황1)			부지확보 확인결과 2)	투융자 심사 완료일 3)	실시설계 완료일 4)	착 공 연월일 5)	공정률 (%) 6)	준공 (예정)일 7)	개관 (예정)일 8)	시도 의견 9)
		시도	시군구	소계
은평구	은평자연환경역사박물관 건립	0	2,305	2,305	확보	2012.08.03	2013.02.09	2012.10.08	건축 60.44% 전시 15.75%	2014.06	2014.06	정상 추진 중이며, ‘14년 6월 준공임을 감안하여 ‘14. 3월 이전 보조금 교부희망

□ 예산 현황

(단위 : 백만원)

시도 시군구	시설명	2012 까지 투입 예산(누적액)						2013년 예산 현황
								2013 예 산						전년도 이월액				예산현액 (J=H+I)
		국고 (A)	지방비(B)			민자 /기금 (C)	합계 (D=A+B+C)	국고 (E)	지방비(F)			민자/기타 (기금) (G)	합계 (H=E+F+G)	국고	지방비	기타	소계 (I)
			시도	시군구	소계				시도	시군구	소계
은평구	은평자연환경 역사박물관 건립	3,000	3,000	2,437	5,437		8,437	0	0	2,305	2,305	0	2,305	1,456	2,956	0	4,412	6,717

시도 시군구	시설명	예산현액 (J)	집행액(2013년 12월말 기준)						내년도 이월액(예상)						불용액
																			집행율(T=N/J*100
			국고 (K)	지방비(L)			민자 /기금 (M)	합계 (N=K+L+M)	국고 (O)	지방비(P)			민자/기타 (기금) (Q)	합계 (R=O+P+Q)	국고	지방비	기타	소계 (S)
				시도	시군구	소계				시도	시군구	소계
은평구	은평자연환경 역사박물관 건립	6,717	959	959	1,281	2,240	0	3,199	286	286	981	1,267	0	1,553	0	0	0	0	48%

□ 집행부진 및 이월 사유

ㅇ 공사 준공일 및 관급자재 납기일 미도래 등으로 인하여 국비 집행 잔액 발생

ㅇ 집행 잔액(497백만원) 중 211백만원은 ‘14. 2월까지 관급자재 구입비로 집행 예정이며,

286백만원은 ‘14년도로 이월 예정임

□ 추진 경과

ㅇ 2012. 05월 : 건립부지 이전계획 수립

ㅇ 2012. 09월 : 기공식 개최

ㅇ 2013. 09월 : 골조공사 완료 및 전시물 제작ㆍ설치공사 착공

□ 향후 계획

ㅇ 2014. 04월 : 건축공사 준공

ㅇ 2014. 06월 : 전시물 제작ㆍ설치공사 준공 및 박물관 개관

작성기준일 : 2013년  12월  31일