<서식 3>

소외·낙후지역 도시경관개선(총괄)

(도시관리과/자치구 경관사업부서)

□ 사업개요

◦위치 : 성동구 성수동 등 11개소

(성동구2, 광진구, 중랑구2, 도봉구2, 강서구2, 영등포구2)

◦기간 : ’17.01.01.~’18.09.30.

◦총사업비 : 6,250,632천원(당해-4,270,000천원, 명시-1,980,632천원)

□ 사고이월 요구 세부내역

◦이월내역

- 예산과목 : 도시건축공동위원회 운영 등, 소외·낙후지역 도시경관개선, 시설비및부대비, 시설비

- 이월세부내역

(단위 : 원)

구 분	예산현액(A) '16이월비 제외	(재)배정액 (B)	원인행위액 (C)	지 출 액 (D)	사 고 이 월 액(E) (원인행위미필액)	집행잔액 (A-(D+E))
계	6,250,632,000	5,708,133,500	5,339,452,840	1,185,729,750	4,207,356,180 (53,633,090)	407,546,070
공 사 비	6,250,632,000	5,708,133,500	5,339,452,840	1,185,729,750	4,207,356,180 (53,633,090)	407,546,070
이전비․기타

◦이월사유

- 성동구 2개 사업은 구비 확보 지연으로 인한 ’17.11월 공사발주로 절대공기 부족(2018.09.30. 준공예정)

- 광진구 사업은 설계용역 2회 유찰 및 기본 및 실시설계 용역기간 10개월 소요 등으로 용역기간 부족(2018.01.22. 완수예정)

- 중랑구 2개 사업은 기본 및 실시설계 용역기간 10개월 소요 등으로 망우동 사업은 ’17.09월 공사발주, 상봉동 사업은 ’17.12월 공사발주 되어 절대공기 부족

- 도봉구 도봉역, 강서구 화곡동 및 개화동 사업, 영등포구 양평동 및 문래동 사업 등 5개 사업은 기본 및 실시설계 용역기간 10개월 소요 등으로 ’17.11월~12월 공사 발주되어 절대공기 부족

- 도봉구 창3동 사업은 설계용역 2회 유찰로 설계·시공 일괄입찰로 사업추진함에 따라 ’17.6월 착수하여 준공기한 미도래

<서식 3>

성수동 수제화거리 경관개선사업

(도시관리과/성동구 토목과)

□ 사업개요

◦위 치 : 성수2가3동 276-5~성수2가1동 339-22

◦규 모 : 수제화거리 도시경관 및 보행환경 개선사업

◦기 간 : 2017.12 ～2018.9.30.(동절기 공사중지로 2018년 3월 착공)

◦총사업비: 금 1,000,000천원(시:구=5:5 매칭)

□ 사고이월 요구 세부내역

◦이월내역

- 예산과목 : 도시건축공동위원회 운영 등, 소외·낙후지역 도시경관개선, 시설비및부대비, 시설비

- 이월세부내역

(단위 : 원)

구 분		예산현액(A) '16이월비 제외	(재)배정액 (B)	원인행위액 (C)	지 출 액 (D)	사 고 이 월 액(E) (원인행위미필액)	집행잔액 (A-(D+E))
계		482,417,660	469,850,000	469,850,000		469,850,000 (0)	12,567,660
공 사 비		469,850,000	469,850,000	469,850,000		469,850,000 (0)	0
	도 급 비	276,432,630	276,432,630	276,432,630		276,432,630 (0)	0
	관 급 비	193,417,370	193,417,370	193,417,370		193,417,370 (0)	0
보 상 비						( )
이전비․기타		12,567,660				( )	12,567,660

◦이월사유

- 본 공사는 서울시 및 구비 예산이 연말에 교부되어 공사 사전 절차 이행 및 절대공기 부족으로 당해연도 사업 추진이 어려워 2017회계 연도 내 예산 사용이 불가함.

<서식 3>

성수동 상원길 경관개선사업

(도시관리과/성동구 토목과)

□ 사업개요

◦위 치 : 성수1가2동 656-665 ~ 12-1

◦규 모 : 성수동 상원길 도시경관 및 보행환경 개선사업

◦기 간 : 2017.12 ～2018.9.30.(동절기 공사중지로 2018년 3월 착공)

◦총사업비: 금 1,200,000천원(시:구=5:5 매칭)

□ 사고이월 요구 세부내역

◦이월내역

- 예산과목 : 도시건축공동위원회 운영 등, 소외·낙후지역 도시경관개선, 시설비및부대비, 시설비

- 이월세부내역

(단위 : 원)

구 분		예산현액(A) '16이월비 제외	(재)배정액 (B)	원인행위액 (C)	지 출 액 (D)	사 고 이 월 액(E) (원인행위미필액)	집행잔액 (A-(D+E))
계		582,417,660	563,851,000	563,851,000		563,851,000 (0)	18,566,660
공 사 비		563,851,000	563,851,000	563,851,000		563,851,000 (0)	0
	도 급 비	563,851,000	563,851,000	563,851,000		563,851,000 (0)	0
	관 급 비					0 (0)	0
보 상 비						( )
이전비․기타		18,566,660				( )	18,566,660

◦이월사유

- 본 공사는 서울시 및 구비 예산이 연말에 교부되어 공사 사전 절차 이행 및 절대공기 부족으로 당해연도 사업 추진이 어려워 2017회계 연도 내 예산 사용이 불가함.

<서식 3>

건대역사하부공간 주변 경관개선사업

기본 및 실시설계용역

(시 도시관리과/광진구 도시계획과)

□ 사업개요

◦위치 : 2호선 건대역사 주변(화양동 6-1 일대)

◦규모 : 12,000㎡ (길이 : 400m, 폭 : 30m)

◦기간 : 2017. 7. 27. ~ 2018. 1. 22.(60%)

◦총사업비 : 1,000,000천원(시비 500,000천원)

□ 사고이월 요구 세부내역

◦이월내역

- 예산과목 : 도시건축공동위원회 운영 등, 소외·낙후지역 도시경관개선, 시설비및부대비, 시설비

- 이월세부내역

(단위 : 원)

구 분	예산현액(A) '16이월비 제외	(재)배정액 (B)	원인행위액 (C)	지출액 (D)	사 고 이 월 액(E) (원인행위미필액)	집행잔액 (A-(D+E))
계	500,000,000	50,000,000	50,000,000	0	50,000,000 ( - )	450,000,000
시 설 비	500,000,000	50,000,000	50,000,000	0	50,000,000 ( - )	450,000,000

◦이월사유

- 지하철 역사의 특성을 감안하여 서울교통공사 의견 수렴 및 기본 및 실시설게 용역 입찰에 따른 사업자 선정 2회 유찰 등 사업 지연사유 발생(2018년 1월 용역 완료(예정)

<서식 3>

맛솜씨길 문화의 거리 조성 사업

(서울시 도시관리과/중랑구 기업지원과)

□ 사업개요

◦위치 : 중랑구 용마산로115길(듀오트리스 ～ 용마산로)

◦규모 : L = 665m, W = 14m

◦기간 : 2016.01.～ 2018.04.30.(’17.12월말 현재 공정율 10%)

◦총사업비 : 10억원(시비 5억원, 구비 5억원)

□ 사고이월 요구 세부내역

◦이월내역

- 예산과목 : 도시건축공동위원회 운영 등, 소외·낙후지역 도시경관개선, 시설비및부대비, 시설비

- 이월세부내역

(단위 : 원)

구 분		예산현액(A) '16이월비 제외	(재)배정액 (B)	원인행위액 (C)	지 출 액 (D)	사 고 이 월 액(E) (원인행위미필액)	집행잔액 (A-(D+E))
계		465,796,500	465,796,500	465,796,500	0	465,796,500 ( )	0
공 사 비		465,796,500	465,796,500	465,796,500	0	465,796,500 ( )	0
	도 급 비			263,824,700		( )
	관 급 비			201,971,800		( )
보 상 비						( )
이전비․기타						( )

◦이월사유

- 2017.09. 설계 완료 : 지역주민 의견수렴 및 민원 협의 지연

- 2017.10. 공사 발주

- 보․차도 정비 공사기간 연장

□ 지하 지장물(상수도관 및 가스관 등)로 인해 지중화 지상기기 위치 변경이 불가피하여 굴착구간 연장으로 지중화 공사기간 연장

□ 서울시 closing-11정책으로 동절기(12월~2월) 공사 불가

<서식 3>

상봉중앙로 경관개선사업

(시 도시관리과/중랑구청 도로과)

□ 사업개요

◦위치 : 봉화삼거리 ~ 망우로

◦규모 : 차도정비 B=15m, L=650m

보도정비 B=2~3M, L=650M(양측)

지하차도 보수보강등 기타 1식

◦기간 : 2017.12 ～ 2018.04.30.

◦총사업비 : 1,100백만원(시비 5.5억원, 구비 5.5억원)

□ 사고이월 요구 세부내역

◦이월내역

- 예산과목 : 도시건축공동위원회 운영 등, 소외·낙후지역 도시경관개선, 시설비및부대비, 시설비

- 이월세부내역

(단위 : 원)

구 분	예산현액(A) '16이월비 제외	(재)배정액 (B)	원인행위액 (C)	지 출 액 (D)	사 고 이 월 액(E) (원인행위미필액)	집행잔액 (A-(D+E))
계	550,000,000	550,000,000	550,000,000	71,647,000	478,353,000 ( 0 )
공사비	550,000,000	550,000,000	478,353,000		478,353,000 ( 0 )
용역비			71,647,000	71,647,000	( )

◦이월사유

- 상봉중앙로 경관개선사업에 대한 공사계약이 12월에 예정되어 있어 동절기 공사추진에 따른 품질 저하와 금년 내 공사완료가 어려움에 따라 사업비를 다음연도로 이월하여 사업추진에 만전을 기하고자 함

<서식 3>

도봉역 주변 경관개선사업

(시 도시관리과/도봉구 도시계획과)

□ 사업개요

◦위치 : 도봉로 150가길(도봉역 주변)

◦규모

- 역사하부 보행공간L=280m

- 동측 이면도로L=340m 경관개선

◦기간 : 2017.12.18 ～ 2018.06.30(’17.12월말 현재 공정율 0% )

◦총사업비 : 1,000백만원(시비 5억원, 구비 5억원)

□ 사고이월 요구 세부내역

◦이월내역

- 예산과목 : 도시건축공동위원회 운영 등, 소외·낙후지역 도시경관개선, 시설비및부대비, 시설비

- 이월세부내역

(단위 : 원)

구 분		예산현액(A) '16이월비 제외	(재)배정액 (B)	원인행위액 (C)	지 출 액 (D)	사 고 이 월 액(E) (원인행위미필액)	집행잔액 (A-(D+E))
계		500,000,000	500,000,000	449,912,950		449,912,950 ( )	50,087,050
공 사 비						( )
	도 급 비	455,000,000	455,000,000	413,640,500		413,640,500 ( )	45,509,500
	관 급 비					( )
보 상 비						( )
설 계 비		45,000,000	45,000,000	36,272,450		36,272,450 ( )	4,577,550

◦이월사유

- 사업대상지인 도봉역사 건물 및 철도부지 관리주체가 한국철도공사와 한국철도시설공단으로 이원화됨에 따라 사업시행을 위한 협의기간 장기 소요로 설계용역 및 시설공사 발주 지연(시설공사 준공기한 미 도래)

- 설계용역 추진 중 당초 과업내용에서 정한 서울시 경관자문회 3회 실시 외 코레일에서 요구하는 ‘코레일 디자인심의’가 추가됨에 따라 용역 준공기한(12월29일) 내  조기 준공 불가(2018년 용역 준공검사 및 준공금 지급 )

<서식 3>

창3동 주민과 함께 꾸미는 경관개선사업

(시 도시관리과/도봉구 도시계획과)

□ 사업개요

◦위치 : 도봉구 우이천로4가길 일대

◦규모 : A=28,570㎡

◦기간 : 2017.6.8. ～ 2018.6.7. (’17.12월말 현재 공정율 30%)

◦총사업비 : 600백만원(시비 3억원, 구비 3억원)

□ 사고이월 요구 세부내역

◦이월내역

- 예산과목 : 도시건축공동위원회 운영 등, 소외·낙후지역 도시경관개선, 시설비및부대비, 시설비

- 이월세부내역

(단위 : 원)

구 분		예산현액(A) '16이월비 제외	(재)배정액 (B)	원인행위액 (C)	지 출 액 (D)	사 고 이 월 액(E) (원인행위미필액)	집행잔액 (A-(D+E))
계		300,000,000	300,000,000	285,000,000	78,980,000	206,020,000 ( )	15,000,000
용역·공사비		300,000,000	300,000,000	285,000,000	78,980,000	206,020,000 ( )	15,000,000
	도 급 비					( )
	관 급 비					( )
보 상 비						( )
이전비․기타						( )

◦이월사유

- 경관개선사업 용역을 협상에 의한 계약으로 발주하였으나 2회유찰(등록업체 없음)됨에 따라 용역 및 시공 일괄입찰로 사업추진

- 2017.6월 착수하여 2018년 6월까지 용역·공사기간으로 준공기한 미도래

<서식 3>

가로공원로76길 외 2개소 도시경관 개선사업

(시 도시관리과/강서구 도로과)

□ 사업개요

◦위    치 : 가로공원로76길 외 2개소

◦규    모 : B=1.2∼2.2m, L=3,127m, A=48.4a

◦기    간 : 2018.03 ～ 2018.09

◦총사업비 : 1,400백만원(시비 7억원, 구비 7억원)

□ 사고이월 요구 세부내역

◦이월내역

- 예산과목 : 도시건축공동위원회 운영 등, 소외·낙후지역 도시경관개선, 시설비및부대비, 시설비

- 이월세부내역

(단위 : 원)

구 분		예산현액(A) '16이월비 제외	(재)배정액 (B)	원인행위액 (C)	지 출 액 (D)	사 고 이 월 액(E) (원인행위미필액)	집행잔액 (A-(D+E))
계		700,000,000	700,000,000	631,253,580	27,682,000	603,571,580 ( 0 )	68,746,420
공 사 비				603,571,580	0	603,571,580 ( 0 )	0
	도 급 비			370,210,500	0	370,210,500 ( 0 )	0
	관 급 비			233,361,080	0	233,361,080 ( 0 )	0
보 상 비				0	0	0 ( 0 )	0
설 계 비				27,682,000	27,682,000	0 ( 0 )	0

◦이월사유

- 본 사업은 도시경관개선 및 보도정비로 주민불편 민원을 해소코자 시행하는 사업으로 설계용역 및 서울시 디자인 최종자문 지연으로 연도폐쇄기한 전 공사완료가 불가하므로 사업의 원활한 추진을 위하여 사고이월이 불가피 함.

<서식 3>

개화길 외 5개소 도시경관개선사업

(시 도시관리과/강서구 도로과)

□ 사업개요

◦위    치 : 개화길 외 5개소

◦규    모 : 아스팔트 포장정비(100.4@), 경계석 측구 정비(2,936m) 등

◦기    간 : 2017. 12. 26. ～  2018. 6. 30.

◦총사업비 :  1,200백만원(시비 6억원, 구비 6억원)

□ 사고이월 요구 세부내역

◦이월내역

- 예산과목 : 도시건축공동위원회 운영 등, 소외·낙후지역 도시경관개선, 시설비및부대비, 시설비

- 이월세부내역

(단위 : 원)

구 분		예산현액(A) '16이월비 제외	(재)배정액 (B)	원인행위액 (C)	지 출 액 (D)	사 고 이 월 액(E) (원인행위미필액)	집행잔액 (A-(D+E))
계		600,000,000	600,000,000	544,616,350	23,728,000	520,888,350	55,383,650
공 사 비				520,888,350	0	520,888,350	0
	도 급 비			220,257,050	0	220,257,050	0
	관 급 비			300,631,300	0	300,631,300	0
보상비				0	0	0	0
설계비				23,728,000	23,728,000	0	0

◦이월사유

- 본 사업은 도시경관개선 및 도로정비로 주민불편 민원을 해소코자 시행하는 사업으로 설계용역 및 서울시 디자인 최종자문 지연으로 연도폐쇄기한 전 공사완료가 불가하므로 사업의 원활한 추진을 위하여 사고이월이 불가피 함.

<서식 3>

양평동 도시경관개선공사

(시 도시관리과/영등포구 도로과)

□ 사업개요

◦위치 : 양평동 영등포로11길 12 일대

◦규모 : 보도정비 A=12.5a, 도막형포장 A=698㎡, 경계석정비 L=1,842m

◦기간 : 2017. 12. 11. ～  2018. 6. 30.

(’17.12월말 현재 공정율 5%)

◦총사업비 : 200백만원

□ 사고이월 요구 세부내역

◦이월내역

- 예산과목 : 도시건축공동위원회 운영 등, 소외·낙후지역 도시경관개선, 시설비및부대비, 시설비

- 이월세부내역

(단위 : 원)

구 분		예산현액(A) '16이월비 제외	(재)배정액 (B)	원인행위액 (C)	지 출 액 (D)	사 고 이 월 액(E) (원인행위미필액)	집행잔액 (A-(D+E))
계		200,000,000	193,228,000	157,919,880	19,728,000	159,645,120 (21,453,240)	20,626,880
공 사 비				157,919,880		( )
	도 급 비			97,223,320	19,728,000	77,495,320 ( )
	관 급 비			60,696,560		60,696,560 ( )
보 상 비						( )
이전비․기타						(21,453,240)

◦이월사유

- ‘17.3.9. 용역시행하여 4.18일 착수보고, 6.21일 중간보고 8.25일 최종보고를 실시한 후 최종보고의 결과에 따라 실시설계를 수행하여 10월31일 용역 준공후 11월 공사발주로 인한 절대공기 부족으로 인한 사고이월

<서식 3>

문래동 도시경관개선공사

(시 도시관리과/영등포구 도로과)

□ 사업개요

◦위치 : 문래동 선유로9길 일대

◦규모 : 보도정비 A=19.4a, 경계석정비 L=377m

◦기간 : 2017. 12. 11. ～  2018. 6. 30.

(’17.12월말 현재 공정율 5%)

◦총사업비 : 300백만원

□ 사고이월 요구 세부내역

◦이월내역

- 예산과목 : 도시건축공동위원회 운영 등, 소외·낙후지역 도시경관개선, 시설비및부대비, 시설비

- 이월세부내역

(단위 : 원)

구 분		예산현액(A) '16이월비 제외	(재)배정액 (B)	원인행위액 (C)	지 출 액 (D)	사 고 이 월 액(E) (원인행위미필액)	집행잔액 (A-(D+E))
계		300,000,000	290,306,000	236,879,830	29,592,000	239,467,680 (32,179,850)	30,940,320
공 사 비				236,879,830		( )
	도 급 비			145,834,980	29,592,,000	116,242,980 ( )
	관 급 비			91,044,850		91,044,850 ( )
보 상 비						( )
이전비․기타						(32,179,850)

◦이월사유

- ‘17.3.9. 용역시행하여 4.18일 착수보고, 6.21일 중간보고 8.25일 최종보고를 실시한 후 최종보고의 결과에 따라 실시설계를 수행하여 10월31일 용역 준공후 11월 공사발주로 인한 절대공기 부족으로 인한 사고이월