【별지 제1호서식】

설계경제성 (■심사 □심사제외) 신청서

차집관로 성능개선 기본 및 실시설계 용역의 기본, 실시설계에 대하여 다음과 같이 설계경제성 (■심사 □심사제외)를 신청합니다.

1. 사 업 명 :  차집관로 성능개선 기본 및 실시설계

2. 사업개요

○ 주 용 도 : 통수능 부족관로 및 우수토실 정비

○ 규    모 : 차집관로 개량(D500㎜~□1.8x1.8m, L=10,836.2m)

(신설 L=708.5m 우선시공분 제외), 우수토실 개량(31개소)

3. 위    치 : 서울시 전역

4. 공 사 비 : 49,011백만 원

○ 입찰방법 : 공개경쟁입찰

○ 총사업비 : 58,029백만원
용역비(설계 1,464백만원, 감리 2,876백만원),

공사비(차집관로 개량 49,011백만원,

차집관로 신설  4,678백만원(우선시공분 심사제외))

5. 사업기간 : 2016년 4월 ~ 2018년 3월

6. 실시설계 공정률(%) : 95.5% (설계내역서 유)

7. 설계상 특기사항

- 개봉유수지 차집관로 신설 우선시공분 (D300㎜~□1.5×1.5m, L=708.5m) 심사제외

붙 임 : 1. 설계경제성 심사 대상사업 현황 1부

2. 설계경제성 심사 제약사항 1부

2018. 3.

신청부서 :  물재생시설과

서울시 계약심사과장 귀하

설계경제성 심사 대상사업 현황

□ 조감도 및 시설계획도

□ 사업현황

○ 공사개요 : 차집관로 개량(D500㎜~□1.8×1.8m, L=10,836.2m),

우수토실 개량(31개소)

○ 위    치 : 서울시 전역

○ 총공사비 : 49,011 (백만원)

○ 공사기간 : 2019년 1월 ~ 2025년 10월(예정)

□ 주요 공법

○ 굴착공법 : 자연터파기, 조립식간이흙막이, 시트파일 공법

□ 공종별 규모

공 종	공사물량	공사비(백만원)	비율(%)
공사비		49,011	100
도급비	차집관로 개량(D500mm~1.8×1.8m, 10,836.2m) 우수토실 개량(31개소)	43,913	90
관급자재비	1식	4,136	8
GIS DB 구축비	GIS측량 및 DB구축 : 1식	82	-
폐기물처리비	폐아스콘 : 4,545ton 폐콘크리트 : 14,749ton	880	2

□ 추진경과(인가, 허가, 승인 등 행정절차 중심으로 작성)

○ ‘09.07 : 차집관로 성능개선 추진계획 보고

○ ‘10.05 ∼ ’11.10 :  차집관로 성능개선 기본・실시설계 및 전산화DB구축용역(중랑, 난지)

○ ‘11.10 ∼ ’13.08 :  차집관로 성능개선 기본・실시설계 및 전산화DB구축용역(탄천, 서남)

○ ‘16.04.20 : 차집관로 성능개선 기본 및 실시설계 착수 (금회사업)

○ ‘16.12.01 : 차집관로 성능개선 자문회의 개최(1차)

○ ‘17.03.    : 개봉유수지 차집관로 단절구간 신설공사 우선시공분 투자심사완료

○ ‘18.02.27 : 차집관로 성능개선 자문회의 개최(2차)

□ 총사업비 현황

○ 총사업비 :    58,029백만원

○ 공 사 비 :    49,011백만원

○ 기    타 :     9,018백만원 (우선시공분 공사비 4,678백만원 포함)

□ 행정절차 이행 완료여부 : 건설기술심의 예정

설계경제성 심사 제약사항

○ 공사명 :  차집관로 성능개선

2018 .    .     .

연번	제 약 사 항		사 유 (구체적으로 작성)	비고
	법적사항	법적 외 사항 (민원, 예산 등)

※ 제약사항이 없는 경우 설계경제성 심사 시 공사계획 및 예산타당성 등 모든 분야를

종합검토 함.

년     월     일

작성자 :  담당           (인)

확인자 :  발주기관장     (인)

【별지 제1-1호서식】

설계경제성 심사 제외 사유

○ 공사명 :  OO사업

연번	사 유 (구체적으로 작성)	비고

년     월     일

작성자(담당) :             (인)

확인자(발주기관장) :             (인)