설계경제성 심사 신청(서식)

(기본, 실시) 설계경제성(VE) (✓□심사 □심사제외) 신청서

안양천 횡단보도교 신설사업 (기본 및 실시)설계에 대하여 다음과 같이 설계경제성 (심사)를 신청합니다.

1. 사 업 명 :  안양천 횡단보도교 신설사업

2. 사업개요

○ 규    모 : 보행교량 설치(폭 4.5m, 연장 200m)

○ 사업기간 : 2018. ~ 2020.

○ 목    적 : 안양천으로 단절된 독산1동 분소지역의 주민 및 학생들의 보행환경 개선

3. 위    치 : 금천구 금천현대아파트(안양천 동측) ~ 독산1동 분소지역(안양천 서측)

4. 공 사 비 :  8,500백만원

○ 입찰방법 :  제한경쟁입찰

○ 총사업비 : 9,425백만원(설계250억, 감리 675억, 공사비 8,500백만원

5. 용역기간 : 2018.07.06. ~ 2018.12.05.

6. 설계 공정률(%) : 80%

※ 실시설계VE 심사 시기는 공사원가 작성 이후로 계약심사과와 일정 별도 협의

7. 설계상 특기사항

- 특정공법 및 신기술 자체공법 선정 완료

- 서울시 빛공해 심의 완료

붙    임 : 1. 설계경제성 심사 대상사업 현황 1부. 끝.

2018  . 11  .

신청부서 : 금천구청 도로과

서울시 계약심사과장 귀하

설계경제성(VE) 심사 대상사업 현황

□ 조감도 및 시설계획도

□ 사업현황

○ 공사개요 : 안양천 횡단보도교 설치(폭 4.5m, 연장 200m)

○ 위    치 : 금천구 금천현대아파트(안양천 동측) ~ 독산1동 분소지역(안양천 서측)

○ 총공사비 : 8,500백만원

○ 공사기간 : 2019. 1.  ~ 2020. 6

□ 주요 공법

○ 4경간 연속 2면 1주탑 비대칭 사장교

○ 본선교량 상부 TCB거더 적용

○ 경사로 상부 DP거더 적용

○ 하부 구조 Drill Shaft Pier 공법 적용

□ 분야별 공사비 규모

분야	공사물량	공사비(백만원)	비율(%)
건축	E/V 3개소	7,500	8.8
도로	경사로 접속도로	800	0.1
교량	본선교량 및 경사로	65,000	76.5
조경	수목이식	2,700	3.2
전기	경관조명 및 EV용	9,000	11.4
계			100

□ 추진경과(인가, 허가, 승인 등 행정절차 중심으로 작성)

○ '17. 09.03. : 타당성조사 및 기본계획 용역 착수(금천구)

○ '17. 03.07. : 타당성조사 용역 검증 완료(서울공공투자센터)

○ '17. 10.31. : 수시 서울시 투자심사 결과(적정)

○ '17. 11.07. : 안양천 횡단연결로(보도교)사업 추진계획 수립(시 도로계획과)

○ '18. 03.16. : 용역발주 심의(기술심사담당관)

○ '18. 04.~06. : 설계공모 시행  및 당선자 선정

○ '18. 07.02. : 설계용역 계약 및 착수(7.6)

○ '18. 10.16. : 서울시 좋은빛위원회 심의(도시빛정책과)

○ '18. 10.18. : 하천점용 관련 사전 협의 완료(서울국토관리청)

○ '18. 11.05. : 건설기술심의(설계심의) 요청(기술심사담당관)

○ '18. 11.07. : 자문회의(2차) 및 공법선정 심사

□ 총사업비 현황

○ 총사업비 :  9,425백만원

○ 공 사 비 :  8,500백만원

○ 기    타 :    925백만원(설계, 감리 등)