【별지 제1호서식】

설계경제성 (■심사 □심사제외) 신청서

이촌지구 자연(형)호안 복원사업 실시설계에 대하여 다음과 같이 설계경제성 (■심사 □심사제외)를 신청합니다.

1. 사 업 명 : 이촌지구 자연(형)호안 복원사업

2. 사업개요

○ 주 용 도 : 자연(형)호안 복원

○ 부지면적 : 약 93,360㎡

○ 규    모 : 약 2.1㎞

3. 위    치 : 이촌한강공원(한강대교∼동작대교)

4. 공 사 비 : 5,677백만원

○ 입찰방법 : 일반공개경쟁입찰

○ 총사업비 : 5,921백만원(설계 244백만원, 공사비 5,677백만원)

5. 사업기간 : 2016. 1. ∼ 2018. 12.

6. 실시설계 공정률(%) : 79% (설계내역서 유)

7. 설계상 특기사항

-

-

붙 임 : 1. 설계경제성 심사 대상사업 현황 1부

2. 설계경제성 심사 제약사항 1부

2016. 10.

신청부서 : 한강사업본부 생태공원과

서울시 계약심사과장 귀하

설계경제성 심사 대상사업 현황

□ 조감도 및 시설계획도

□ 사업현황

○ 공사개요 : 자연(형)호안 조성 등 생태환경 복원사업 추진

○ 규     모 : 약 2.1㎞

○ 위    치 : 이촌한강공원 (한강대교∼동작대교)

○ 총공사비 : 5,921백만원(설계비 244백만원, 공사비 5,677백만원)

○ 공사기간 : 2017. 4. ∼ 2018. 12.

□ 주요 공법

○ 호안 : 사석+식생매트

○ 포장 : 아스콘, 경화흙포장, 부정형판석포장

○ 식재 : 교목류, 관목류, 초본류

○ 시설물 : 관찰데크, 전망데크

○ 구조물 : 배수통관

□ 공종별 규모

공 종	공사물량	공사비(백만원)	비율(%)
토목공사	- 토공(절토:77,970㎥,성토:676㎥) - 우수공(12개소) - 자전거도로(L=778m)	1,804	32
호안공사	- 자연형호안 L=1.818km	903	16
조 경 공	- 포장공(면적:6,750m2) - 시설물공(소생물 서식처 1식, 관찰데크 1식, 전망데크 1식) - 식재공(교목:155주, 관목:3,024주, 초본류:669,293주, 이식수목:338주)	1,010	18
부대공	1식	134	2
제잡비	1식	1,463	26
관급자재대	1식	363	6
계		5,677	100

□ 추진경과(인가, 허가, 승인 등 행정절차 중심으로 작성)

○ 2016. 05. 03  : 설계용역 착수

○ 2016. 11.     : 하천점용허가 신청

□ 총사업비 현황

○ 총사업비 :  5,921백만원

○ 공 사 비 :  5,677백만원

○ 설 계 비 :   244백만원

□ 행정절차 이행 완료여부

○ 2016. 11.  : 하천점용허가 신청 진행중

설계경제성 심사 제약사항

○ 공사명 : 이촌지구 자연(형)호안 복원사업                 2016. 10.    .

연번	제 약 사 항		사 유 (구체적으로 작성)	비고
	법적사항	법적 외 사항 (민원, 예산 등)

※ 제약사항이 없는 경우 설계경제성 심사 시 공사계획 및 예산타당성 등 모든 분야를

종합검토 함.

2016년  10월     일

작성자 :    서 은 교     (인)

확인자 :  한강사업본부장 (인)