준공기한 연기 의뢰서

1. 용역개요

○ 용 역 명 : 월드컵대교 남단 연결로 및 접속교 보완설계 용역

○ 계 약 자 : ㈜동일기술공사, ㈜동성엔지니어링, ㈜태조엔지니어링

○ 계약금액 : 917,600,000원

○ 계약년월일 : 2017. 8.  7.

○ 착수년월일 : 2017. 8.  7.

○ 준공예정일 : 2018. 6. 30.

2. 보고내용

❍ 준공기한 연기 : 62일

- 용역기간 : 당초 ′17. 8. 7.~′18. 6. 30.⇒ 변경′17. 8. 7.~′18. 8. 31.

❍ 귀책소재 : 서울특별시

❍ 지체상금 : 미 부 과

❍ 연기사유 : '18. 4. 최종 노선선형 확정 후 지하매설물 조사결과 통신, 한전, 도시가스 등 예상하지 못한 지장물이 저촉으로 인한 선형 조정, 실시설계(안) 관계기관 협의 등 설계 완성도 확보를 위하여 2개월의 설계기간 연장이 필요

2018.   6.    .

확인자 : 토 목 부 장     김영수

작성자 : 지방시설주사    김동수

서울특별시도시기반시설본부 분임재무관 귀하