준공기한 연기 의뢰서

1. 용역개요

○ 용 역 명 : 제2자유로 종점부(난지도길)입체화 실시설계 용역

○ 계 약 자 : ㈜유신, ㈜동일기술공사, ㈜진우엔지니어링코리아, ㈜도진엔지니어링

○ 계약금액 : 1,247,900,000원

○ 계약년월일 : 2017. 5.  8.

○ 착수년월일 : 2017. 5. 10.

○ 준공예정일 : 2017. 3. 30.

2. 보고내용

○ 준공기한 연기 : 62일

- 용역기간 : 당초 ′17. 5. 10.~′18. 3. 30.⇒ 변경′17. 5. 10.~′18. 5. 31.

○ 귀책소재 : 서울특별시

○ 지체상금 : 미 부 과

○ 연기사유 : 설계VE 요청(토목부-649,′18. 1. 10.)에 대하여 LH공사에서 설계VE 워크샆을 ′18. 4. 2.(인천파주단지사업1부-831호,′18. 3. 8.) 실시함에 따라 설계VE 반영 및 관련기관 협의 등 실시설계에 소요되는 2개월 공기연장 필요

2018. 3.

확인자 : 토 목 부 장     김영수

작성자 : 지방시설주사    윤창렬

서울특별시도시기반시설본부 분임재무관 귀하