【 별지서식 제8호 】

투자심사사업 관리카드

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□ 사 업 명 :					시립종로청소년수련관 건립
□ 투자심사결과 (단위 : 억원)
구분		사 업 개 요							투 자 심 사							심 사 결 과						비 고
		기 간		사업량			총사업비		심사일자			심사기관				결 과		내 용
당 초		2016.05~2019.04		부지:5,177㎡ 연면적:4,840㎡			208		2016.3.2			행자부				조건부		- 운영 효율화 및 접근성 제고 방안 마련 - 실시설계 완료 후 2단계 심사
재심사
□ 사업추진상황 (단위 : 억원)
구 분			심사당시 사 업 비			연 도 별 집 행
						합계		기투자			기준연도(Y)			Y+1			Y+2		Y+3	Y+n		비 고
계			208			1					1
재원별	국 비		46
	양여금
	교부세
	시도비		162			1					1
	시군비
	지방채
	민 자
	기 타
추진 상황	내 용										도시계획 시설결정
	공정율										-
□ 문제점 및 대책
문 제 점													대 책
해당없음													해당없음
□ 기타특이사항
해당없음
□ 사업추진부서
기 관 명			서울시청							담당부서					청소년담당관						완료일자
담 당 자			백미화							연 락 처					2133-4124						-

【 별지서식 제8호 】

투자심사사업 관리카드

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□ 사 업 명 :					노원청소년직업체험센터 건립
□ 투자심사결과 (단위 : 억원)
구분		사 업 개 요							투 자 심 사							심 사 결 과						비 고
		기 간		사업량			총사업비		심사일자			심사기관				결 과		내 용
당 초		2014.7~ 2016.12		부지:2,519㎡ 연면적:2,840㎡			94		2014.8.20			서울시 재정담당관				적정		청소년 진로교육의 수요급증 및 비진학 청소년에 대한 형평성 있는 진로 교육 기회 제공 등 사업의 필요성이 인정됨
재심사
□ 사업추진상황 (단위 : 억원)
구 분			심사당시 사 업 비			연 도 별 집 행
						합계		기투자			기준연도 (Y)			Y+1			Y+2		Y+3	Y+n		비 고
계			94			3								1			2
재원별	국 비		28
	양여금
	교부세
	시도비		66			3								1			2
	시군비
	지방채
	민 자
	기 타
추진 상황	내 용													현상설계			이주보상
	공정율													5%			20%
□ 문제점 및 대책
문 제 점													대 책
- 건립부지 위 무허가건물 소유주 중 일부 반발 - 인접 혜성여고와 진입도로 중복사용 문제로, 학교측과 인근 중계9단지 거주민들의 차량 통행대책 개선 요구													- 주민설명회, 노원구 협조 등 무허가건물 소유주와의 사전협의로 원활한 보상절차 진행 추진 중 - 출입구 진입로 패턴 표시 및 시선 유도봉 설치 예정
□ 기타특이사항
해당없음
□ 사업추진부서
기 관 명			서울시청							담당부서					청소년담당관						완료일자
담 당 자			차인석							연 락 처					2133-4126