2017회계연도 사고이월 명세표

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

연 번	이월사업명	2017 회계연도 예산					지출원인행위액 (2017.12.31 기준)			지출액 (2017.12.31 기준)		2017 회계연도 이월예산				불용액	이 월 사 유	예산편성별 (당초･추경)
		관･항･세항	목 (세목)	예산현액	배정액	배정 월일	월일	금액	준 공 예정일 (당초)	월일	금액	관･항･세항	목 (세목)	이월액	준 공 예정일 (변경)
	합 계			20,249,956	19,213,515			16,809,938			9,134,085			8,209,862 (534,009)		2,906,009
1	상수도 요금제도의 합리적인 개선방안 마련을 위한 연구용역 (33205)	상수도사업비용 영업비용 일반관리비 (714-01)	일반운영비 (사무관리비) (201-01)	51,500	51,500	1.19	11.8	48,950	’18.2.28	11.15	19,580	상수도사업비용 영업비용 일반관리비 (714-01)	일반운영비 (사무관리비) (201-01)	29,370	’18.2.28	2,550	학술용역타당성 재심의 및 유찰(2회)로 인해 용역 계약이 지연 <사전절차 지연>	요금관리부 (당초)
2	서울숲-뚝도정수센터간 교환부지 공원조성 사업 (11202)	상수도사업비용 영업비용 정수비 (712-01)	수선유지교체비 (수선유지비) (214-05)	650,000	650,000	3.10 ~ 11.22	9.4 ~ 12.6	641,654	’17.12.27	9.5 ~ 12.11	33,424	상수도사업비용 영업비용 정수비 (712-01)	수선유지교체비 (수선유지비) (214-05)	608,230	’18.3.30	8,346	공원조성 부지 내 지장물(통신케이블 이설 등)로 인해 공사 지연 <공사 중 장애요인 발생>	생산부 (당초)
3	광암정수센터 취수원 이중화 (21101)	자본적지출 유형자산취득 구축물 (234-01)	시설비 및 부대비 (시설비) (401-01)	2,525,548	2,506,548	2.21 ~ 4.25	5.30 ~ 12.19	2,310,545	’17.12.31	6.28 ~ 12.27	1,069,795	자본적지출 유형자산취득 구축물 (234-01)	시설비 및 부대비 (시설비) (401-01)	1,259,750 (19,000)	’18.5.31	196,003	취수원 공급계통(암사, 강북) 결정을 위한 설계용역 일시 중단(2개월) 등으로 인해 지연 <사전절차 지연>	급수부 (당초)
4	사당배수지 건설공사 대체지 타당성 조사 용역 (21104)	자본적지출 유형자산취득 구축물 (234-01)	시설비 및 부대비 (시설비) (401-01)	29,645	29,645	9.28	11.8	26,130	’17.12.22	-	0	자본적지출 유형자산취득 구축물 (234-01)	시설비 및 부대비 (시설비) (401-01)	26,130	’18.2.28	3,515	기술용역 타당성 심사 지연으로 이월 <사전절차 지연>	급수부 (당초)
5	증산배수지 송수관로 정비 및 세척공사 (41101,41201)	자본적지출 유형자산취득 구축물 (234-01)	시설비 및 부대비 (시설비) (401-01)	470,000	445,465	9.15 ~ 12.14	10.23 ~ 12.21	394,331	’17.12.20	10.31	463	자본적지출 유형자산취득 구축물 (234-01)	시설비 및 부대비 (시설비) (401-01)	418,868 (25,000)	’18.8.14	50,669	추가공종(도장 손상부 보수) 발생 및 관내부 건조에 예상보다 장시간이 소요되어 공사 지연 <공사 중 장애요인 발생>	급수부 (당초)
		상수도사업비용 영업비용 배급수비 (713-01)	수선유지교체비 (수선유지비) (214-05)	300,000	298,430	9.15	10.23	258,873	’17.12.20	12.26	9,110	상수도사업비용 영업비용 배급수비 (713-01)	수선유지교체비 (수선유지비) (214-05)	249,763	’18.8.14	41,127
6	국사봉 배수지 건설공사 (21103)	자본적지출 유형자산취득 건설중인자산 (261-01)	시설비 및 부대비 (시설비) (401-01)	5,957,000	5,089,864	1.9 ~ 5.10	3.8 ~ 12.28	4,606,211	’17.12.31	3.10 ~ 12.29	3,928,666	자본적지출 유형자산취득 건설중인자산 (261-01)	시설비 및 부대비 (시설비) (401-01)	677,545	’18.4.23	1,350,789	공사 부지 내 예기치 못한 폐기물(석면 및 혼합건설 폐기물 등) 발생 및 처리로 인한 공사 지연으로 공사기간 연장 <공사 중 장애요인 발생>	시설안전부 (당초)
		자본적지출 유형자산취득 건설중인자산 (261-01)	시설비 및 부대비 (시설부대비) (401-03	16,000	6,000	5.8	8.25 ~ 12.28	4,490	’17.12.31	8.29 ~ 12.29	3,890	자본적지출 유형자산취득 건설중인자산 (261-01)	시설비 및 부대비 (시설부대비) (401-01)	1,000 (400)	’18.4.23	11,110
7	보광배수지(1,2지) 내부 방수방식공사 (22202)	상수도사업비용 영업비용 배급수비 (713-01)	수선유지교체비 (수선유지비) (214-05)	1,805,000	1,805,000	1.16	9.13 ~ 12.14	1,587,620	’17.12.31	9.27 ~ 12.22	520,341	상수도사업비용 영업비용 배급수비 (713-01)	수선유지교체비 (수선유지비) (214-05)	1,149,850 (82,571)	’18.5.26	134,809	내부 방수방식 공사 공법 선정 시 신기술 공법이 선정됨에 따라 건설신기술 심의절차가 추가되어 발주 지연 <사전절차 지연>	중부수도 (당초)
8	2017년 상수도관 전식 방지공사(중부) (22103)	자본적지출 유형자산취득 구축물 (234-01)	시설비 및 부대비 (시설비) (401-01)	360,000	360,000	7.14	9.13	225,821	’17.12.28	9.19	75,576	자본적지출 유형자산취득 구축물 (234-01)	시설비 및 부대비 (시설비) (401-01)	206,245 (56,000)	’18.7.31	78,179	전식방지 공사 구간 내 도로굴착승인이 지연됨에 따라 이월 <사전절차 지연>	중부수도 (당초)
		자본적지출 유형자산취득 구축물 (234-01)	시설비 및 부대비 (감리비) (401-02)	40,000	40,000	7.14	10.11	33,145	’17.12.28	-	0	자본적지출 유형자산취득 구축물 (234-01)	시설비 및 부대비 (감리비) (401-02)	33,145	’18.7.31	6,855
9	한남테니스장~동국대 입구역 송배수관 정비 공사 (41101)	자본적지출 유형자산취득 구축물 (234-01)	시설비 및 부대비 (시설비) (401-01)	1,893,892	1,893,892	1.4	5.22 ~ 12.19	1,553,354	’17.12.27	7.20 ~ 12.11	405,885	자본적지출 유형자산취득 구축물 (234-01)	시설비 및 부대비 (시설비) (401-01)	1,347,469 (200,000)	’18.6.28	140,538	공사 구간 내 암반 구간이 발견되어 공사 기간이 연장됨에 따라 이월 <공사 중 장애요인 발생>	중부수도 (당초)
10	강서수도사업소 청사 증축 및 리모델링 공사 (51102)	자본적지출 유형자산취득 건물 (233-01)	시설비 및 부대비 (시설비) (401-01)	2,635,176	2,569,794	2.22 ~ 12.28	4.17 ~ 12.28	2,384,336	’17.11.28	5.17 ~ 12.29	1,692,255	자본적지출 유형자산취득 건물 (233-01)	시설비 및 부대비 (시설비) (401-01)	692,081	’17.12.18	250,840	시공사 공사 지연으로 인해 이월(지연배상금 부과) <기타>	강서수도 (당초)
		자본적지출 유형자산취득 건물 (233-01)	시설비 및 부대비 (감리비) (401-02)	92,818	44,000	2.22 ~ 4.6	3.9 ~ 4.18	42,669	’17.12.31	3.10	10,890	자본적지출 유형자산취득 건물 (233-01)	시설비 및 부대비 (감리비) (401-02)	31,779	’18.1.31	50,149
11	신길우성3차아파트앞 ~구로디지털역간 송배수관 정비공사 (41101)	자본적지출 유형자산취득 구축물 (234-01)	시설비 및 부대비 (시설비) (401-01)	1,421,902	1,421,902	1.4	6.21 ~ 9.21	1,190,725	’17.12.3	6.22 ~ 12.19	559,641	자본적지출 유형자산취득 구축물 (234-01)	시설비 및 부대비 (시설비) (401-01)	690,951 (59,867)	’18.5.31	171,310	공사 구간 내 도로굴착승인이 지연됨에 따라 이월 <사전절차 지연>	남부수도 (당초)
12	난곡사거리~미성초등 학교간 송배수관 정비 공사 (41101)	자본적지출 유형자산취득 구축물 (234-01)	시설비 및 부대비 (시설비) (401-01)	1,363,203	1,363,203	1.4	4.13 ~ 6.30	1,132,801	’17.12.16	4.13 ~ 12.27	669,829	자본적지출 유형자산취득 구축물 (234-01)	시설비 및 부대비 (시설비) (401-01)	554,143 (91,171)	’18.3.31	139,231	공사 구간 내 용수 발생으로 지반보강 등 신규공종이 발생됨에 따라 지연 <공사 중 장애요인 발생>	남부수도 (당초)
13	유해화학물질 장외영향 평가서 및 위해관리 계획서 작성 용역(구의) (11202)	상수도사업비용 영업비용 정수비 (712-01)	수선유지교체비 (수선유지비) (214-05)	39,600	39,600	3.6	3.15	35,576	’17.11.30	-	0	상수도사업비용 영업비용 정수비 (712-01)	수선유지교체비 (수선유지비) (214-05)	35,576	’18.6.30	4,024	화학물질안전원 심사 업무치리 지연으로 이월 <사전절차 지연>	구의정수 (당초)
14	뚝도아리수정수센터 취․정수장 장외영향 평가서 및 위해관리 계획서 작성 용역 (11202)	상수도사업비용 영업비용 원수 및 취수비 (711-01)	수선유지교체비 (수선유지비) (214-05)	39,336	39,336	3.10	3.17	30,317	’17.12.16	11.30	15,158	상수도사업비용 영업비용 원수 및 취수비 (711-01)	수선유지교체비 (수선유지비) (214-05)	15,159	’18.6.30	9,019	화학물질안전원 심사 업무치리 지연으로 이월 <사전절차 지연>	뚝도정수 (당초)
		상수도사업비용 영업비용 정수비 (712-01)	수선유지교체비 (수선유지비) (214-05)	39,336	39,336	3.10	3.17	37,551	’17.12.16	11.30	18,775	상수도사업비용 영업비용 정수비 (712-01)	수선유지교체비 (수선유지비) (214-05)	18,776	’18.6.30	1,785
15	자양취수장 유해화학 물질 취급시설 설치 검사 지원 용역 (11202)	상수도사업비용 영업비용 원수 및 취수비 (711-01)	수선유지교체비 (수선유지비) (214-05)	7,000	7,000	9.6	10.30	6,650	’17.12.29	-	0	상수도사업비용 영업비용 원수 및 취수비 (711-01)	수선유지교체비 (수선유지비) (214-05)	6,650	’18.3.31	350	유해화학물질 취급시설 검사 결과에 따른 지적사항 조치 및 재검사에 장시간이 소요되어 이월 <사전절차 지연>	뚝도정수 (당초)
16	장외영향평가서 및 위해관리계획서 작성 용역(영등포) (11202)	상수도사업비용 영업비용 정수비 (712-01)	수선유지교체비 (수선유지비) (214-05)	80,000	80,000	3.10	3.21	43,224	’17.11.19	6.8	12,960	상수도사업비용 영업비용 정수비 (712-01)	수선유지교체비 (수선유지비) (214-05)	30,264	’18.6.30	36,776	화학물질안전원 심사 업무치리 지연으로 이월 <사전절차 지연>	영등포정수 (당초)
17	유해화학물질 장외영향 평가 및 위해관리계획서 작성(강북) (11202)	상수도사업비용 영업비용 정수비 (712-01)	수선유지교체비 (수선유지비) (214-05)	53,000	53,000	3.10	3.27	37,706	’17.11.30	-	0	상수도사업비용 영업비용 정수비 (712-01)	수선유지교체비 (수선유지비) (214-05)	37,706	’18.6.30	15,294	화학물질안전원 심사 업무치리 지연으로 이월 <사전절차 지연>	강북정수 (당초)
18	강북계열 모터펌프 제작 설치 (11101)	자본적지출 유형자산취득 기계장치 (235-01)	시설비 및 부대비 (시설비) (401-01)	380,000	380,000	3.6	6.8	177,259	’17.11.5	8.7	87,847	자본적지출 유형자산취득 기계장치 (235-01)	시설비 및 부대비 (시설비) (401-01)	89,412	’18.1.31	202,741	제작된 펌프의 효율이 계약보증 효율에 미달되어 납품이 지연(지연배상금 부과) <기타>	강북정수 (당초)

(단위 : 천원)