[붙임2]

2017년 상반기 우수현장 평가대상 공사장

2017. 6월말

연번	공사명(공구명)	공사개요	도급비 (억원)	착공일	준공 예정일	공정(%)	선정내용
계	도시기반시설본부	66개 공사장	토목부21, 건축부15, 방재시설부13 도시철도 사업부7, 토목부10
소계	시 설 국	49개 공사장	토목부21, 건축부15, 방재시설부13
	토 목 부	21개 공사장
1	강남순환도시고속도로(4공구)	L=2.48km, B=4~6차로	1,826	2001-12-29	2019-11-30	75.3	우수 2009(상)
2	강남순환도시고속도로(8공구)	L=7.96km, B=4~10차로	2,351	2002-07-03	2018-07-31	42.2
3	동부간선도로 확장공사(2공구)	도로확포장 : L=3.2km(지하차도 2개소, 옹벽)	1,704	2008-12-30	2017-12-31	46.2	최우수 2016(상) 우수 2010(하), 2011(하)
4	동부간선도로 확장공사(3공구)	도로확포장 : L=2,2km(지하차도 2개소 등)	558	2008-02-15	2017-12-31	72.0	최우수 2010(하)
5	월드컵대교 건설공사	L=1,980m, B=6차로	2,379	2010-03-22	2020-08-30	41.0	우수 2012(하), 2015(하)
6	도시고속도로연결램프(정릉길)설치공사	신설램프 120m, 본선확장 82m	89	2013-12-01	2017-12-29	80.8
7	율곡로 창경궁앞 도로구조개선공사	L=800m, B=4→6차로(지하차도 300m)	532	2010-10-11	2017-12-31	52.1
8	장안교(구교) 성능개선공사	교량성능개선(폭17m 연장218m)	161	2014-12-10	2017-08-31	98.3	우수 2016(하)
9	선사로~고덕지구간 도로확장공사	B=8m→25m, L=3.72km	354	2009-01-06	2017-10-31	95.9
10	천호대로(광나루역) 확장공사	도로확장 L=900m, B=10차로(지하차도,옹벽)	775	2010-10-11	2017-12-31	91.2
11	신림~봉천터널 도로건설공사(2공구)	L=2.48km(폭원 왕복 4차로)	1,695	2010-10-08	2017-12-31	34.5	최우수 2013(상)
12	목동교 성능개선공사	교량성능개선(폭20m 연장240m,DB-18→24)	102	2015-08-06	2017-08-11	92.5
13	서부간선지하도로 민간투자사업(1공구)	도로연장 : 5.194km,(설계속도 : 80km/h) (터널 : 4.094km(병렬터널), 개착 : 1.1km)	3,358	2016-03-01	2021-02-28	10.2
14	서부간선지하도로 민간투자사업(2공구)	연장 L=5.136km (터널:3.808km, 개착박스 0.430km, U타입 0.160km)	2,561	2016-03-01	2021-02-28	5.7
15	석촌지하차도 상부도로 구조개선공사	교량설치 B=22.5m, L=31.5m 회전교차로 설치 1개소	20	2016-03-02	2017-09-19	51.8
16	올림픽대교 남단IC 연결램프 구조개선공사	램프신설 : L=1,383m, 램프이설 : L=1,309m 올림픽대로 이설 : 하남방향(1.21㎞), 김포방향(1.46㎞)	264	2016-04-01	2019-12-11	20.0
17	광복교~안양교 도로확장공사	도로확장 B=24.5m~31.9m, 6차로, L=1,110m 광복교 보도설치, 안양교 철거 및 신설	432	2016-04-01	2019-09-12	19.3
18	남부순환로(개봉1동사거리 주변) 평탄화공사	도로개선 : 폭 30.0m(6차로), 연장 1.1㎞ 교량개축 : 폭 22.0m → 31.4m, 연장 38.0m	154	2016-04-25	2019-03-24	21.1
19	중랑천 초안산앞 보행교량 설치공사	보행교량 신설(B=4.5m, L=191m)	52	2016-04-29	2018-04-28	26.8
20	여의교 확장공사	확장(폭 8차로→9차로, 연장 240m) 및 교차로 개선, 보행교량 신설(폭 4m, 연장240m)	44	2016-11-30	2018-05-29	25.6
21	퇴계로 외 1개소 도로공간재편공사	퇴계로 B=5.5m→6.0~14.0m,L=850m 만리재로 B=4.0m→6.0~10.0m, L=1,170m	28	2017-01-04	2017-12-31	7.8
	건 축 부	15개 공사장
22	서울시어린이 병원 건립공사	지하2층, 지상5층 연면적 11,950㎡	109	2013-01-20	2017-07-24	91.3
23	성동소방서 신축공사	지하1층, 지상6층, 연면적 5,194.60㎡	54	2016-01-25	2017-06-30	70.8	우수 2016(상)
24	마포석유비축기지 재생 및 공원조성공사	지하2, 지상2층 연면적 7,422.04㎡ 101,510㎡(기존비축탱크5기,4,894만ℓ,3,063㎡)	210	2015-12-21	2017-08-30	97.4	우수 2016(하)
25	서남권 50+캠퍼스 건립공사	지하3층, 지상5층	61	2016-01-07	2017-08-31	86.0
26	세운상가 활성화를 위한 공공공간조성공사	공연장 741㎡, 초록띠공원 3,748㎡ 및 플랫폼쉘 39개 등	210	2016-03-24	2017-08-23	75.8
27	서울기록원 건립공사	지하2층, 지상5층 연면적 15,004.0㎡	142	2016-04-20	2018-04-19	23.8
28	서울 소방행정타운 건립공사	지하2층 지상15층, 연면적 25,174.81㎡	312	2016-05-18	2018-05-17	43.2
29	장안평 자동차산업 종합정보센터 건립공사	지상3층, 연면적 1,088㎡(997㎡증축)	14	2016-10-10	2017-10-10	68.3
30	여의도 지하벙커 개선공사	지하1층, 지상1층, 약 963㎡	10	2016-10-14	2017-09-30	94.4
31	세종대로일대 역사문화 특화공간 조성공사	지하3층, 지상1층, 연면적 2,899.89㎡ 문화및집회시설(전시장)	82	2016-10-26	2018-04-25	13.0
32	봉제박물관 건립공사	지하1층, 지상3층, 연면적 499㎡	11	2016-12-05	2017-12-04	53.2
33	서울창업허브 별관 리모델링공사	지상4층, 연면적 5,656.93㎡	47	2016-12-09	2017-10-08	23.4

연번	공사명(공구명)	공사개요	도급비 (억원)	착공일	준공 예정일	공정(%)	선정내용
34	모두의 학교 리모델링공사	규모 : 지상5층, 연면적 2,436.94㎡	27	2017-01-16	2017-09-15	62.6
35	서울혁신파크1단계 조성공사(장기계속)(1차)	9,10,15동 12,608㎡ 리모델링, 11,13동 철거 홈베이스 829.55㎡, 변전소 111.05㎡ 증축	95	2016-12-30	2017-08-29	69.6
36	홍릉바이오,의료R&D앵커조성공사(1단계)(1차)	본관동(리모델링) 층수 : 지하1층, 지상4층, 면적 : 2,760㎡	27	2017-02-13	2017-08-12	7.3
	방재시설부	13개 공사장
37	제물포터널 민간투자사업(1공구)건설공사	총연장 : 4.28km, 지하차도:660m / 2개소 터널:7,640m/2개소, 기타 부대시설	2,304	2015-10-16	2020-10-15	9.9
38	제물포터널 민간투자사업(2공구)건설공사	총연장 : 3.25km, 지하차도:694m / 2개소 터널:5,846m/2개소, 기타 부대시설	3,016	2015-10-16	2020-10-15	19.4
39	중랑물재생센터 고도처리시설 및 시설현대화사업	고도처리시설 개량 88만톤/일 시설현대화사업 25만톤/일	3,355	2009-02-13	2017-08-31	99.9	우수 2013(상)
40	서남물재생센터 고도처리 및 시설현대화사업	고도처리 115만톤/일(시설현대화 36만톤/일)	3,125	2009-11-09	2018-12-31	63.7	최우수 2015(상)
41	잠원2빗물펌프장 신설공사	잠원2빗물펌프장 :펌프장 신설 1,400㎥/분, 집수조 V=15,500㎥	135	2013-01-03	2017-07-31	94.2
42	합정 외 1개소 빗물펌프장 증설공사	합정펌프장 증설 : 218→378㎥/min 중동펌프장 증설 : 330→540㎥/min	47	2013-01-04	2017-07-31	92.8
43	신월빗물저류 배수시설등 방재시설 확충공사	수직구:6개소(저지2,고지1,환기1,유출1,유지관리1) - 저류:L=3.629km, D=10.0m - 유도:L=1.097km, D=5.5m	1,083	2013-05-27	2018-01-22	54.9
44	경춘선 폐선부지 공원조성공사(3단계)	길이(1.1㎞) 면적(53,860㎡)	35	2017-01-02	2017-10-31	44.6
45	서초역~방배로간 도로개설공사	도로개설 폭40m, 연장 1.28km(터널 355m포함)	539	2015-10-20	2019-01-31	46.2
46	양재대로 녹지연결로 조성공사	녹지연결로 : 폭20m, 총 연장 90.65m - DPS합성형교 B=20.0m L=52.6m	44	2016-06-20	2017-10-30	84.0
47	마포석유비축기지 주차장 공원화사업공사	공사규모 : 35,121㎥	25	2016-07-11	2017-08-30	69.9
48	청계천 생태환경 개선공사(2단계)	진출입 경사로 설치(2개소), 홍수방지벽(L=145m) 및 산책로 정비(L=3,246m)	8	2016-08-26	2018-02-25	51.0
49	양평1유수지CSOs저류조 설치공사	CSOs저류조 설치 46,000㎥	80	2016-12-05	2019-08-30	35.2
	도시철도국	17개 공사장	도시철도사업부7, 도시철도토목부10
	도시철도사업부	7개 공사장
50	경전철 우이신설 1공구	L=1.9km(정거장 3개소)	1,070	2009-09-15	2017-07-29	99.7	우수 2010(상)
51	경전철 우이신설 2공구	L=3.2km(정거장 4개소)	1,157	2009-09-15	2017-07-29	99.8	우수 2016(상)
52	경전철 우이신설 3공구	L=3.1km(정거장 3개소)	967	2009-09-15	2017-07-29	94.2	우수 2011(상)
53	경전철 우이신설 4공구	L=3.1km(정거장 3개소)	1,175	2009-09-15	2017-07-29	94.1
54	신림선 도시철도 1공구 건설공사	L=2,287m(정거장 4개소, 환기구 1개소)	1,250	2017-02-01	2022-01-30	2.3
55	신림선 도시철도 2공구 건설공사	L=3,002m(정거장 4개소, 환기구 3개소, 차량기지 1개소)	2,053	2017-02-01	2022-01-30	3.0
56	신림선 도시철도 3공구 건설공사	L=2,471m(정거장 3개소, 환기구 1개소)	1,071	2017-02-01	2022-01-30	2.7
	도시철도토목부	10개 공사장
57	지하철9호선 918공구	L=1.291km(정거장 1개소)	1,419	2010-02-19	2018-05-30	87.3	최우수 2016(상) 우수 2013(상)
58	지하철9호선 919공구	L=1.2km(정거장 2개소)	2,041	2009-12-31	2018-05-30	77.7
59	지하철9호선 920공구	L=1.39km(정거장 1개소)	1,532	2009-12-31	2018-05-30	81.7	우수 2012(하), 2014(상)
60	지하철9호선 921공구	L=1.74km((정거장 2개소)	1,773	2009-12-31	2018-05-30	72.7	우수 2011(하), 2015(하)
61	지하철9호선 922공구	L=1.47km(정거장 1개소)	1,329	2010-09-16	2018-05-30	85.1	최우수 2012(상), 2013(상) 2014(상) 우수 2011(하)
62	지하철9호선 923공구	L=1.7km(정거장 1개소)	1,018	2010-09-20	2018-05-30	84.2	최우수 2011(하), 2012(하) 2013(하)
63	지하철9호선 3단계 궤도공사(1공구)	궤도부설 L=9.482km(콘크리트도상, 단선기준) 분기기 부설 11틀	65	2016-09-26	2017-12-25	60.4
64	지하철9호선 3단계 궤도공사(2공구)	궤도부설 : 10.084km(콘크리트도상) 분기기부설 : 12틀(RC 분기기)	68	2016-06-13	2017-10-12	74.1
65	하남선(5호선연장) 1-1공구 건설공사	L=628m(정거장 1개소)	746	2015-03-17	2019-03-28	29.8
66	하남선(5호선연장) 1-2공구 건설공사	L=471m(환기구1개소)	405	2015-03-30	2018-07-10	46.0	최우수 2016(하)