공공체육시설 우레탄 트랙 및 인조잔디 교체

1. 사업개요

가. 추진목적

◦ 잠실주경기장·보조경기장 우레탄 포장재(트랙)내 중금속 함유 등 유해성분 검출에 따른 교체사업을 추진하여 안전성 확보 및 시설물유지관리에 만전을 기하고, 2019년 제100회 전국체전을 성공적인 대회가 될 수 있도록 대비코자 함.

나. 시행주체 : 서울특별시 체육시설관리사업소

다. 사업위치 : 서울특별시 송파구 올림픽로 25 잠실주경기장, 보조경기장

라. 사업기간 : 2018. 10. ～ 2019. 6.

마. 사 업 량

◦ 잠실주경기장 : 1,500백만원

- 우레탄 철거 11,341㎡, 아스콘 철거 113a, 아스콘 포장 113a, 우레탄칩(t=13mm)포설 7,000㎡, 우레탄칩(t=9mm)포설 2,000㎡, 우레탄칩(t=5mm)포설 2,341㎡, 폐기물처리 1식 등

◦ 잠실보조경기장 : 1,400백만원

- 우레탄 철거 10,748㎡, 아스콘 철거 107a, 아스콘 포장 107a, 우레탄칩(t=13mm)포설 6,000㎡, 우레탄칩(t=9mm)포설 2,200㎡, 우레탄칩(t=5mm)포설 2,548㎡, 폐기물처리 1식 등

바. 총사업비 : 8,539백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	기투자	2017	2018	2019
계	8,539	0	5,639	2,900
국 비	4,101		2,801	1,300
시 도 비	4,438		2,838	1,600

사. 사업추진계획

◦ '18.  10.   : 설계서 작성

◦ '18.  11.   : 발주 방침서 수립 및 시행

◦ '19.   3.  : 공사 착공

◦ '19.   6.  : 공사 완료

아. 기 대 효 과

◦ 우레탄 트랙의 중금속 함유 시험결과 시험대상 중 일부 항목이 기준 이상 검출되어 다중이 사용하는 공공체육시설임을 감안, 전면교체하여 유해성 논란을 종식시켜 시설물유지관리에 만전을 기하고, 2019년 제100회 전국체전을 성공적인 대회로 개최

2. 사업비 산출내역

(단위 : 백만원)

구분	산 출 기 초	예산액
계		2,900
잠실주경기장	소 계	1,500
	○ 잠실주경기장 트랙 아스콘 및 우레탄 포장 교체공사 1. 트랙공사 ․ 우레탄 철거 = 56,705천원(11,341㎡ x 5,000원) ․ 아스콘 철거 = 5,670천원(11,341㎡ x 500원) ․ 아스콘 포장 = 11,341천원(11,341㎡ x 1,000원) 2. 부대공사 ․ 스포트 커빙 = 20,000천원(1식 x 20,000,000원) ․ 라인마킹 = 25,000천원(1식 x 25,000,000원) 계 118,716천원 제경비(40%) 47,486천원 소계 166,203천원 3. 폐기물 ․ 폐기물처리 (지정) = 68,046천원( 227톤 x 300,000원) ․ 폐기물처리(아스콘) = 63,963천원(2,132톤 x 30,000원) 4. 관급자재 ․ 우레탄 포설(T=13mm) = 700,000천원(7,000㎡ x 100,000원) ․ 우레탄 포설(T= 9mm) = 130,000천원(2,000㎡ x 65,000원) ․ 우레탄 포설(T= 5mm) = 105,345천원(2,341㎡ x 45,000원) ․ 아스콘 = 138,587천원(2,341㎡ x 65,000원) 공사비 소계 1,372,144천원 부가가치세 137,214천원 총공사비 1,500,000천원(-9,358천원)
잠실보조경기장	소 계	1,400
	○ 잠실보조경기장 트랙 아스콘 및 우레탄 포장 교체공사 1. 트랙공사 ․ 우레탄 철거 = 53,740천원(10,748㎡ x 5,000원) ․ 아스콘 철거 = 5,374천원(10,748㎡ x 500원) ․ 아스콘 포장 = 10,748천원(10,748㎡ x 1,000원) 2. 부대공사 ․ 스포트 커빙 = 20,000천원(1식 x 20,000,000원) ․ 라인마킹 = 25,000천원(1식 x 25,000,000원) 계 114,862천원 제경비(40%) 45,944천원