가락동 도매시장 시설현대화사업 추진상황 보고

(2020년 1분기(2. 20.) 현재)

□ ’20년 1분기(2. 20.) 현재 예산집행 실적

(단위 : 백만원)

구분		예산액 (A)	배정액	집행액 (B)		미집행
					B/A,%	잔액	이월액	불용액
합계		15,493	-	-	-	-	-	-
국비	소계	10,845	-	-	-	-	-	-
	보조	4,648	-	-	-	-	-	-
	융자	6,197	-	-	-	-	-	-
지방비		4,648	-	-	-	-	-	-

□ ’20년 1분기까지 추진상황(누계)

੦ 시설현대화사업 도매권역 2단계(채소2동) 후적지 정비 주요사항

- 제1주차장 외 6개소 철거완료

੦ 시설현대화사업 도매권역 2단계(채소2동) 설계 및 감리

- 실시설계 : 진도율 80%

੦ 시설현대화사업 도매권역 2단계(채소2동) 조사용역 등

- 교통영향평가 개선대책 수립용역 : 진도율 90%

- 문화재표본조사용역 : 완료

- 사후환경영향 조사 : 완료

□ 추진과정에서 나타난 문제점

੦ 건축인허가 지연 등으로 공사 착공 순연 예상

- 인허가 관련 사항 실시설계 반영 등 기한 연장으로 착공시기 순연

□ 문제점 해소대책

੦ 건축인허가 기일 및 실시설계기간 단축 노력