서울특별시 설계경제성(VE)검토

운영 지침(안)

2020. 1

기술심사담당관

			목 차

1. 총칙	1

1.1 설계경제성(VE) 검토 개관	1

가. 목적	1

나. 의의	2

다. 설계VE 대상	2

라. 설계VE 검토내용	2

마. 설계VE 요청시기 및 횟수	3

1.2 설계VE 전담조직 구성	3

가. 설계VE 운영협의회 설치	3

나. 설계VE팀 구성	4

다. 설계VE 시행방법	5

1.3 설계VE 운영	5

가. 운영절차 및 기능	5

나. 검토기간	6

2. 설계VE 단계별 처리 절차	6

2.1 설계VE 신청·접수단계	6

가. 설계VE 신청·접수	6

나. 설계VE 운영협의회 개최	7

2.2 설계VE 준비단계	7

가. 설계VE 검토계획 수립	7

나. 사업설명회	8

다. 현장답사	8

2.3 설계VE 분석단계	8

가. 기능	8

나. 방법	9

다. 1차 워크숍	9

라. 2차 워크숍	9

마. 분석단계의 간소화	9

2.4 설계VE 실행단계	10

가. 기능	10

나. 방법	10

다. 설계VE 결과보고서 작성 및 통보	10

2.5 설계VE 사후관리	10

가. 건설사업정보 포털시스템 등록	10

3. 설계VE 전문교육 및 사례확산	11

3.1 설계VE 전문교육 및 역량강화	11

가. 기술심사담당관 직원 전문교육	11

나. 설계VE 담당자 역량강화 교육	11

3.2 설계VE DB 구축	11

3.3 우수사례 발굴 확산	11

가. 사례집 발간	11

3.4 설계VE 외부위원 수당 등	11

가. 지급대상 및 방법	11

나. 세부지급기준	11

3.5 설계VE 외부위원 실적관리	12

별지 서식

【제1호】  설계경제성(VE) 검토 신청서	13

◦ 1-1   설계경제성(VE) 검토 대상사업 현황	14

◦ 1-2   설계경제성(VE) 검토 제약사항	16

【제2호】  설계경제성(VE) 검토 제안서	17

◦ 2-1   비용절감․가치향상 제안서	18

◦ 2-2   개략도	19

【제3호】  개인 실적증명서	20

서울특별시 설계경제성(VE)검토

운영 지침(안)

[2020. 1. 23 제정]

1. 총칙

1.1 설계경제성(VE) 검토 개관

가. 목적

이 지침은「건설기술진흥법시행령 제75조(설계의 경제성 검토)」,「설계공모, 기본설계 등의 시행 및 설계의 경제성 등 검토에 관한 지침」(국토교통부 고시)에 따라 서울특별시에서 설계경제성 검토를 시행하는데 필요한 세부사항과 절차를 규정함을 목적으로 한다.

· 건설기술진흥법 제46조(건설공사의 시행과정) ① 발주청은 건설공사를 경제적·능률적으로 시행하기 위하여 건설공사의 계획·조사·설계·시공·감리·유지·관리 등(이하 이 조에서 "건설공사의 시행과정"이라 한다)을 대통령령으로 정하는 절차 및 기준에 따라 수행하여야 한다.

· 건설기술진흥법시행령 제67조(건설공사의 시행과정) ① 법 제46조제1항에서 "대통령령으로 정하는 절차 및 기준"이란 다음 각 호에 따른 건설공사 시행과정(이하 "건설공사의 시행과정"이라 한다)의 해당 규정에서 정하는 절차 및 기준을 말한다. 다만, 다른 법령에서 특별히 정한 경우는 그러하지 아니하다.

9. 제75조에 따른 설계의 경제성등 검토

· 건설기술진흥법시행령 제75조(설계의 경제성등 검토)

① 발주청은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 설계 대상 시설물의 주요 기능별로 설계내용에 대한 대안별 경제성과 현장 적용의 타당성(이하 "설계의 경제성등"이라 한다)을 직접 검토하거나 건설기술용역업자 등 전문가로 하여금 검토하게 하여야 한다.

1. 총공사비 100억원 이상인 건설공사의 기본설계 및 실시설계를 하는 경우

2. 총공사비 100억원 이상인 건설공사의 시공 중 총공사비 또는 공종별 공사비를 10퍼센트 이상 조정(단순 물량증가나 물가변동으로 인한 변경은 제외한다)하여 설계를 변경하는 경우

3. 총공사비 100억원 미만인 건설공사에 대하여 발주청이 필요하다고 인정하는 건설공사의

설계를 하는 경우

· 설계공모, 기본설계 등의 시행 및 설계의 경제성 등 검토에 관한 지침 제48조

(설계VE실시대상)

4. 그 밖에 발주청이 설계단계 또는 시공단계에서 설계VE가 필요하다고 인정하는 건설공사

5. 시공자가 도급받은 건설공사에 대하여 설계VE가 필요하다고 인정하는 건설공사

· 서울특별시 건설기술심의위원회 조례 제5조(소위원회)①위원회 및 분과위원회는 심의·자문의 전문성 및 효율성을 확보하기 위하여 필요한 경우에는 안건에 따라 다음 각 호와 같이 소위원회를 둔다. 5. 설계경제성검토소위원회

나. 의의

1) 건설기술진흥법령에서 정하고 있는 설계의 경제성 등의 검토를 서울특별시에서는 ‘설계경제성(VE : Value Engineering) 검토’(이하 ‘설계VE’라 한다)로 시행한다.

2)「설계VE 검토」는 분야별 전문가로 전담조직을 구성하여 일정 규모 이상의 건설공사의 설계단계에서 설계대상 시설물의 주요기능과 성능을 분석․평가하고, 최소의 생애주기 비용으로 시설물의 경제성․시공성․안전성․편의성 향상을 위한 대안을 발굴하여 적용할 수 있도록 설계를 검토․보완하는 것을 목표로 운영한다.

다. 설계VE 대상

1) 대상 사업은 다음과 같다.

가) 총공사비 50억원 이상 건설공사

나) 총공사비 100억원 이상 건설공사로서 실시설계 완료 3년 이상 경과하여 발주하는 건설공사

다) 총공사비 100억원 이상 건설공사로서 공사비 증가 10% 이상 설계변경하는 건설공사 (단, 단순물량 증가나 물가변동으로 인한 설계변경은 제외)

라) 그 밖의 발주기관이 설계VE가 필요하다고 인정하는 건설공사

2) 대상 기관은 다음과 같다.

가) 서울특별시 본청 및 소속기관(사업소 포함)

나) 서울특별시 25개 자치구(시비 재배정사업, 국·시비 보조사업에 한함)

다) 서울특별시 투자·출연기관

라. 설계VE 검토내용

1) 건설공사의 계획부터 유지관리까지 전 분야의 경제성 분석

2) 공사 시행의 적정성 및 사용자 편의성, 현장적용의 타당성

3) 시설물 안전 및 고효율 공법 적용의 가능성

4) 설계예산서의 도서 간 일치 여부 및 공사원가 적정성 등

마. 설계VE 요청시기 및 횟수

공사구분	요청시기 및 횟수
일반건설공사	- 기술자문회의나 설계심의회의 하기 전으로 하되 기본설계, 실시설계에 대하여 각각 1회 이상 실시(공정율 60% 이전) ※ 기본 및 실시설계를 1건의 용역으로 발주하는 경우 구분없이 1회 이상 실시하되 기본설계 단계에서 실시
일괄입찰공사	- 실시설계적격자선정 후 실시설계 단계에서 1회 이상 실시
민간투자사업	- 우선협상자 선정 후 기본설계에 설계VE 1회 이상 실시 - 실시계획승인 이전 실시설계에 설계VE 1회 이상 실시
기술제안입찰공사	- 기본설계 : 입찰 전 기본설계, 실시설계적격자 선정 후 실시설계에 대하여 각각 1회 이상 실시 - 실시설계 : 입찰 전 기본설계 및 실시설계에 대하여 설계VE를 각각 1회 이상 실시
실시설계 완료후 3년 이상 경과한 뒤 발주하는 건설공사(총공사비 100억원 이상)	- 공사 발주 전에 설계VE를 실시하고, 그 결과를 반영한 수정설계로 발주
시공중인 건설공사 (총공사비 100억원 이상)	- 총공사비 또는 공종별 공사비 증가 10% 이상 설계변경 시 - 시공단계에서 발주청이나 시공자가 필요하다고 인정하는 시점
사업계획변경 건설공사 (총공사비 100억원 이상)	- 사업계획변경 조정위원회 심의회 이후 실시

1.2 설계VE 조직 구성

가. 설계VE 운영협의회 설치

1) 설계VE 검토의 효율적 운영을 위한 세부 사항들을 심의·조정하기 위하여 기술심사담당관에「설계VE 운영협의회」를 설치·운영한다.

2) 설계VE 운영협의회는 기술심사담당관을 위원장으로 하여 기술지원팀장이 간사가 되고, 위원은 토목·건축·설비·조경 분야 팀장 중 2인 이상을 포함하여 총 4인 이상으로 하며, 필요시마다 기술심사담당관이 소집·개최한다.

3) 설계VE 운영협의회 기능은 다음과 같다.

가) 설계VE팀 구성 등 검토 계획안 협의

나) 설계VE 시행방법의 결정 등을 협의

다) 기타 설계VE 운영과 관련하여 협의·조정이 필요한 사항

4) 설계VE 운영협의회 운영은 다음과 같다.

가) 모든 설계VE 검토대상에 대한 직접 검토 및 대행, 위탁 등에 대한 사항은 설계VE팀 운영협의회에서 결정한다.

나) 설계VE 착수 준비단계 전에 개최한다.

다) 특이사항이 없으면 서면으로 대체할 수 있다.

5) 설계VE 검토 직접수행 및 면제대상은 다음과 같다.

가) 발주청 직접 수행

- 단순 공정 및 반복적인 공정의 공사

- 공사규모 및 발주여건의 제약으로 자체검토희망 공사

나) 면제대상

- 실시설계 완료 후 3년 이상 지난 뒤에도 여건변동이 경미한 공사

- 총공사비 또는 공종별 공사비 10% 이상 조정하여 설계변경한 공사 중 단순물량 증가나 물가변동으로 인한 설계변경 공사

나. 설계VE팀 구성

1) 설계VE팀은 설계VE 리더, 설계VE 검토위원, 진행 보조요원, 설계VE 담당공무원 등 9인 이상으로 구성하며, 사업규모 및 특성(난이도)을 반영하여 인원을 증감할 수 있다.

【서울특별시 설계VE팀 조직도】

									기술심사담당관
					설계VE 운영협의회												간 사
설계VE리더							진행 보조요원					설계VE 검토위원						설계VE 담당자

2) 설계VE 리더는 설계경제성(VE) 심의관련 전문 자격증(CVS, CVP, KCVS 등)을 보유하고 실무경험이 풍부한 자로 구성한다.

3) 설계VE 검토위원은 해당분야의 기술사, 건축사 또는 박사학위 소지자 및 그밖의 실무경험이 풍부하다고 시장이 인정한 자로 한다.

4) 진행 보조요원은 국토교통부 지침에 따른 퍼실리테이터 역할을 하며, 설계VE 검토 진행 및 정리, 보고서 작성 지원 등의 사무를 수행한다. 진행 보조요원은 설계VE 리더의 추천을 받아 설계VE 운영협의회에서 지정하며, 2인 이내로 운영한다.

5) 설계VE 담당자는 서울특별시 기술심사담당관 공무원 중에서 선정하며, 당해 사업의 VE업무 수행자 및 필요한 경우 사업발주부서, 관련부서 등의 공무원을 포함할 수 있다.

6) 설계VE팀 내부구성 인원은 다음과 같다.

【 VE팀 내부구성 인원 】

- 위원장 : 기술심사담당관

- 간  사 : 기술지원팀장 및 분야별 팀장

※ 전문분야별 팀장을 간사로 하되 건축분야 100억원 미만은 기술지원팀장 수행

- VE담당자 : VE담당 직원 및 분야별 업무담당

다. 설계VE 시행방법

1) 기술심사담당관의 설계VE검토 방법은 다음과 같다.

가) 대행검토 : 서울시 및 산하기관 발주분에 대해 대행하여 검토

(대상 : 본청, 본부, 사업소)

나) 위탁검토 : 타발주청 발주분에 대해 위탁받아 검토

(대상 : 자치구, 투자·출연기관)

2) 발주청에서 설계VE를 직접 수행하거나, 외부전문기관(조달청, 한국도로공사 등)에 위탁 가능

1.3 설계VE 운영

가. 운영절차 및 기능

1) 설계VE는「신청 ➞ 준비 ➞ 분석 ➞ 실행 ➞ 사후관리」단계순으로 운영한다.

2) 신청 : 사업발주부서에서 신청서(제1호서식), 설계도서 등을 첨부하여 설계VE를 신청한다.

3) 준비 : 설계VE팀 구성, 검토계획 수립, 사업설명회, 현장답사 등을 실시한다.

4) 분석 : 워크숍 등을 통한 설계원안의 기능분석․정리, 대안 도출 및 제안서 등을 작성한다.

5) 실행 : 대안 채택, 설계VE 제안서 통보, 설계도서 수정, 결과통보 등을 실시한다.

6) 사후관리 : 설계VE 결과 DB 구축 및 관리, 설계VE 우수사례를 전파한다.

【서울특별시 설계VE 운영 흐름】

신청		준비단계		분석단계		실행단계		사후관리
·VE신청서 접수 ·검토계획 수립준비 ·외부검토위원 선임	▷	·설계VE 계획 수립 ·사업설명회 ·현장답사 등	▷	·워크숍 시행 ·대안 발굴 ·제안서 작성	▷	·VE제안 채택 ·결과보고서 ·결과 통보	▷	·VE결과 DB 구축 ·설계VE 전문교육 ·설계VE 공동연수

나. 검토기간

1) 설계VE는 사업설명회 개최일로부터 결과통보까지 30일 이내에 완료하는 것을 원칙으로 한다. 단, 공사의 규모, 공종의 복잡 정도 등을 종합 판단하여 워크숍 일정 및 절차를 연장하거나 단축할 수 있다.

【100억원이상 설계VE 단계별 진행 흐름도】

신청․접수		설계경제성(VE)검토 신청서(별지 제1호서식) 접수		사업발주부서 → 기술심사담당관
		□
준비단계		설계VE팀 구성 등 계획 수립		설계VE 운영협의회
		□
		사업설명회, 현장답사 등 (1일차)		설계VE팀
		□
분석단계		설계VE 검토 시행 (3일차)		설계VE팀
		□
		설계VE 제안서 통보 (13일차)		기술심사담당관 → 발주부서
		□
실행단계		채택여부 결과 회신(21일차)		발주부서 → 기술심사담당관
		□
		VE 최종 결과 보고서 제출(28일차)		기술심사담당관
		□
		VE검토 결과통보 (30일차)		기술심사담당관 → 발주부서
		□
사후관리		포털시스템 등재 (제안채택일로부터 30일 이내)		사업발주부서

2. 설계VE 단계별 처리 절차

2.1 설계VE 신청·접수단계

가. 설계VE 신청·접수

1) 사업발주부서는 설계VE 대상사업에 대하여 ‘설계경제성(VE) 검토 신청서’(제1호 서식), ‘설계경제성(VE) 검토 대상사업 현황’(제1-1호 서식), ‘설계경제성(VE) 검토 제약사항’(제1-2호 서식)을 작성하여 제출한다.

【설계자가 제출할 도서】

▸ 설계설명서, 설계도면, 공사시방서, 설계보고서, 구조계산서

▸ 공사비 산출서(단가산출서, 수량산출서, 설계내역서, 원가계산서 등)

▸ 기타 참고자료(방침서, 견적서, 타 위원회 검토결과, 신공법 경우 관련자료)

※ 설계VE 검토를 시행하는 모든 건설공사는 기술심사담당관에 우선 의뢰하여야 한다

2) 기술심사담당관은 설계VE 신청서 접수 후 7일 이내에 설계VE 검토계획을 수립한다.

나. 설계VE 운영협의회 개최

1) 설계VE 운영협의회는 설계VE 준비단계 착수 전에 개최하되, 특이사항이 없을 경우 서면으로 대체할 수 있다.

2) 운영협의회는 기술심사담당관, 기술심사담당관의 분야별 관련 팀장 및 설계VE 업무 담당자 등으로 사안별 특성에 따라 4인 이상으로 구성하고, 필요시에는 사업발주부서 및 관련부서 팀장을 포함할 수 있다.

3) 운영협의회는 발주부서의 신청(자체 진행, 기술심사담당관 의뢰)에 대한 공사규모 및 특성, 발주여건 등을 참조하여 설계VE 검토 여부를 결정한다.

4) 운영협의회는 설계VE 검토에 필요한 업무를 협의하여 원활한 검토가 이루어질 수 있도록 지원한다.

2.2 설계VE 준비단계

가. 설계VE 검토계획 수립

1) 계획 수립 전 검토사항은 다음과 같다.

가) 설계VE 대상사업의 주요 공종 및 특성 등을 분석

나) 사업유형별 회의 일정, 설계VE팀 구성 방안 등 검토

다) 이해관계자 참여대상 여부

2) 검토계획에 포함될 내용은 다음과 같다.

- 사업개요 : 신청부서, 사업명, 사업위치, 사업내용, 공사비, 용역기간,

검토 신청시 설계공정률

- 검토세부계획

․ 검토팀 구성내용 : VE팀 구성인원, 참여자명단, 역할

․ 검토회의 세부일정표 : 회의장소, 일시, 세부일정

【 설계VE 검토팀 구성】

계	위원장	간사	설계VE 리더	설계VE 검토위원	진행보조요원	설계VE 담당자
9~18명	1명	1명	1명	3~11명	1명	2~3명

- 소요경비 및 재원 마련 : 외부위원 검토 수당, 운영경비, 지급부서 명시

- 향후계획 : 결과 통보 일정 등

나. 사업설명회

1) 설계VE 검토계획이 수립되는 즉시 기술심사담당관 설계VE 담당은 사업설명회를 개최한다. 사업설명회에는 설계VE팀, 사업발주부서, 설계자, VE업무담당 등이 참여한다.

2) 설계자는 사업설명회에서 설계VE팀을 대상으로 사업개요, 기술자문 결과 반영사항 등 설계추진내용에 대하여 설명한다.

【사업설명(회) 자료 및 내용】

▸ 위치도, 사업개요, 대지현황, 현장사진, 주요 목적, 기능, 유지관리 계획(필요시)

▸ 조감도, 배치도, 평면도, 입면도, 단면도 등

▸ 기술자문 의견 반영사항(기본 설계VE 반영사항 등)

▸ 분야별 계획(건축, 토목, 조경, 기계, 전기 등)

3) 설계VE 참여자의 사전 준비사항은 다음과 같다.

- 사업발주부서(설계자)는 VE팀에게 사업설명회 7일전까지 설계도서를 배포하여 사전 검토할 수 있도록 하여야 한다.

- 설계VE 업무담당자는 사업설명회 발표자료를 이해관계자(유지관리자, 수요자 등)에게 사업설명회 1일전까지 배포하여 사업관련 사전검토 내용을 제공한다.

- 검토위원은 설계도서의 핵심 쟁점사항을 작성하여 사업설명회 1일전까지 VE리더(필요시 설계VE 업무 담당)에게 미리 제출한다.

다. 현장답사

1) 설계VE팀은 주요 사업대상지의 주변여건 등을 현장 답사한다.

단, 사업성격에 따라 사진, 동영상 등으로 현장답사를 대체할 수 있다.

2) 중점 확인사항

- 사업부지 주변 여건

- 기존 시설물의 이용현황 및 규모 등 전반적인 현황

- 시공 중 분쟁 발생이 예상되는 요인 등에 대한 현지 확인

2.3 설계VE 분석단계

가. 기능

분석단계는 대상사업 설계원안의 주요기능･성능, 분야별 공사비 등을 분석하고, 핵심기능의 가치를 향상시키기 위해 대안을 분석․발굴하는 단계이다.

나. 방법

1) 설계VE팀은 VE리더의 진행으로 분야별 검토위원, 사업발주부서 및 설계자가 참석하여 워크숍 방식으로 설계VE 분석단계를 수행한다.

2) 워크숍은 총 2회 이상 개최하여 분야별 검토위원들이 설계원안에 대한 검토의견을 공유하고, 발주부서․설계자 등 참여자와 함께 토의과정을 거쳐 기능․성능 향상을 위한 대안을 발굴하는 방식으로 진행한다.

다. 1차 워크숍

1) 설계자는 설계VE팀의 요청이 있을 경우 워크숍에 참석하여 분야별 설계내용, 공사비 등 세부 설계정보 요청 등에 대한 설명과 의견을 제시한다.

2) 설계VE팀은 사전검토 및 사업설명회에서 수집한 정보와 함께 분야별 설계자와 분임토의를 통해 시설물의 세부적인 정보 수집하고, 이를 근거로 기능을 분석하고 그 결과를 정리하는 것을 주요 목표로 운영한다.

라. 2차 워크숍

1) 설계VE팀은 기능분석․정리 결과를 토대로 성능향상이 필요한 대상에 대하여 대안을 발굴하고 워크숍 참석자들의 협의․토의을 거쳐 ‘설계경제성(VE) 검토 제안서’(별지 제2호서식), ‘비용절감․가치향상 제안서’(별지 제2-1호서식), ‘개략도’(별지 제2-2호서식)를 작성하여야 한다.

마. 분석단계의 간소화

1) 100억원 미만의  소규모 사업에 대하여는 워크숍을 간소화하여 검토기간을 탄력적으로 운영할 수 있다.

가) 시설물 유지보수공사 등 반복적인 사업에 대하여 기존 설계VE 사례가 있는 경우, 기능분석․정리를 활용하여 워크숍 일정을 단축할 수 있다.

나) 도로함몰, 치수예방 등 지역별 유사 사업에 대하여 기능분석 및 대안발굴을 통합하여 워크숍 일정을 단축할 수 있다.

【공사성격․규모에 따른 워크숍 구성】

공사규모		검토기간		1차 워크숍				2차 워크숍		실행단계
			=	현장답사	+	기능분석	+	대안발굴	+	채택회의
100억원 미만		2일~2.5일		0.5일		0.5일		0.5~1일		0.5일
100억원 이상		3일		0.5일		0.5일		1일		1일

2) 다만, 공사의 내용이 복잡, 특이, 희소, 또는 대규모의 사업인 경우 기간연장이 필요하다고 설계VE 운영협의회에서 결정된 경우에 한해서는 워크숍의 횟수·기간을 연장할 수 있다.

2.4 설계VE 실행단계

가. 기능

실행단계는 설계VE 분석을 통해 대안으로 도출한 VE제안에 대하여 사업발주부서(설계자)와 협의를 거쳐 설계 수정사항을 결정하는 단계이다.

나. 방법

1) 기술심사담당관 주관으로 설계VE팀, 사업발주부서, 설계자 등이 참여하는 제안채택 회의를 개최하여 대안의 채택여부를 결정한다.

2) 기술심사담당관은 제안채택 회의에서 채택된 VE제안에 대하여 ‘설계경제성(VE) 검토 제안서’(별지 제2호서식), ‘비용절감․가치향상 제안서’(별지 제2-1호서식), ‘개략도’(별지 제2-2호서식)를 수정․보완하여 사업발주부서에 통보한다.

3) 제안채택 회의에서 추가 기술검토가 필요하거나, 타기관 협의 등으로 결정에 시간이 필요하다고 인정될 경우 7일 이내의 기한을 정하여 사업발주부서에서 문서로 채택여부 및 사유를 제출하도록 할 수 있다.

다. 설계VE 결과보고서 작성 및 통보

1) 설계VE 결과보고서 작성은 제안채택 종료일부터 10일 이내에 완료한다.

가) 내용 : 설계VE 운영과정, 설계원안 가치(비용, 기능, 성능) 분석 결과,

설계VE 이후 제안서 채택에 따른 성능 및 가치 상승효과

나) 방법 : 설계VE 리더가 작성하고 설계VE 운영협의회의 승인을 받아 확정한다.

2) 기술심사담당관은 설계VE 운영협의회에서 결과보고서 승인 즉시 사업발주부서에 설계VE 결과보고서를 문서로 통보한다.

2.5 설계VE 사후관리

가. 건설사업정보 포털시스템 등록

1) 기간 : 설계VE 결과를 통보받은 날로부터 30일 이내에 등록하여야 한다.

2) 등록 : 사업발주부서

3) 방법 : 설계VE에서 채택한 제안 및 제안내용, 수정설계 내용 등을 건설사업정보 포털시스템(https://www.calspia.go.kr/)의 『설계VE 마당』에 등재하여야 한다.

4) 보고 : 자체 설계VE 검토 시행한 발주부서는 등록내용을 기술심사담당관에게 7일 이내에 제출하여야 한다.

3. 설계VE 전문교육 및 사례전파

3.1 설계VE 전문교육 및 역량강화 교육

가. 기술심사담당관 직원 전문교육

설계VE 업무의 이해 등 검토역량 강화를 위해 기술심사담당관의 신규 및 전입직원, 희망직원을 대상으로 연 1회 이상 전문교육을 실시하고, 외부전문가를 통한 워크숍을 실시한다.

- 내용 : 설계VE 절차 및 시설물 기능분석, 정리 기법 등

- 방법 : 전문기관 위탁교육, 현장실습과 토론 등 맞춤형 교육 실시

나. 설계VE 담당자 역량강화 교육

서울특별시 본청, 본부·사업소, 자치구, 투자․출연기관의 설계VE 업무담당을 대상으로 설계VE 우수사례 확산 및 기관별 사례 공유를 위한 매년 1회 이상 역량강화 교육을 실시한다.

3.2 설계VE DB 구축

설계VE를 완료한 시설물에 대하여 유형별 기능과 성능분석 결과, 주요 착안사항, VE 성과 등을 DB로 구축해나가야 한다.

3.3 우수사례 발굴 전파

가. 사례집 발간

건설공사의 품질향상을 도모하기 위해 설계VE 우수사례집을 발간․배부한다.

1) 시기 : 격년 발행

2) 내용 : 유형별 시설물에 대한 기능 향상을 위한 대표적 대안 내용 등

3) 방법 : 제안내용의 이해를 돕기 위해 개선 전․후의 비용과 성능 비교를 위해 도표 등을 활용 및 설계VE 제도 이해를 위한 매뉴얼(운영지침) 수록

3.4 설계VE 위원 수당

가. 지급대상 및 방법

1) 설계VE 위원에게 참석수당, 검토수당, 보고서 작성비, 여비 등을 지급할 수 있다.

가)「참석수당」,「여비」는 ‘서울특별시 위원회 수당 및 여비 지급 조례’를 준용하여 지급한다.

나)「검토수당」,「보고서 작성비」는 국토교통부의 ‘설계공모, 기본설계 등의 시행 및 설계의 경제성 등 검토에 관한 지침’(고시)을 준용하여 지급한다.

다)「검토수당」은 VE리더가 VE준비를 위하여 사전검토를 함에 따른「사전검토수당」을 포함할 수 있다.

2) 진행 보조요원에 대하여는 참석수당과 검토수당을 지급할 수 있다.

나. 세부지급기준

지급대상	지급내용	지급단가	적용시간	참여일수
설계VE 리더	검토수당	기술사 1일 노임의 시간당 단가적용	6시간	2
			3시간(현장답사 제외)	1
	사전검토수당	〃	5시간	1
	보고서 작성	〃	8시간	3
	참석수당	150천원	2시간이상	3
설계VE 검토위원	검토수당	기술사 1일 노임의 시간당 단가적용	6시간	2
			3시간(현장답사 제외)	1
	참석수당	150천원	2시간이상	3
진행 보조요원	검토수당	초급기술자 1일 노임의 시간당 단가적용	6시간	2
			3시간(현장답사 제외)	1
	참석수당	150천원	2시간이상	3

3.5 설계VE 위원 실적관리

서울특별시 기술심사담당관은 VE의 전문성 확보와 기술력을 발전시키고자 설계VE팀 외부위원에 대한 개인실적을 관리하고, 설계VE팀에 참석한 위원의 개인별 실적증명서(별지 제3호서식)를 발급할 수 있다.

【별지 제1호서식】

설계경제성(VE)검토 신청서

OOO사업 (기본, 실시)설계에 대하여 다음과 같이 설계경제성(VE)검토를 신청합니다.

1. 사 업 명 :  OO    사업

2. 사업개요

○ 주 용 도 :

○ 부지면적 :

○ 규    모 :

3. 위    치 :

4. 공 사 비 :       백만원

○ 입찰방법 :

○ 총사업비 : 용역비(설계     감리     ), 공사비      , 보상비 등

5. 사업기간 :

6. 설계 공정률(%) :      % (설계내역서 유, 무 여부 표시)

7. 설계상 특기사항

-

-

8. 설계VE 시행방법

(□기심대행 □기심위탁 □발주청 직접검토 □외부전문기관위탁)

붙 임 : 1. 설계경제성 검토 대상사업 현황 1부

2. 설계경제성 검토 제약사항 1부

20  .   .

신청부서 :

서울특별시 기술심사담당관 귀하

【별지 제1-1서식】

설계경제성(VE)검토 대상사업 현황

□ 조감도 및 시설계획도

「현장 위치도」

「조감도 및 평면도」

□ 사업현황

○ 공사개요 :

○ 위    치 :

○ 총공사비 :                   (백만원)

○ 공사기간 :

□ 주요 공법

□ 공종별 규모

공 종	공사물량	공사비(백만원)	비율(%)
계			100

□ 추진경과(인가, 허가, 승인 등 행정절차 중심으로 작성)

○ 20  .  .  :

□ 총사업비 현황

○ 총사업비 :          백만원

○ 공 사 비 :          백만원

○ 기    타 :          백만원

□ 행정절차 이행 완료여부

○ 20  .    .  : 000인허가

【별지 제1-2서식】

설계경제성(VE)검토 제약사항

○ 공사명 :  OO사업                                      20  .    .     .

연번	제 약 사 항		사 유 (구체적으로 작성)	비고
	법적사항	법적 외 사항 (민원, 예산 등)

※ 제약사항이 없는 경우 설계경제성(VE) 검토 시 공사계획 및 예산타당성 등 모든 분야를 종합검토 함.

【별지 제2호서식】

설계경제성(VE) 검토 제안서
VE리더	① 상호 또는 명칭		② 면허 또는 등록 번 호
	③ 주 소	(전화 : )
	④ 대 표 자 성 명		⑤ 생 년 월 일
사 업 개 요	⑥ 사 업 명
	⑦ 사 업 비		⑧ 사 업 기 간
	⑨ 발 주 처		⑩ 담 당 부 서
제안내용	⑪ 제 안 건 수		⑫ 절 감 액
설계의 경제성 등 검토에 관한 시행지침 제11조제1항에 따라 사업의 설계의 경제성 등 검토제안서를 제출합니다. 년 월 일 VE리더 (인) 붙임 1. 비용절감・가치향상 제안서 2. 개략도 서울특별시 기술심사담당관 귀하

【별지 제2-1서식】

비용절감․가치향상 제안서

제안서번호 :

사 업 명						발주청담당자
제안자명
제 안 명
제안내용		개 선 전				개 선 후
경제성평가결과		생애주기비용(LCC)절감효과					가치향상효과
		①	②	③	④	절감율 (④/L1×100%)	⑤		⑥	가치향상도 {(V2-V1)/V1}×100%)
		건설사업 비용	유지관리 비용	계(LCC) (=①+②)	절감액 (=L1-L2)		성능 점수 [P](점)		가치 점수 [V](점)
	개선전			L1=			P1=		V1=
	개선후			L2=			P2=		V2=
제안의특징		장 점			단 점				시공시 주의할점
효 과 (기술성)
※유지관리비용은 현재가치를 기입함 ※성능점수 및 가치점수는 공종 및 구성요소가 아닌 전체 프로젝트 기준으로 평가함 ※생애주기비용으로 설계의 경제성 검토가 불가능한 경우 「건설사업비용절감 제안서」로 대체

【별지 제2-2서식】

개     략     도

제안서번호/ 제안명		제안 1 /
개선전
개선후

【별지 제3호서식】

개인 실적증명서

참여자	성 명				성 별			⃞ 남 ⃞ 여
	생년월일				전화번호
	소 속
	전문분야				담 당			리더 또는 팀원
	증명서 용도(제출처)	(제출처: )
경제성검토대상사업	사 업 명
	사업개요 (범위 / 기준 등)
	참여기간 (일)	공사비(백만원)					개인실적(%)			비고
		당초	변경	차액			절감률		가치 향상률
증명서발급기관	위 사실을 증명합니다. 년 월 일
	기 관 명 : 서울특별시 대표자 : 서울특별시장 (인)
	주 소 : 서울특별시
	발급부서 : 서울시 기술심사담당관					담당자 : (인) TEL)