2015년 가락시장 시설현대화사업 사업계획

지자체	소속	과	담 당		연락처
			직	성명
서울특별시 (농수산식품공사)	현대화사업본부	건설계획팀	3급(차장) 4급(과장)	조병길 염동희	(02) 3435-0552 3435-0554

1. 2015년 주요업무 사업계획

○ 2015년 1단계 건축 공정률 목표 : 100% (2014.12.31 기준 공정률 97.92%)

- 토목공사 : 조경 및 포장공사 완료

- 건축공사 : 건축 마감공사 및 준공청소 완료

○ 2015년 2단계를 위한 철거 및 설계 용역 : 0.5%

- 철거공사 : 채소 2동 건축을 위한 철거공사 준비

- 설계용역 : 대체 매장 설계 및 중간설계 실시

2. 2015년 분기별 업무계획

구분		주요공사	목표공정률	세부공사 내역	비고
1 단 계	1/4	Ο 토공사 Ο 건축공사 Ο 설비공사 Ο 전기 및 정보통신공사	100% (토건 100% 전기 100%, 정보통신 100%)	Ο 조경 및 포장 공사 완료 Ο 건축 마감공사 및 준공청소 완료 Ο 설비 시운전 및 소방 준공 완료 Ο 전기 및 정보통신 공사 완료 등
	2/4	Ο 토공사 Ο 건축공사 Ο 설비공사 Ο 전기 및 정보통신공사	100% (토건 100% 전기 100%, 정보통신 100%)	Ο 서울시 사용 승인
도매권역단계	2/4	Ο 설계용역 Ο 철거공사 Ο 설비공사	0.5% (설계 0.1% 철거 0.1%, 설비 0.1%)	Ο 대체매장 설계 완료 Ο 철거공사 발주 Ο 유틸리티 공급공사 시행
	3/4	Ο 설계용역 Ο 철거공사 Ο 설비공사	0.5% (설계 0.2% 철거 0.2%, 설비 0.2%)	Ο 계획설계 완료 Ο 제영향 평가보고서 작성(교통․환경) Ο 관리금융동 석면제거 및 철거완료 Ο 유틸리티 공급공사
	4/4	Ο 설계용역 Ο 철거공사	0.5% (설계 0.2% 철거 0.2%	Ο 중간설계 완료 Ο 도시계획시설(시장)사업 실시계획 인가 신청 Ο 청과/축산직판, 가공처리장 석면 해체