2018년 가락시장 시설현대화사업 사업계획

지자체	소속	과	담 당		연락처
			직	성명
서울특별시 (농수산식품공사)	현대화사업단	건설계획팀	3급(부장) 4급(차장)	장성욱 이승재	(02) 3435-0551 3435-0554

1. 2018년 주요업무 사업계획

○ 도매권역 1공구(채소2동) 설계용역 : 100%

- 용역기간 : '17년 3월 ~ '18년 1월

- 용역내용 : 채소2동 실시설계 및 추가과업

○ 도매권역 1공구(채소2동) 건설사업관리용역(설계) : 100%

- 용역기간 : '17년 3월 ~ '18년 1월

- 용역내용 : 설계감리 및 설계경제성검토(VE)

○ 도매권역 1공구(채소2동) 신축을 위한 후적지 정비 : 100%

- 철거공사 :직판시장, 건어제2경매장 등

○ 도매권역 1공구(채소2동) 신축 건설공사 : 8%

- 공사기간 : '18년 8월 ~ '20년 3월

○ 도매권역 1공구(채소2동) 건설사업관리용역(시공) : 10%

- 용역기간 : '18년 8월 ~ '20년 5월

※ 총사업비 협의조정에 따라 변경될 수 있음

2. 2018년 분기별 업무계획

구분		주요공사	목표공정률	세부공사 내역	비고
도매단계	1/4	Ο 채소2동 설계용역 Ο 채소2동 건설사업관리용역 Ο 후적지 철거공사	설계 100% 감리 100% 철거 70%	Ο 실시설계 Ο 실시설계 감리 및 설계경제성 검토 Ο 직판시장, 건어제2경매장 : 60%
	2/4	Ο 후적지 철거공사	철거 100%	Ο 채소2동 신축부지 확보 완료
	3/4	Ο 채소2동 건설공사	공사 1%	Ο 채소2동 건설공사 발주 및 착공
	4/4	Ο 채소2동 건설공사 Ο 채소2동 건설사업관리용역	공사 8% 감리 10%	Ο 채소2동 건설공사 : 8% Ο 시공 감리 : 10%