제1부

과 업 지 시 서

종로 자전거전용차로 CCTV설치 및 관제센터 구축

기본 및 실시설계용역

2018. 04

자전거정책과

과업지시서

종로 자전거전용차로 CCTV설치 및 관제센터 구축

기본 및 실시설계용역

목      차

Ⅰ. 용 역 설 명 서 ....................................................................... 3

Ⅱ. 과 업 내 용 서 (일반)............................................................. 4

Ⅲ. 과업 수행 세부내용................................................................. 13

Ⅳ. 설비별 설계기준  ................................................................... 17

Ⅰ		용역 설명서

1. 과 업 명 : 종로 자전거전용차로 CCTV설치 등 통합관제센터 구축

기본 및 실시설계용역

2. 과업목적 : 서울시 종로 자전거전용차로내 불법 주.정차 및 주행차량의

단속을 통하여 자전거이용자의 주행환경 개선과 안전사고를 예방하고자

『CCTV신설 및 관련 센터시스템의 설계도서 작성』을 목적으로 함

3. 과업기간 : 착수일로부터 30일

4. 과업 주요내용

가. 서울시 종로(세종대로사거리~종로6가) 자전거전용차로 불법주,정차         및 주행차량 단속 CCTV 신규 설치에 대한 설계

- CCTV설치 대상지 10개소  현장조사 실시(현장여건에 따라 변동가능)

나. 종로 자전거전용차로 불법주,정차 및 주행차량 단속센터 운영에 대한        솔루션제공 및 시스템 구축 등 설계

다. 불법주정차 카메라 신설에 따른 시스템 및 네트워크 보강

- 현장상황 조사 및 네트워크 망 구성검토

라. 행정절차(인․허가) 이행 등 관련기관 업무협의

마. CCTV 폴 구조물(기초 포함) 구조안전진단 실시(기존활용 포함)

바. 설계도서(시방서, 수량산출서, 도면 등) 작성

5. 사업규모

가. 사업위치 : 서울시 종로(세종대로사거리~종로6가) 자전거전용차로

나. 사업규모 :

- 불법주정차 및 주행차량 단속카메라 설치 10개소

- 단속센터운영에 따른 솔루션 제공 및 시스템 운영체계 구축

Ⅱ		과업내용서 (일반)

Ⅱ-1. 일반사항

1. 과 업 명 : 종로 자전거전용차로 CCTV설치 등 통합관제센터 구축

기본 및 실시설계용역

2. 과업의 목적 :『서울시 종로 자전거전용차로내 불법주,정차 및 주행

차량 단속카메라 설치와 센터시스템 연계 설계』에 따른 현장설비 및

센터시스템의 정확하고 경제성 있는 설계도서 및 제반 기준 등 작성

3. 과업대상지역 : 서울시 종로(세종대로사거리~종로6가) 자전거전용

차로 중 일부 불법주,정차 및 주행차량 단속 설치위치 신설대상

지역 및 센터프로그램 운영실(현장조사 결과에 따라 물량증감 있음)

4. 과업수행기간 : 계약일로부터 30일

이 용역의 과업기간은 계약일로부터 30일로 하고, 계약상대자는 다음의 경우에 발주기관의 장 또는 그 위임을 받은 자에게 서면으로 계약기간의 변경을 청구하여야 한다.

가. 관계기관의 협의 및 검토가 관계기관의 사유로 지연되었을        때나. 민원발생에 의해 과업수행이 지연 또는 불가능할 때

다. 천재지변, 전쟁, 내란 등 불가항력 사태의 발생으로 업무수행이    불가능할 때

라. 발주기관의 방침변경 또는 지시에 의한 때

5. 과업범위

가. 서울시 종로 자전거도로 불법주정차 및 주행단속 카메라신설을

위한 현장조사 실시

1) 신설할 카메라의 종류 결정 (고정형 or 회전형)

2) 실효성 있는 통신망의 구성방안(자가망 또는 임대망)

3) 신설 카메라 설치방법 및 기존카메라 활용

나. 불법주정차 현장설비, 센터시스템 연계 구성도 작성

- CCTV 폴 구조물(기초 포함)

다. 실시설계 자료작성

- 시방서, 견적서,수량산출서, 도면 등

라. 유관기관 협의 및 협의결과 설계 반영(각구청 도로굴착 심의,         한전수용신청, 통신선로 개통 등)

마. 불법주정차 신설 및 연계 확대에 따른 시스템 및 네트워크 보강

- 현장상황 조사 및 네트워크 망 구성검토

6. 일반사항

가. 수급자의 성실 등의 의무

1) 수급자는 본 과업을 성실히 수행하여야 하며 관련시설의 안전, 미관, 에너지절약, 기능 및 구조상 지장이 없도록 설계하고 본 과업의 질적 향상에 노력하여야 한다.

2) 관련부서 협의 충실

수급자는 본 과업을 수행함에 있어 관련부서 및 인․허가 관련기관 등과 수시로 협의하고, 그 의견을 충분히 검토 반영하여야 한다.

3) 설계자료 조사 성실

수급자는 과업을 진행함에 있어 충분한 자료를 수집․검토하여 안전하고 경제적이며 에너지 절약형의 최신설비가 되도록 노력하여야 한다.

4) 회의 참석 등

수급자는 본 과업과 관련된 회의 및 보고회 개최 시에는 보고자료 작성 및 각 분야별 기술사항에 대하여 질의 시 성실히 답변하여야 한다.

5) 각종 보고 등 의무 성실

수급자는 다음사항에 대하여 변경이 있을 경우 사전보고 후, 검토된  자료에 따라 과업을 진행하여야 한다.

가) 기술인력 구성에 관한 사항

나) 새로운 기술도입에 관한 사항

다) 설계금액, 공사기간에 관한 사항

라) 설계용역과 관련된 홍보활동 및 간행물 발간 등

마) 기타 발주자로부터 지시받은 사항

나. 보안 대책

1) 과업수행자는 보안 관련 규정을 준수하여야 한다.

가) 계약상대자는 정부 또는 발주기관에 필요한 보안관계 법규등에

저촉되는 일이 없도록 세심한 주의와 의무를 다하여야 하며,       이의 불이행으로 인한 모든 책임은 계약상대자가 져야 한다.

나) 과업수행자는 보안각서를 제출하고, 용역참여자에 대한 보안   각서는 과업수행자 책임 하에 제출한다.

다) 용역과정상에 취득한 정보에 대한 보안사항 및 업무 수행 중   알게 된 내용과 각 단계별 성과품과 기타 자료는 발주처의   승인없이 공개해서는 아니 되며, 자료의 외부 누설과 보안   사항의 불이행 등에 따른 민․형사 및 도의적인 책임 등을    감수하여야 한다.

라) 과업수행 과정에서 발생된 폐기물은 필히 파쇄 처리하여야 한다.

마) 과업수행 관련 주수할 보안업무에 관한 계획과 절차를 정한

보안관리 절차서를 3일 이내 제출하고, 과업참여자 보안교육

등을 실시한다.

바) 용역계약에 의거 작성 제출한 산출물 및 관련 자료의 저작권은   발주기관이 소유하여 발주기관의 승인 없이 반출시 그에 따르는   책임을 진다.

사) 용역참여자가 교체될 시는 인계·인수를 철저히 하고 발주기관    의 승인을 득한 후 교체해야 하며, 【별지#1】보안확약서를 제    출하여야 한다.

아) 사업 수행과정에서 취득한 자료와 정보에 관하여 사업수행 중은    물론 사업완료 후에도 이를 외부에 유출해서는 안 되며, 사업    종료 시 업무담당자의 입회하에 폐기 또는 반납해야 한다.

2) 과업성과품 발간시 유의사항

계약상대자는 필요시 중간 및 최종보고서 등 과업성과물을 용역감독자와 협의하여 내용의 중요도에 따라 대외비로 분류․관리하여야 한다

3) 보안관리의 책임

계약상대자는 관계법규에 의해 보안관리에 최선을 다하여야 하며, 계약상대자의 과실이나 부주의로 인하여 발생한 손해에 대하여 책임을 져야 한다.

7. 과업수행 및 공정보고

가. 착수신고서

1) 계약상대자는 과업착수시 예정공정표, 사업책임기술자 선임신고서가 포함된 착수신고서를 발주기관에 제출한다.

2) 과업수행계획 : 계약상대자는 계약후 현장여건 등을 검토

하여 5일 이내에 과업수행계획서를 제출해야 하며, 이에

포함할 내용은 다음과 같다.

①	공정계획서
②	과업수행조직 및 인력(장비) 투입계획서
③	참여기술자 인적사항
④	참여기술자의 보안서약서

3) 계약 상대자는 상기 과업수행계획서 서류 2부를 발주기관에 제출

하여 승인을 받아야 한다.

9. 계약상대자의 책임

가. 계약상대자의 책임범위

1) 계약상대자는 발주기관의 승인을 받아 작성한 도서라 할지라도, 계약상대자의 잘못으로 발생된 과오나 오류 등으로 인한 과업수행상 발생한 모든 하자에 대하여 계약상대자의 책임이 면제되는 것은 아니며, 계약상대자는 용역준공 후에도 이러한 사항에 대한 발주기관의 수정 보완요구가 있을 때에는 계약상대자 부담으로 시정 조치하여야 한다.

2) 계약상대자는 과업내용서의 업무 및 계약서에 명시된 계약조건을 성실히 이행하여야 하며, 과업과 관련된 중요한 모든 사항은 발주기관의 서면승인을 득한 후 시행하여야 한다.

나. 책임한계

1) 수급자는 용역수행과 관련하여 발생되는 민ㆍ형사상의        모든 책임을 진다.

2) 수급자는 고의, 과실로 인한 불법행위 및 계약 위반으로 인하여 야기된 모든 손해에 대하여 책임을 진다. 상기 배상 책임은 발주자는 물론 본 과업이행요청서(과업지시서)에 의한 용역의 수행에 관련된 제3자의 신체적 상해와 사망 및 재산상의 손해를 포함한다.

3) 계약과 관련하여 분쟁이 있을 경우 정부와 지방자치단체의 계약에 관한 법령 등을 준용하고 관할 법원은 발주자의 소재지를 관할하는 법원으로 한다.

다. 위반행위에 대한 조치

다음과 같은 행위가 발생하였을 때는 과업수행상 특별한 사유가 없는 한 계약 위반행위로 간주하여 관계규정에 따라 조치할 수 있다.

1) 제반 지시사항을 기간 내에 이행하지 않을 때

2) 계약기간 내에 과업을 완료할 능력이 없거나 현저하게 공정이 미달된 때

3) 과업수행 중 성실하지 못하거나 부주의로 인한 과실이 인정될 때

4) 최종 산출물이 누락되거나, 거짓으로 작성되거나, 현저히 조잡할 때

라. 문서의 기록비치

계약상대자는 이 과업을 수행함에 있어 발생하는 관계기관과의 협의사항, 발주기관의 지시 및 조치사항 등 과업추진에 따른 주요 내용을 문서로 작성․비치하여야 하며, 발주기관의 제출요구가 있을 경우에는 이에 따라야 한다.

마. 안전관리의 의무

계약상대자는 관계법규에 의한 안전수칙의 준수 등 안전관리에 최선을 다하여야 하며, 계약상대자의 과실이나 부주의로 인하여 발생하는 사고 및 손해에 대하여 책임을 져야 한다.

바. 과업책임자

1) 계약상대자는 과업책임자를 선정하여야 하며 과업책임자는 수시로 발주처와 협의하여 과업 수행에 차질이 없도록 하여야 한다.

2) 과업책임자는 본 과업 수행에 따른 수집된 제반 자료를       체계적으로 정리하여 과업종료 시 제출하여야 한다.

사. 법률준수의 의무

계약상대자는 이 과업을 수행함에 있어 관계법률에 저촉되는 행위로 인한 모든 피해사항에 대하여 책임을 져야 한다.

10. 적용규정 및 설계기준

가. 각종 규정 및 설계기준은 가장 최근의 자료를 적용하며, 관련규정 및 설계기준이 개정된 경우 동 관련규정 및 설계기준 등에서 규정하는 바에 따라 적용여부를 판단하고, 특별히 규정되지 않은 사항은 발주기관과 협의하여 적용한다.

나. 관련법령 및 기준에 대해 명기한다.

다. 통계자료는 공신력 있는 정부기관, 지방자치단체, 기타 한국은행 등 공공기관의 자료를 활용하고 인용된 통계자료는 반드시 출처를 명시한다.

11.  관계기관 협의 및 인‧허가

가. 계약상대자가 작성할 인‧허가서류 종류와 기관 명기

나. 관계기관과 협의시 특히 고려할 요소 명기

다. 도로굴착협의(도로과), 한전주 공가신청, 수전신청(한국전력공사), 전기안전검사(한국전력공사), 계약심사(서울시), 일상감사(서울시 감사실)등의 관계기관 협의 및 인허가를 완료하고 협의가 미완료된 경우 추가협의가 필요한 사항을 별도의 양식으로 정리

12. 행정예고의 실시 및 의견청취

개인정보보호법 제25조 제3항 및 동법 시행령 제23조 제1항등 관련법령 준수

13. 용어의 해석

과업내용서상의 용어해석에 차이가 있을 경우에는 발주기관과 계약상대자가 상호 협의하여 결정하여야 하며, 협의된 해석은 서면으로 작성한다.

성과품의 작성 서식 및 기준, 문장의 구성등은  아래의 도서의 기준을  준용    하여 서술 표기 함을 원칙으로 함

- 건설공사의 설계도서의 작성기준 (2012. 01 국토해양부)

- 정보통신공사 설계기준 (2017.01 한국 정보통신 연구원)

14. 설계도서 작성시 고려되어야 할 사항

(1) 시공 중 과업내용의 변경 및 공사비 증액의 최소화되도록       조사 및 설계

(2) 환경친화적 공법의 적용

(3) 발주기관과 시공자간의 클레임 발생이 최소화되도록 설계도서 작성

(4) 시스템의 유지관리성 및 호환성 등을 고려하여 설계

15*******

가. 발주기관의 귀책사유로 과업이 지연되어 기간연장이 필요할 경우에는 이로 인해 발생하는 추가 비용은 발주기관이 부담한다.

나. **************************계약상대자는 발주기관 요청에 의한 합동사무실을 운영하는 경우 발주기관이 지원하는 예산의 규모, 업무협의 효율성 등을 고려하여 합동사무실을 설치하여야 한다.

다. 하도급에 관한 사항

1) 계약상대자는 본 설계용역을 다른 설계자에게 일괄하여 하도급   할 수 없다.

2) 계약상대자가 하도급으로 처리할 수 있는 사항은 다음과 같다.

가) 현장 조사, 광케이블 루트 및 전주번호 확인 작업

나) 성능확인을 위한 시험 등의 작업

다) 기타 발주기관이 특별히 인정하는 업무(특별과업, 경관설계 등)

3) 계약상대자는 위항에서 규정하고 있는 하도급으로 처리할 수 있는 사항에 대하여 하도급을 하고자 할 경우 하도급 계획서를 제출하고 발주기관에게 승인을 받아야 한다.

Ⅲ		과업수행 세부내용

Ⅲ-1. 일반원칙

1. 불법주정차 설치대상지(10개소) 현장조사 실시

가. 현장조사 시에는 주변건물, 도로, 시야 및 조도 확보, 폴 설치 가능 여부, 전기수전, 사생활 침해 우려 지역 등 현장의 실제 조건을 조사하여야 한다.

나. 자가 광케이블 망 구축 경로 상의 한국전력공사 배전전주를 조사하고 광케이블 포설방법 및 길이 등을 반영해야 한다

2. 행정절차(인․허가) 이행 등 관련기관 업무협의

가. 수급자는 용역수행에 필요한 제반의 업무 수행을 위하여 관련기관과 협의해야 할 사항에 대해서는 발주자를 대신하여 수행하여야 한다.

나. 한국전력공사 등의 인․허가 담당자로부터 구축에 대한 검토의견을 받아 조치계획에 반영하여야 한다.

다. 도로굴착 및 점용허가, 폐기물 처리, 지하 매설물확인 등에  대해해당 구․군 또는 관련기관과 협의하여야 한다.

3. 설계도서 작성

가. 제반법규 및 규정, 기준에 적합하게 설계하여야 한다.

나. 설계도서 작성은 발주자의 발주계획 상 필요에 의하여 공종별 작성 요구 시 이에 따라 구분한 설계 도서를 제출하여야 한다.

다. 시방서

1) 일반시방서는 공사 관련 필요한 사항 및 유의하여야 할 일반적인 사항을 명시한다.

2) 특별시방서는 일반시방에서 기술되지 않은 내용으로 공사 집행상 특별히 유의하여야 할 사항을 명시하며 사용하고자 하는 기자재의 기능, 특성, 용량, 제작조건 및 기준 등을 명시한다.

라. 예정공정표는 발주자 사업 준공시기에 맞게 작성하여야 한다.

마. 원가계산서 작성

1) 자재 단가는 조달청 가격정보를 기준으로 하고, 시중 거래가격(2개 업체 이상 견적서 첨부)을 기준으로 한다.

2) 설계예산서는 공종별 총공사비, 관급액을 산출한다.

바. 설계도면 작성

1) 설계도면에는 범례,  도면의 일부분에 품명, 수량, 용량, 사양, 기타사항을 표기 하여야 한다.

2) 설계도면상에 기호로 표시하기 곤란한 사항은 문자로 표시하며, 시공에 필요한 사항을 상세히 표시하며, 문자는 한글 사용을  원칙으로 한다.

3) 설계도면은 CAD를 이용하여 작성하며, 추가출력 및 수정이 가능하도록 하여야 한다.

4) 설계내역은 엑셀 등 스프레드시트로 작성하여야 한다.

Ⅲ-2. 조사업무

Ⅲ-2-1. 현지조사 및 답사

1. 서울시청 관할내 불법주정차 통신망의 이해 및  시스템 사양, 운영방식, 관제센터시스템 현황 등을 분석한다.

2. 설치 대상지점의 설치 위치, 광통신망 루트, 접속점, 사용대상 전주번호, 수전점(인근 TR위치 및 번호)등을 파악․확인한다.

3. 공사방법, 기간, 공사비, 유지관리 등에 대한 분석을 통하여 최적의 시공․관리 표준(안)을 제시한다.

4. 현장정밀 조사 및 답사

가. 현장답사 시에는 반드시 주변건물, 도로, 시계 및 조도 확보, 폴 설치 가능여부 등 현장의 실제 조건을 정확하게 표시, 반영한다.

나. CCTV 설치대상 지점 사진, 광통신망 루트, 광케이블 접속점, 사용예정 전주번호, 수전점(인근 TR 위치 및 번호)등을 파악 확인한다.

다. 사생활 침해 우려지역 등 제반여건을 조사 반영한다.

5. CCTV 광통신망 구성방안 검토

Ⅲ-2-2. 지장물 및 구조물 조사

1. 지장물조사는 서울특별시 지하매설물 조회 확인 후 반영한다.

2. 전주․체신주 조사는 한국전력공사 협조를 받아 현장조사를 실시한다.

Ⅲ-2-3-1  계획업무

1.전단계 성과검토

전 단계에서 수행된 성과품을 검토, 분석하여 조사․계획․설계업무의 각 결과치를 실시설계에 최대한 활용하며, 만일 조정이 필요한 경우 발주기관의 승인을 받아 다시 실시하도록 한다

Ⅲ-2-3-2  관련규정의 적용

본 작성기준은 일반사항 위주로 작성된 것이므로 별도의 관련법규, 시방 등을 규정하고 있는 경우에는 해당 규정에 따른다.

1. 국가정보화기본법, 시행령, 시행규칙

2. 전자정부법, 시행령, 시행규칭

3. 개인정보보호법, 시행령, 시행규칙 (CCTV 설치 관련 지침)

4. 정보통신공사업법, 시행령

5. 전기공사업법, 시행령, 시행규칙

6. 전기통신기본법, 시행령

7. 전기통신사업법, 시행령

8. 전기공사 및 설비 관련 법령, 기술기준

9. 소프트웨어산업 진흥법, 같은 법 시행령

10. 산업안전보건법, 시행령, 시행규칙

11. 정보통신보안업무규정

12. 한국산업규격(KS) 및 기타 국내외 표준

13. 전기통신설비의 기술에 관한 규칙

14. 한국전력공사설계기준ㆍ전기공급규정․한전공가설비규정

15. 서울특별시 도로복구 원인자부담금 징수 조례

16. 기타 관련 법령 및 같은법 시행령, 시행규칙등

Ⅲ-2-3-3  구조물의 계획

1. 불법주정차 CCTV 철주

2. 불법주정차 CCTV 암

3. 불법주정차 CCTV 거치대

4. 불법주정차 CCTV 기초

5. 불법주정차 CCTV 함체

Ⅲ-2-3-4  관계기관 협의 및 민원검토

1. 계획시설물 설치에 따라 주변에 미치는 영향과 민원을 최소화할 수 있는 방안을 검토하도록 한다.

2. 실시설계에서 민원 등으로 설계 변경이 이루어지지 않도록 관계     기관과의 충분한 협의가 필요하다.

3. 집단민원 등 향후 야기될 수 있는 문제점을 파악하고 관계기관 대책회의 등을 통한 방향결정이 이루어져야 하며 이 모든 과정은 문서로 보존되어야 한다.

4. 한전주 사용은 한국전력공사 해당지점의 한전주 사용신청 결과를 반영하여 설계한다.

5. 도로굴착은 서울시 각구청 도로과 굴착심의자료를 작성하고  심의 의견을 설계에 반영한다.

Ⅳ		설비별 설계기준

Ⅳ-1. 공통사항

가. 정보통신, 보안, 개인정보보호, 전기, 도로, 도로교통 등의 제반법규 및 규정과 공공기관 영상정보처리기기 설치운영 가이드라인등에  적합하여야 한다.

나. 공사방법, 기간, 공사비, 유지관리 등에 대한 분석을 통하여 최적의  설계가 되어야 한다.

다. 모든 장비는 신품으로 가능한 안정적이고 경제적인 설계가 되어야 한다.

Ⅳ-2-1.  CCTV 현장장비 설계

1. 시방서 별도첨부

[붙임 1]

사업수행업체 보안 준수사항

1. 공통사항

○ 사업 수행과정에서 취득한 자료와 정보에 관하여 사업수행 중은 물론 사업 완료 후에도 이를 외부에 유출해서는 안되며, 사업종료시 보안관리 담당공무원의 입회하에 완전 폐기 또는 반납해야 한다.

○ 사업자는 사업 수행에 사용되는 문서, 인원, 장비 등에 대하여 물리적, 관리적, 기술적 보안대책 및 ‘누출금지 대상정보’에 대한 보안관리 계획을 사업제안서에 기재하여야 하며, 해당 정보 누출시 발주기관은 국가계약법 시행령 제76조에 따라 사업자를 부정당업체로 등록한다.

	< 누출금지 정보 >
① 기관 소유 정보시스템의 내ㆍ외부 IP주소 현황 ② 세부 정보시스템 구성현황 및 정보통신망구성도 ③ 사용자계정 및 패스워드 등 정보시스템 접근권한 정보 ④ 정보통신망 취약점 분석·평가 결과물 ⑤ 용역사업 결과물 및 프로그램 소스코드 ⑥ 국가용 보안시스템 및 정보보호시스템 도입현황 ⑦ 침입차단시스템ㆍ방지시스템(IPS) 등 정보보호제품 및 라우터ㆍ스위치 등 네트워크장비 설정 정보 ⑧ ‘공공기관의 정보공개에 관한 법률’ 제9조1항에 따라 비공개 대상정보로 분류된 기관의 내부문서 ⑨ ‘개인정보 보호법’ 제2조1호의 개인정보 ⑩ ‘보안업무규정’ 제4조의 비밀, 同 시행규칙 제7조3항의 대외비 ⑪ 그 밖의 발주자가 공개가 불가하다고 판단한 자료

2. 내부자료에 대한 보안관리

○ 전산망구성도․IP 현황 등 발주기관에서 제공하는 내부자료에 대해서는 상호간의 책임자가 직접 서명한 후 인수․인계하여야 한다.

○ 사업수행을 위해 제공된 내부 자료는 복사 및 외부반출을 금지한다.

○ 제공된 내부 자료는 매일 퇴근시 반납하여야 하며, 다만 비밀문서를 제외한 일반문서는 제공된 사무실에 시건장치가 된 보관함이 있을 경우 이를 보관함에 보관할 수 있다.

○ 발주기관 보안관리 담당공무원이 사업수행업체에 제공된 사무실에 보관된 자료에 대해 수시로 확인할 수 있도록 하여야 한다.

3. 내․외부망 접근에 대한 보안관리

○ 사업 수행시 발주기관 내부망에 대한 접속은 반드시 발주기관의 승인을 득한 후 하여야 한다.

○ 사업자가 사용하는 PC는 인터넷 연결을 금지함을 원칙으로 한다. 다만, 사업 수행상 필요 한 경우는 사업체의 보안책임관이 접속이 필요한 PC와 웹사이트․서버를 선정하여 직접 발주기관 보안담당자에 요청하여, 승인을 득한 후 사용하여야 한다.

4. 산출물에 대한 보안관리

○ 사업 수행시 생산되는 모든 산출물은 업체의 보안책임관의 관리하에 있는 파일서버에 저장하여야 하며, 계정관리 및 접근권한 부여하여 관리 철저

○ 사업수행시 생산된 산출물 및 기록은 발주기관 보안관리 담당공무원이 인가하지 않은 비인가자에게 제공․대여․열람을 금지한다.

○ 컨설팅 종료 후 최종산출물에 대해 “대외비”임을 표기하여 발주기관에 제출하여야 하며, 기타 자료는 삭제 및 세단 후 폐기하고 발주기관 보안관리 담당공무원의 점검을 받아야 한다.

○ 최종산출물 및 컨설팅 자료는 컨설팅 수행업체의 보관을 금지함을 원칙으로 한다. 다만, 유지보수 등으로 필요한 경우에는 발주기관보안관리 담당공무원의 승인을 득한 후 사용할 수 있다.

〔별지〕

보안확약서

본인은     년   월  일부터    년   월   일까지

사업수행을 완료함에 있어 다음 각 호의 사항에 대한 보안준수 및 책임이

있음을 서약하며 이에 확약서를 제출합니다.

1. 사업수행시 지득한 모든 자료를 반납 및 파기 하였음.

2. 지득한 정보에 대한 유출을 절대 금지 하겠음.

3. 보안위규시 관련 법규에 따른 모든 조치와 손해배상을 감수 하겠음.

년    월    일

서 약 자

소        속 :

직        급 :

성        명 :                      (서명)

주민등록번호  :

서약집행자

소        속 :

직        급 :

성        명 :                        (서명)

서울시청 귀하

보안확약서(대표자용 - 사업종료시 작성)(참여자용 - 사업종료시 작성)