VE 통합 원가심사 조정내역 및 사유서

□ 공 사 명 : 마곡산업단지 공공산업지원시설 건립 전기공사

□ 사업개요

위 치	강서구 가양1동 마곡산업단지 D-28 2필지
구 매 개 요	수변전 설치공사, 전력케이블 설치공사, 전력간선 설치공사 등
공 사 기 간	착공일로부터 36개월

□ 심사평가 결과

○ 설계금액 :	3,747,812천원
○ 심사금액 :	3,593,664천원
○ 절 감 액 :	154,148천원
○ 절 감 율 :	4.1%

□ 주요 심사내용

○ 자재단가 조정 : 케이블트레이 부속품 외 5종(조달청 단가 등)

- 트레이부속품(컨넥터) : 1,480원/개 → 926원/개

- 박리제(목재용, 수성) : 3,000원/ℓ → 870원/ℓ

○ 일위대가 조정 : 전선설치 외 72개 공종

- 전선(HFIX 2.5㎡) 설치품 정정 : 내선전공(0.01인→0.0081인)

- 소방전선(FR-8 1C 95㎡) 동시포설 적용: 저압케이블공(0.071인→0.0639인)

○ 기타 조정 : 간접노무비 7.9% →7.7% 적용(36개월 이하)

□ 사업부서 협의결과

○ 이견 없음