2020 한성백제박물관 기증자료 특별전시회

전시 세부 추진 일정

구분	1월	2월	3월		4월		5월		6월		7월		8월		9월
□ 전시 기획	전시 운영 계획 수립 (초안)	전시 운영 계획 수립 (수정)	전시 운영 계획 수립 (최종)
□ 전시 자료 목록 작성		전시 자료 목록 작성 (초안)	전시 자료 목록 작성 (수정)		전시 자료 목록 작성 (최종)
□ 전시 연출 방안 수립			전시 연출 방안 수립 (초안)		전시 연출 방안 수립 (최종)
□ 전시물 설계ㆍ제작ㆍ설치						전시물 설계	전시물 설계	전시물 제작	전시물 제작	전시물 설치
□ 그래픽 제작						그래픽 원고 작성	그래픽 원고 작성	그래픽 제작	그래픽 제작	그래픽 설치
□ 영상물 구상ㆍ제작						시나리오 작성	시나리오 작성	영상물 제작	영상물 제작	영상물 설치
□ 간행물 심의 및 번호 부여				간행물 심의					발간 등록 번호 부여
□ 도록 제작 및 배부				원고 작성 (초안)	원고 작성 (수정)	원고 작성 (최종)	도록 편집 (초안)	도록 편집 (수정)	도록 편집 (최종)	도록 인쇄	도록 배부 (관내)		도록 배부 (관내)		도록 배부 (우편)
□ 홍보물 제작 및 활용								홍보물 편집	홍보물 제작	홍보물 설치	홍보물 배부		홍보물 배부
□ 보도자료 작성 및 제공									보도자료 작성	보도자료 제공
□ 연계 행사ㆍ체험 준비				행사 및 체험 기획	행사 및 체험 기획	행사 및 체험 기획	행사 및 체험 준비	행사 및 체험 준비	행사 및 체험 준비
□ 연계 행사ㆍ체험 운영										개막 행사	행사 및 체험 운영		폐막 행사
□ 발표 원고 수록 책자 발간										발표 원고 제본	발표 원고 배부	책자 편집 (초안)	책자 편집 (초안)	책자 편집 (수정)	책자 편집 (수정)	책자 발간
□ 전시실 관리										전시실 관리	전시실 관리		전시실 관리
□ 관람객 설문 조사										관람객 설문 조사	관람객 설문 조사		관람객 설문 조사
□ 전시물 철거 및 결과 보고														전시물 철거	결과 보고