서울역사박물관 장애인용 승강기 증축(건축)공사

(서울역사박물관)

□ 사업개요

◦위치 : 서울시 종로구 새문안로 55, 서울역사박물관 내

◦규모 : 장애인용 승강기 1대 증축

- 지상3층, 연면적 21.87㎡ 증축(1층~3층 운행, 15인승)

◦기간 : 2017.10.11.～ 2018.1.30.(’17.12월말 현재 공정율: 63.5%)

◦총사업비 : 192,644,000원

□ 사고이월 요구 세부내역

◦이월내역

- 예산과목: 관람지원기반구축, 박물관 유지・운영, 시설비(401-01)

- 이월세부내역

(단위 : 원)

구 분		예산현액(A) '16이월비 제외	(재)배정액 (B)	원인행위액 (C)	지 출 액 (D)	사 고 이 월 액(E) (원인행위미필액)	집행잔액 (A-(D+E))
계		192,644,000	192,644,000	192,644,000	10,112,300	182,531,700 (0)	-
공 사 비		192,644,000	192,644,000	192,644,000	10,112,300	182,531,700 (0)	-
	도 급 비	192,644,000	192,644,000	192,644,000	10,112,300	182,531,700 (0)	-
	관 급 비	-	-	-	-	-	-

◦이월사유

- 장애인용 승강기 기초 터파기 결과 지내력 부족이 우려되어 설계사에 문의한 결과 현장의 지반 상태가 설계 당시 예상한 것과 달라 구조 안전성 확보를 위한 지반보강 공사 (마이크로 파일)의 추가 시공이 필요하다는 의견을 받음

-  구조 검토 및 변경 설계도 작성 기간 동안 공사 대기로 공정을 진행할 수 없었으며, 지반보강(마이크로 파일)공사 추가 수행 등으로 공사 기간이 지연(40일)이 불가피하였고 이로 인해, 당초 준공기한(2017년 12월 21일)내 준공이 어려워 공사의 적정 이행과 시공 품질 확보를 위해 계약 기간을 연장하여 공사 추진 필요

박물관 장애인용 승강기 증축 전기공사

(서울역사박물관)

□ 사업개요

◦위치 : 서울역사박물관 내

◦규모 : 전력간선공사, 팬코일전원 이설공사, 출입구 조명공사 각 1식

◦기간 : ’17.10.26 ～ ’18.1.30 (’17.12월말 현재 45%)

◦총사업비 : 6,376,700원

□ 사고이월 요구 세부내역

◦이월내역

- 예산과목: 관람지원기반구축, 박물관 유지・운영, 시설비(401-01)

- 이월세부내역

(단위 : 원)

구 분		예산현액(A) '16이월비 제외	(재)배정액 (B)	원인행위액 (C)	지 출 액 (D)	사 고 이 월 액(E) (원인행위미필액)	집행잔액 (A-(D+E))
계		6,376,700	6,376,700	6,376,700	-	6,376,700 (0)	-
공 사 비		6,376,700	6,376,700	6,376,700	-	6,376,700 (0)	-
	도 급 비	6,376,700	6,376,700	6,376,700	-	6,376,700 (0)	-
	관 급 비	-	-	-	-	-	-

◦이월사유

- 선행공정(건축공사) 지연에 따른 절대공기 부족

※ 선행 건축 공사 지반보강 공사 추가 시공에 따른 공사기간 40일 연장

박물관 장애인용 승강기 증축 소방공사

(서울역사박물관)

□ 사업개요

◦위치 : 서울시 종로구 새문안로 55, 서울역사박물관 내

◦규모 : 자동화재탐지설비 증설

- 자동화재탐지설비(연기감지기, 광전식) 1식 증설

◦기간 : 2017.10.30.～ 2018.1.30.(’17.12월말 현재 공정율 : 40%)

◦총사업비 : 3,388,000원

□ 사고이월 요구 세부내역

◦이월내역

- 예산과목: 관람지원기반구축, 박물관 유지・운영, 시설비(401-01)

- 이월세부내역

(단위 : 원)

구 분		예산현액(A) '16이월비 제외	(재)배정액 (B)	원인행위액 (C)	지 출 액 (D)	사 고 이 월 액(E) (원인행위미필액)	집행잔액 (A-(D+E))
계		3,388,000	3,388,000	3,388,000	0	3,388,000 (0)	-
공 사 비		3,388,000	3,388,000	3,388,000	0	3,388,000 (0)	-
	도 급 비	3,388,000	3,388,000	3,388,000	0	3,388,000 (0)	-
	관 급 비	-	-	-	-	-	-

◦이월사유

- 선행공정(건축공사) 지연에 따른 절대공기 부족

※ 선행 건축 공사 지반보강 공사 추가 시공에 따른 공사기간 40일 연장

장애인용 승강기(MRL) 구매 설치

(서울역사박물관)

□ 사업개요

◦위치 : 서울시 종로구 새문안로 55, 서울역사박물관 내

◦규모 : 장애인용 승강기(15인승) 구매 설치 1대

- 장애인용 승강기(15인승) 구매 설치 1대

◦기간 : 2017.11.08.～ 2018.1.30.(’17.12월말 현재 공정율 : 50%)

◦총사업비 : 49,827,800원

□ 사고이월 요구 세부내역

◦이월내역

- 예산과목: 관람지원기반구축, 박물관 유지・운영, 시설비(401-01)

- 이월세부내역

(단위 : 원)

구 분		예산현액(A) '16이월비 제외	(재)배정액 (B)	원인행위액 (C)	지 출 액 (D)	사 고 이 월 액(E) (원인행위미필액)	집행잔액 (A-(D+E))
계		49,827,800	49,827,800	49,827,800	-	49,827,800 (0)	-
공 사 비		49,827,800	49,827,800	49,827,800	-	49,827,800 (0)	-
	도 급 비	49,827,800	49,827,800	49,827,800	-	49,827,800 (0)	-
	관 급 비	-	-	-	-	-	-

◦이월사유

- 선행공정(증축건축공사) 지연에 따른 절대공기 부족

※ 선행 건축 공사 지반보강 공사 추가 시공에 따른 공사기간 40일 연장.

서울역사박물관 장애인용 승강기 통신공사

(서울역사박물관 총무과)

□ 사업개요

◦위치 : 서울역사박물관(1층)

◦규모 : 장애인용 승강기 내 스피커 및 CCTV 카메라

◦기간 : 2017.11.20.~2018.1.30.(공정률 70%)

◦총사업비 : 4,430,000월

□ 사고이월 요구 세부내역

◦이월내역

- 예산과목: 관람지원기반구축, 박물관 유지・운영, 시설비(401-01)

- 이월세부내역

(단위 : 원)

구 분		예산현액(A) '16이월비 제외	(재)배정액 (B)	원인행위액 (C)	지 출 액 (D)	사 고 이 월 액(E) (원인행위미필액)	집행잔액 (A-(D+E))
계		4.430.000	4.430.000	4.430.000	-	4.430.000 (0)	-
공 사 비		4.430.000	4.430.000	4.430.000	-	4.430.000 (0)	-
	도 급 비	4.430.000	4.430.000	4.430.000	-	4.430.000 (0)	-
	관 급 비	-	-	-	-	-	-

◦이월사유

- 선행공정(증축건축공사) 지연에 따른 절대공기 부족

※ 선행 건축 공사 지반보강 공사 추가 시공에 따른 공사기간 40일 연장