2020년 가락시장 시설현대화사업 사업계획

지자체	소속	과	담 당		연락처
			직	성명
서울특별시 (농수산식품공사)	현대화사업단	건설계획팀	3급(부장) 4급(차장)	장성욱 이인환	(02)3435-0551 (02)3435-0554

1. 2020년 주요업무 사업계획

○ 2단계(채소2동) 설계용역 : 90%

- 용역기간 : '17년 3월 ~ '20년 10월

- 용역내용 : 채소2동 실시설계 및 추가과업

○ 2단계(채소2동) 건설사업관리용역(설계) : 95%

- 용역기간 : '17년 3월 ~ '20년 10월

- 용역내용 : 설계감리 및 설계경제성검토(VE)

○ 2단계(채소2동) 신축 건설공사 : 5%

- 공사기간 : '20년 12월 ~ '23년 7월

○ 2단계(채소2동) 건설사업관리용역(시공) : 5%

- 용역기간 : '20년 12월 ~ '23년 7월

※ 건축인허가 기간에 따라 변경될 수 있음

2. 2020년 분기별 업무계획

구분		주요공사	목표공정률	세부공사 내역	비고
도매단계	1/4	Ο 채소2동 설계용역 Ο 채소2동 건설사업관리용역	설계 50% 감리 50%	Ο 실시설계 Ο 실시설계 감리 및 설계VE 검토
	2/4	Ο 채소2동 설계용역 Ο 채소2동 건설사업관리용역	설계 80% 감리 80%	Ο 실시설계 Ο 실시설계 감리 및 설계VE 검토
	3/4	Ο 채소2동 설계용역 Ο 채소2동 건설사업관리용역 Ο 채소2동 건설공사	설계 100% 감리 100%	Ο 실시설계 Ο 실시설계 감리 및 설계VE 검토 Ο 채소2동 건설공사 발주
	4/4	Ο 채소2동 건설공사 Ο 채소2동 건설사업관리용역	공사 5% 감리 5%	Ο 채소2동 건설공사 착공 Ο 시공 감리 착수