지출원인행위 미필 이월명세서

□ 사 업 명 : 행복플러스작업장 설치

□ 사업기간 : 2012.06 ~ 2014.09

□ 예산과목 : 부서)장애인복지정책과, 정책)장애인자립생활기반조성, 단위)장애인복지시설확충, 세부)행복플러스작업장 설치, 통계목)민간대행사업비

□ 지출원인행위 미필사유

- ’13.07.02 공사계약 체결 후, 공사기간(’13. 9～ ’14.9) 연장에 따른 절대공기 부족사유로 인하여 공사비가 사고이월됨에 따라

- 건립공사 준공 후 설치 예정이었던, 생산설비 등 부대적 경비인 민간대행사업비를 집행할 수 없었던 사항으로 정상적인 사업추진을 위해 사고이월(원인행위미필) 반드시 필요

※ 참고로 종량제 봉투 시장전망 및 수익성 미흡 등의 사유로 관련 간담회를 통해 재검토됨에 따라 새로운 생산품목(땅콩나물 등) 선정 작업이 진행 중임.

(단위 : 원)

구 분	산 출 내 역	금 액	비고
합 계	- 민간대행사업비 : 318,000천원 □ 사 무 실 : 15,000천원(책상 컴퓨터 등 사무용품) □ 식 당 : 20,000천원(식기 등 주방용품) □ 직업재활생산품 생산시설 기능보강(종량제 봉투) : 283,000천원 ․ 인쇄기 : 150,000천원(50,000천원×3대) ․ 가공기 : 120,000천원(40,000천원×3대) ․ 프레스 : 8,000천원(8,000천원×1대) ․ 기타 작업대 등 : 5,000천원	318,000,000

확 인 자 :  직)장애인일자리창출팀장   성명) 김 경 원      (인)

조 사 자 :        직)지방행정주사보   성명) 김 정 민      (인)

지출원인행위 미필 이월명세서

□ 사 업 명 : 시립노원시각장애인 복지관 재건축공사

□ 사업기간 : ‘12. 02. ~ ’14. 07

□ 예산과목 : 장애인복지시설확충지원, 노원시각장애인복지관     재건축, 시설비 및 부대비, 시설비

□ 지출원인행위 미필사유

- 총차(1,2차수)계약중 1차수 공사계약분을 사고이월하는 것으로1차수 공사기간이 ‘13.1.2~’14.5.16일까지로 물가상승에 따른 ES(물가변동에 의한 계약금액조정)비용, 하수도 원인자부담금 및 친환경 및 BF 인증 납부 수수료 등은 공사완료 후에 발생되는 항목으로 계약시기가 미도래하여 원인행위 미필

(단위 : 원)

구 분	산 출 내 역	금 액	비 고
합 계	각종 건축물 준공전후 부담금 납부 수수료 등	150,000,000
1	물가 상승에 따른 ES 비용 발생(공사중)	100,000,000	건축,설비부
2	하수도 원인자 부담금 등(준공후) 산출 : 2708.43㎡×20ℓ÷1,000×465,000원 = 25,188,399원	25,000,000	건축부
3	친환경 및 BF 인증 납부 수수료 등(준공후) -친환경건축물 인증 : 12,000,000 친환경건축물 인증기준(환경부, 국토해양부 제정) -BF(Barrier Free)인증 :8,000,000 장애물없는 생활환경 인증제도 지침 (국토해양부 공고)	25,000,000	건축부

확 인 자 :      직) 건축부장  성명) 정 재 흥 (인)

조 사 자 :      직) 주 무 관  성명) 이 병 석 (인)