2018년도 가락시장 시설현대화 사업 예산 집행 계획

1. 2018년 가락시장 시설현대화사업 예산 집행 1차 교부액

(단위 : 백만원)

구 분	합 계	국고보조금	국고융자금	지방비
예산교부요청액	5,215	1,565	2,085	1,565

2. 2018년 가락시장 시설현대화사업 예산 차수별(월별) 집행 세부계획

(단위 : 백만원)

구분		집행 예산 내역				주요 집행 내역
		합계	국고	융자	지방비
1차 교부	1월	-	-	-	-
	2월	-	-	-	-
	3월	1,535	461	613	461	- 채소2동 설계용역 준공(1,156) - 교통영향평가, 환경영향평가(83) - 녹색인증 용역 및 수수료(46) - 채소2동 설계 건설사업관리용역(250)
	4월	-	-	-	-
	5월	280	84	84	112	- 채소2동 부지내 철거, 폐기물처리(265) - 사후환경영향조사(15)
	6월	39	12	15	12	- 문화재조사용역(39)
	7월	-	-	-	-
	8월	-	-	-	-
	9월	974	292	390	292	- 채소2동 부지정리 및 폐기물처리(974)
	10월	-	-	-	-
	11월	2,387	716	955	716	- 채소2동 신축 건설공사 1차 기성(2,304) - 채소2동 시공 건설사업관리용역(83)
	소계	5,215	1,565	2,085	1,565
2차 교부	12월	3,477	1,043	1,391	1,043	- 채소2동 신축 건설공사 2차 기성(3,399) - 채소2동 시공 건설사업관리용역(78)
	소계	3,477	1,043	1,391	1,043
합계		8,692	2,608	3,476	2,608