‘20년 교통사고 잦은곳 개선사업 이월 사유서

(서울시, 교통운영과, 과장 강진동, 담당 김대원 ☎:02-2133-2446)

□ 총괄표

(단위 : 개소, 백만원)

구 분	사업명	집행현황(국비)			이월액	불용액	추 진 상 황			비고 (준공예정일)
		예산액	집행액	집행율			계	설계중	추진중
서울시	교통사고 잦은 곳 개선	3,231	2,711	83.9	48	473	1	-	1	‘21.6.

□ 이월사유

ㅇ 송파구 잠실학원사거리 1개소 교통사고 잦은 곳 개선사업

- 사업구간 내 보도확장 공사 관련 한국전력공사에서 관리하는 지장물 이설에 따른 공기지연 등

- 동절기 굴착통제로 한국전력공사 지장물 이설 이후 착공하여 ’21.6월 준공 예정

□ 지금까지 추진경위

ㅇ ‘송파구 잠실학원사거리’ 1개소 교통사고 잦은 곳 개선사업

- ´19. 11월, 사업대상지 실시설계 시행

- ´20. 2월, 교통안전시설물 심의 완료

- ´20. 4월, 사업부서 예산 재배정 완료

- ´21. 2월, 사업부서 이월예산 재배정 완료

□ 앞으로 추진(집행)계획

(단위 : 백만원)

사업명	추진계획	집행계획
		이월액	2월	3월	4월	5월	6월	합계
계		48					48	48
개선사업	사업 시행 및 준공(21.6.)	48					48	48