① 16-83		② 우이동 가족캠핑장 조성 연구

③  <지역발전본부 동북권사업단>

사업 구분	요청	관련 사업명	우이동 가족캠핑장 조성
용역 기간 (계약금액)	’17.2.1. ~ ’17.5.31 (39,000천원)		결과 보고	⑥ 본부장 보고
활용목표	⑦ 기본계획 수립		활용 결과	⑧ 추진중

□ 활용 목표

○ 여가수요 증가 및 캠핑문화 확산에 따라 가족캠핑장을 조성하여, 다양한 세대가 휴식 및 역사·문화 체험공간으로 활용할 수 있도록 캠핑장 조성에 활용코자 함.

□ 연구 결과

○ 캠핑장 조성 관련 법적, 환경적, 사회적, 기술적 타당성 분석결과 우이동 가족캠핑장은 조성은 적합

- 공원유형 : 역사공원, 문화공원이 적합

- 부지내 비오톱 1등급지역을 훼손하지 않고 조성

□ 활용 실적

○ ’17. 8. 25 : 기본 및 실시설계용역 계약

- 용역기간 : ‘17. 8. 25 ~ ’18. 6. 24.

○ ’17.9.29 ~ 11.21 : 도시계획시설(공원) 열람공고 및 시의회 의견청취

□ 향후 계획

○ ‘18. 3.~ 4. : 공원조성계획 열람공고(14일) 및 도시공원위원회 심의

○ ‘18. 4.~ 5. : 공원조성계획 실시계획인가 및 보상계획 열람공고

○ ‘18. 6.~ 9. : 보상협의(협의불가시 서울토지수용위원회 수용재결)

○ ‘18. 9.~10. : 공탁 및 소유권 이전

○ ‘18.11~’19.4. : 공사착공 및 준공

주관부서	동북권사업 반장:한병준☎2133-8275	발전기획팀장 : 오대중 ☎8281	담당 :정미숙 ☎8278