준공기한 연기의뢰서

1. 계약내용

가. 계약건명 : 도로관리 빅데이터시스템 구축(1단계)

나. 계약업체 : ㈜삼현피에프, ㈔한국도로학회, ㈜시선아이티

다. 계약금액 : 금일십삼억오천이십사만원정(￦1,350,240,000)

라. 계약년월일 : 2017.05.22.

마. 착수년월일 : 2017.05.22.

바. 준공기한   : 2018.05.16.

2. 위 용역의 준공기한을 다음과 같이 연기 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 연기기한 : 2018.08.14

나. 연기사유 귀책소재 : 서울특별시

다. 지체상금 부과여부 : 미부과

라. 연기사유 :

본 용역은 "서울시 도로포장 유지관리 기본계획"의 내용을 반영하여 추진하도록 계획되었으나, 기본계획 수립이 연장되어 2018년 4월에 최종 확정됨에 따라 기본계획 관련 내용을 반영하기 위한 추가 기간이 소요되어 준공기한 연기가 필요함

2018년  5월    일

도로관리과장  박 문 희  (인)

서울특별시(분임)재무관 귀하