투자심사사업 관리카드

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□ 사 업 명 :					양평1유수지 CSOs 저류조 설치
□ 투자심사결과 (단위 : 억원)
구분		사 업 개 요							투 자 심 사							심 사 결 과						비 고
		기 간		사업량			총사업비		심사일자			심사기관				결 과		내 용
당 초		‘14.4~’16.12		46,000㎥			307		‘13.10.28			서울시				조건부		실시설계 이전 2단계심사
2단계심사		‘14.10~’16.12		46,000㎥			315		‘14.9.24			서울시				조건부		설계과정에서의 사업비 적정성 투자심사위원회 보고
□ 사업추진상황 (단위 : 억원)
구 분			심사당시 사 업 비			연 도 별 집 행
						합계		기투자			기준연도(Y)			Y+1			Y+2		Y+3	Y+n		비 고
계			315			320					10			2			85		92	131
재원별	국 비					160											15		80	65
	양여금
	교부세
	시도비
	시군비		315			160					10			2			80		12	56
	지방채
	민 자
	기 타
추진 상황	내 용										설계			설계			착공		시공	준공
	공정율
□ 문제점 및 대책
문 제 점													대 책
□ 기타특이사항
□ 사업추진부서
기 관 명			서울특별시							담당부서					물순환정책과						완료일자
담 당 자			안 은 섭							연 락 처					02-2133-3771

【 별지서식 제8호 】

투자심사사업 관리카드

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□ 사 업 명 :					중랑물재생센터 시설집약 현대화 사업
□ 투자심사결과 (단위 : 억원)
구분		사 업 개 요							투 자 심 사							심 사 결 과						비 고
		기 간		사업량			총사업비		심사일자			심사기관				결 과		내 용
당 초		‘08~’13		1식			2,104		‘10.3.26			시 투심				적정
재심사		‘08~’16		1식			2,241		‘14.9.4			시 투심				적정
□ 사업추진상황 (단위 : 억원)
구 분			심사당시 사 업 비			연 도 별 집 행
						합계		기투자			기준연도(Y)			Y+1			Y+2		Y+3	Y+n		비 고
계			2,241			2,241		986			400			493			239		123
재원별	국 비
	양여금
	교부세
	시도비		2,241			2,241		986			400			493			239		123
	시군비
	지방채
	민 자
	기 타
추진 상황	내 용							설계,시공			시공			시공			시공		시공
	공정율		100			100		44			17			22			10		7
□ 문제점 및 대책
문 제 점													대 책
□ 기타특이사항
□ 사업추진부서
기 관 명			도시기반시설본부							담당부서					방재시설부						완료일자
담 당 자			조양연							연 락 처					02-3708-8783						2017.4.30

【 별지서식 제8호 】

투자심사사업 관리카드

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□ 사 업 명 :					물재생센터 3차(총인)처리시설
□ 투자심사결과 (단위 : 억원)
구분		사 업 개 요							투 자 심 사							심 사 결 과						비 고
		기 간		사업량			총사업비		심사일자			심사기관				결 과		내 용
당 초		2015~2019		175만톤/일			2015		2014.10.31			자체				조건부		사업효과에 대한 지속적인 모니터링 및 사업지별 우선순위 정하여 추진
재심사
□ 사업추진상황 (단위 : 억원)
구 분			심사당시 사 업 비			연 도 별 집 행
						합계		기투자			기준연도(Y)			Y+1			Y+2		Y+3	Y+n		비 고
계
재원별	국 비
	양여금
	교부세
	시도비		2015			31		3			28			38
	시군비
	지방채
	민 자
	기 타
추진 상황	내 용										기본설계중			실시설계중
	공정율										10%			20%
□ 문제점 및 대책
문 제 점													대 책
3차(총인)처리시설 미설치로 물재생센터 방류수 총인 수질기준 초과													겨울철은 환경부와 협의 수질준수유예, 이외시기는 기존시설활용 최대한 수질개선 노력
□ 기타특이사항
-
□ 사업추진부서
기 관 명			물재생시설과							담당부서					물재생시설과						완료일자
담 당 자			이창하							연 락 처					02-2133-3824

투자심사사업 관리카드

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□ 사 업 명 :					난지물재생센터 슬러지 자체시설 설치
□ 투자심사결과 (단위 : 억원)
구분		사 업 개 요							투 자 심 사							심 사 결 과						비 고
		기 간		사업량			총사업비		심사일자			심사기관				결 과		내 용
당 초		’16~’17		160톤/일			126.17		’15.9.23			서울시				적정		사업필요성 인정
재심사
□ 사업추진상황 (단위 : 억원)
구 분			심사당시 사 업 비			연 도 별 집 행
						합계		기투자			기준연도(Y)			Y+1			Y+2		Y+3	Y+n		비 고
계			126.17			126.17								5.17			121
재원별	국 비
	양여금
	교부세
	시도비		126.17			126.17								5.17			121
	시군비
	지방채
	민 자
	기 타
추진 상황	내 용
	공정율		100%								0%						100%
□ 문제점 및 대책
문 제 점													대 책
○ 2015년 현재 난지센터 슬러지 자체처리용량 300톤/일으로 실제 270톤/일 처리 - 총 발생량 405톤/일, 자체처리 135톤/일 부족 ○ ’19년까지 발생량 452톤/일으로 증가 전망 - 182톤/일 자체처리 초과(매립지의존 심화) ○ ’16년부터 수도권매립지 반입료 대폭인상 - 반입료 : ’15년 67,732원 → 109,800원/톤													○ 자체 처리시설 확충 조속 추진 - ’16년 : 설계 및 기본계획 수립 - ’17~18년 : 처리시설 130톤/일 설치 ○ 발생량 저감 자체노력 병행 - 저감목표 : ’15년 발생량 10%(40톤/일) - 처리대상 저감 : 452톤→412톤/일 ※ 시설확충으로 자체처리 430톤/일 확보 - 발생량 전체(412톤/일) 처리가능
□ 기타특이사항
○ 강화된 방류수질기준에 맞춰 하수 중 고형물제거공정 확충으로 슬러지 발생량 지속증가 - 방류수 기준강화(총인) : ’11년 2.0mg/L → ’12년이후 0.5mg/L - 고형물 제거공정 확충 : ’15~’19년 총인처리시설 설치 추진(응집․침전공정 추가)
□ 사업추진부서
기 관 명			물순환안전국							담당부서					물재생시설과						완료일자
담 당 자			전 경 조							연 락 처					2133-3834

투자심사사업 관리카드

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□ 사 업 명 :					서남물재생센터 슬러지 자체시설 설치
□ 투자심사결과 (단위 : 억원)
구분		사 업 개 요							투 자 심 사							심 사 결 과						비 고
		기 간		사업량			총사업비		심사일자			심사기관				결 과		내 용
당 초		’16~’17		250톤/일			197.07		’15.9.23			서울시				적정		사업필요성 인정
재심사
□ 사업추진상황 (단위 : 억원)
구 분			심사당시 사 업 비			연 도 별 집 행
						합계		기투자			기준연도(Y)			Y+1			Y+2		Y+3	Y+n		비 고
계			197.07			197.07								8.07			189
재원별	국 비
	양여금
	교부세
	시도비		197.07			197.07								8.07			189
	시군비
	지방채
	민 자
	기 타
추진 상황	내 용
	공정율		100%								0%						100%
□ 문제점 및 대책
문 제 점													대 책
○ 2015년 현재 서남센터 슬러지 자체처리용량 150톤/일으로 실제 135톤/일 처리 - 총 발생량 566톤/일, 자체처리 431톤/일 부족 ○ ’19년까지 발생량 646톤/일으로 증가 전망 - 511톤/일 자체처리 초과(매립지의존 심화) ○ ’16년부터 수도권매립지 반입료 대폭인상 - 반입료 : ’15년 67,732원 → 109,800원/톤													○ 자체 처리시설 확충 조속 추진 - ’16년 : 설계 및 기본계획 수립 - ’17~18년 : 처리시설 270톤/일 설치 ○ 발생량 저감 자체노력 병행 - 저감목표 : ’15년 발생량 10%(57톤/일) - 처리대상 저감 : 646톤→589톤/일 ※ 시설확충으로 자체처리 420톤/일 확보 - ’19년 이후 자체처리 초과 189톤/일은 중랑, 난지, 탄천 센터 시설용량 여유분 활용 처리
□ 기타특이사항
○ 강화된 방류수질기준에 맞춰 하수 중 고형물제거공정 확충으로 슬러지 발생량 지속증가 - 방류수 기준강화(총인) : ’11년 2.0mg/L → ’12년이후 0.5mg/L - 고형물 제거공정 확충 : ’15~’19년 총인처리시설 설치 추진(응집․침전공정 추가)
□ 사업추진부서
기 관 명			물순환안전국							담당부서					물재생시설과						완료일자
담 당 자			전 경 조							연 락 처					2133-3834

투자심사사업 관리카드

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□ 사 업 명 :					중랑물재생센터 슬러지 자체시설 설치
□ 투자심사결과 (단위 : 억원)
구분		사 업 개 요							투 자 심 사							심 사 결 과						비 고
		기 간		사업량			총사업비		심사일자			심사기관				결 과		내 용
당 초		’16~’17		370톤/일			291.9		’15.9.23			서울시				적정		사업필요성 인정
재심사
□ 사업추진상황 (단위 : 억원)
구 분			심사당시 사 업 비			연 도 별 집 행
						합계		기투자			기준연도(Y)			Y+1			Y+2		Y+3	Y+n		비 고
계			291.9			291.9								11.9			280
재원별	국 비
	양여금
	교부세
	시도비		291.9			291.9								11.9			280
	시군비
	지방채
	민 자
	기 타
추진 상황	내 용
	공정율		100%								0%						100%
□ 문제점 및 대책
문 제 점													대 책
○ 2015년 현재 중랑센터 슬러지 자체처리용량 300톤/일으로 실제 270톤/일 처리 - 총 발생량 592톤/일, 자체처리 322톤/일 부족 ○ ’19년까지 발생량 655톤/일으로 증가 전망 - 385톤/일 자체처리 초과(매립지의존 심화) ○ ’16년부터 수도권매립지 반입료 대폭인상 - 반입료 : ’15년 67,732원 → 109,800원/톤													○ 자체 처리시설 확충 조속 추진 - ’16년 : 설계 및 기본계획 수립 - ’17~18년 : 처리시설 350톤/일 설치 ○ 발생량 저감 자체노력 병행 - 저감목표 : ’15년 발생량 10%(59톤/일) - 처리대상 저감 : 655톤→596톤/일 ※ 시설확충으로 자체처리 650톤/일 확보 - 발생량 전체(596톤/일) 처리 가능
□ 기타특이사항
○ 강화된 방류수질기준에 맞춰 하수 중 고형물제거공정 확충으로 슬러지 발생량 지속증가 - 방류수 기준강화(총인) : ’11년 2.0mg/L → ’12년이후 0.5mg/L - 고형물 제거공정 확충 : ’15~’19년 총인처리시설 설치 추진(응집․침전공정 추가)
□ 사업추진부서
기 관 명			물순환안전국							담당부서					물재생시설과						완료일자
담 당 자			전 경 조							연 락 처					2133-3834

투자심사사업 관리카드

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□ 사 업 명 :					탄천물재생센터 슬러지 자체시설 설치
□ 투자심사결과 (단위 : 억원)
구분		사 업 개 요							투 자 심 사							심 사 결 과						비 고
		기 간		사업량			총사업비		심사일자			심사기관				결 과		내 용
당 초		’16~’17		120톤/일			95.02		’15.9.23			서울시				적정		사업필요성 인정
재심사
□ 사업추진상황 (단위 : 억원)
구 분			심사당시 사 업 비			연 도 별 집 행
						합계		기투자			기준연도(Y)			Y+1			Y+2		Y+3	Y+n		비 고
계			95.02			95.02								4.02			91
재원별	국 비
	양여금
	교부세
	시도비		95.02			95.02								4.02			91
	시군비
	지방채
	민 자
	기 타
추진 상황	내 용
	공정율		100%								0%						100%
□ 문제점 및 대책
문 제 점													대 책
○ 2015년 현재 탄천센터 슬러지 자체처리용량 200톤/일으로 실제 180톤/일 처리 - 총 발생량 301톤/일, 자체처리 121톤/일 부족 ○ ’19년까지 발생량 318톤/일으로 증가 전망 - 138톤/일 자체처리능력 초과(매립지의존 등) ○ ’16년부터 수도권매립지 반입료 대폭인상 - 반입료 : ’15년 67,732원 → 109,800원/톤													○ 자체 처리시설 확충 조속 추진 - ’16년 : 설계 및 기본계획 수립 - ’17’~18년 : 처리시설 140톤/일 설치 ○ 발생량 저감 자체노력 병행 - 저감목표 : ’15년 발생량 10%(32톤/일) - 처리대상 저감 : 318톤→289톤/일 ※ 시설확충으로 자체처리 340톤/일 확보 - 발생량 전체(289톤/일) 처리 가능
□ 기타특이사항
○ 강화된 방류수질기준에 맞춰 하수 중 고형물제거공정 확충으로 슬러지 발생량 지속증가 - 방류수 기준강화(총인) : ’11년 2.0mg/L → ’12년 이후 0.5mg/L - 고형물 제거공정 확충 : ’15~’19년 총인처리시설 설치 추진(응집․침전공정 추가)
□ 사업추진부서
기 관 명			물순환안전국							담당부서					물재생시설과						완료일자
담 당 자			전 경 조							연 락 처					2133-3834

【 별지서식 제8호 】

투자심사사업 관리카드

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□ 사 업 명 :					서남물재생센터 하수슬러지 자체 처리시설 사업
□ 투자심사결과 (단위 : 억원)
구분		사 업 개 요							투 자 심 사							심 사 결 과						비 고
		기 간		사업량			총사업비		심사일자			심사기관				결 과		내 용
당 초		‘17~’19		270톤/일 건조시설 1식			204.07		‘16.9.28			시 재정관리 담당관				조건부 추진		사업비 10% 이상 절감 추진
재심사							해		당			없				음 -
□ 사업추진상황 (단위 : 억원)
구 분			심사당시 사 업 비			연 도 별 집 행
						합계		기투자			기준연도(Y)			Y+1			Y+2		Y+3	Y+n		비 고
계
재원별	국 비
	양여금
	교부세
	시도비		184			184		-			8.00			90.00			86		-
	시군비
	지방채
	민 자
	기 타
추진 상황	내 용		- 시기			미도래 -
	공정율
□ 문제점 및 대책
문 제 점													대 책
해당사항 없음
□ 기타특이사항
특이사항 없음
□ 사업추진부서
기 관 명			서을특별시							담당부서					물재생시설과						완료일자
담 당 자			김명훈							연 락 처					02) 2133-3843						‘16.12.20

투자심사사업 관리카드

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□ 사 업 명 :					중랑천 마스터플랜 단기사업
□ 투자심사결과 (단위 : 억원)
구분		사 업 개 요							투 자 심 사							심 사 결 과						비 고
		기 간		사업량			총사업비		심사일자			심사기관				결 과		내 용
당 초		’16~’20		하천정비 12.3km			325		’15.10			서울시				조건부 추진		단기사업구간 수질개선효과는 미미할 것이므로 생태조성사업으로 추진
재심사
□ 사업추진상황 (단위 : 억원)
구 분			심사당시 사 업 비			연 도 별 집 행
						합계		기투자			기준연도(Y)			Y+1			Y+2		Y+3	Y+n		비 고
계			325			325								16			8		72	229
재원별	국 비
	양여금
	교부세
	시도비		325			325								16			8		72	229
	시군비
	지방채
	민 자
	기 타
추진 상황	내 용
	공정율
□ 문제점 및 대책
문 제 점													대 책
-													-
□ 기타특이사항
․중랑천 생태회복 및 친수문화 조성 기본 및 실시설계 시행중(’16.7~’17.10.)
□ 사업추진부서
기 관 명			물순환안전국							담당부서					하천관리과						완료일자
담 당 자			권혁정							연 락 처					2133-3885

【 별지서식 제8호 】

투자심사사업 관리카드

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□ 사 업 명 :					중랑천 초안산앞 보행교량 설치
□ 투자심사결과 (단위 : 억원)
구분		사 업 개 요							투 자 심 사							심 사 결 과						비 고
		기 간		사업량			총사업비		심사일자			심사기관				결 과		내 용
당 초		’15~’18		보행교 191m			94		’16.3			서울시				적정
재심사
□ 사업추진상황 (단위 : 억원)
구 분			심사당시 사 업 비			연 도 별 집 행
						합계		기투자			기준연도(Y)			Y+1			Y+2		Y+3	Y+n		비 고
계			94			94		2			20			40			32
재원별	국 비
	양여금
	교부세
	시도비		94			94		2			20			40			32
	시군비
	지방채
	민 자
	기 타
추진 상황	내 용
	공정율
□ 문제점 및 대책
문 제 점													대 책
-													-
□ 기타특이사항
․’16.4. 공사 착수
□ 사업추진부서
기 관 명			물순환안전국							담당부서					하천관리과						완료일자
담 당 자			권혁정							연 락 처					2133-3885