2020년도 가락시장 시설현대화 사업 예산 집행 계획

1. 2020년 가락시장 시설현대화사업 예산 집행 1차 교부액

(단위 : 백만원)

구 분	합 계	국고보조금	국고융자금	지방비
예산교부요청액	1,400	420	560	420

2. 2020년 가락시장 시설현대화사업 예산 차수별(월별) 집행 세부계획

(단위 : 백만원)

구분		집행 예산 내역				주요 집행 내역
		합계	국고	융자	지방비
1차 교부	1월	-	-	-	-
	2월	-	-	-	-
	3월	1,400	420	560	420	- 채소2동 설계용역 준공(1,200) - 교통영향평가 등 설계관련용역(130) - 채소2동 설계적정성검토 조달수수료(70)
	4월	-	-	-	-
	5월	-	-	-	-
	6월	-	-	-	-
	7월	-	-	-	-
	8월	-	-	-	-
	소계	1,400	420	560	420
2차 교부	9월	5,452	1,636	2180	1,636	- 채소2동 신축 건설공사 1차 선금(5,452)
	10월	-	-	-	-
	11월	-	-	-	-
	12월	8,641	2,592	3,457	2,592	- 채소2동 신축 건설공사 1차 준공(8,177) - 채소2동 시공 건설사업관리용역(464)
	소계	14,093	4,228	5,637	4,228
합계		15,493	4,648	6,197	4,648