1. 남태령로~국도47호선 BRT 건설

□ 사업목적

ㅇ 현재 공사중인 강남순환고속도로 건설로 인해 사당IC가 설치되는 남태령로 구간(현재는 가로변 버스차로 운영중)의 중앙버스전용차로 건설이 불가피한 실정이며, 서울시 사당역과 과천시, 군포시, 안양시와 연계하여 지역간 정시성을 확보, 경쟁력 있는 대중교통체계를 구축

□ 사업내용

ㅇ (구    간) 경기도 군포시 당동2지구 ～ 서울시 사당역

ㅇ (사업규모) BRT건설 당초 : L=20.3km(서울시 2.2km, 경기도 18.1km)

변경 : L=10.7km(서울시 2.2km, 경기도 8.5km)

※ 도로확장이 수반되어 과다한 사업비가 소요되는 당동2지구 순환구간(L=6.32km) 및 차로부족 및 민원 등으로 사업추진에 어려움이 있는 과천시 시내구간(갈현삼거리～관문사거리, L=3.29km)은 제외하여 사업 추진 계획임

□ 사업기간 : 2015년～ 2019년 (5년)

□ 사 업 비 : 879억원 (국고 439.5, 지방비 439.5)

※ 상기와 같이 사업구간을 변경할 경우 사업비 감소가 예상됨

□ 참고사항

ㅇ 현재 공사중인 강남순환고속도로 건설로 인해 사당IC가 설치되는 남태령로 구간(현재는 가로변 버스차로 운영중)의 중앙버스전용차로 건설이 불가피한 실정이며, 차로확장 필요, 민원사항 등으로 인한 당동2지구 순환구간 및 과천시내구간은 제외하고 사업추진 계획임

※ 강남순환고속도로 사업추진 현황

- 위    치 : 서울특별시 금천구 소하동(소하JCT) ~ 강남구 수서동

- 사 업 량 : L=22.9km(지하차도 9개소, 교량 4개소, IC 2개소)

- 사업기간 : 2001.12 ~ 2018.7

L=10.7km

2. 밤고개길~국지도23호선 BRT 건설

□ 사업목적

ㅇ 서울시 수서역과 경기도 용인시 및 수원시 광교신도시와 연계하여 지역간 정시정을 확보 경쟁력 있는 대중교통체계를 구축

□ 사업내용

ㅇ (구    간) 경기도 수원시 광교도청역 ～ 서울시 수서역

ㅇ (사업규모) BRT건설 : L=23.6km(서울시 3.0km, 경기도 20.6km)

□ 사업기간 : 2015년～ 2018년 (4년)

□ 사 업 비 : 874억원 (국고 437, 지방비 437)

□ 참고사항

ㅇ 수서역과 광교지구를 연계하는 노선으로 용인시 교통혼잡지역과 광교지구 입주에 대비하여 조속한 설계 및 공사가 진행되어야 함

※ 수원 광교지구 현황

- 부지면적 : 11,304천㎡, 세대수 31,113세대, 수용인구 77,883명

- 최초입주 : 2011.7월, 입주완료 : 2015년 하반기

국지도23호선

국도43호선

국도42호선

광교지구

L=23.6km

광교 도청역

영동고속도로

용인~서울

고속도로

수서역

풍덕천사거리

지  하  철

신분당선연장

경부고속도로

3. 도봉로~국도43호선 BRT 건설

□ 사업목적

ㅇ 출․퇴근시 극심한 교통체증을 보이고 있는 국도43호선(의정부～송우리) 구간 도로확장 공사중(4차로→6차로)으로 도로확장과 병행하여 BRT 도입이 시급한 실정이며, 서울시 중앙버스전용차로(도봉로)와 연계하여 경기도 의정부시, 포천시를 신속히 연결하는 경쟁력 있는 대중교통체계를 구축

□ 사업내용

ㅇ (구    간) 경기도 포천시 소흘읍 송우리 ～ 서울시 도봉산역

ㅇ (사업규모) BRT건설 당초 : L=19.7km(서울시 0.4km, 경기도 19.3km)

※ 도로확장 6.4km 포함되 있으나, 현재 서울지방국토관리청에서 동 구간에 대하여 도로확장공사를 진행중에 있으므로, 도로확장 사업내용을 포함 또는 고려할 필요는 없는 것으로 판단됨

□ 사업기간 : 2015년～ 2018년 (4년)

□ 사 업 비 : 1,618억원 (국고 809, 지방비 809)

※ 상기와 같이 도로확장 사업내용을 포함 또는 고려하지 않은 경우 경제성분석 결과(예측) : B/C=1.14, NPV=+140억원, IRR=0.75%로 변경이 예상됨(도로확장비용 포함시 : B/C=0.75, NPV=-393억원, IRR=0.3%)

□ 참고사항

ㅇ 국도43호선(의정부～송우리) 구간 도로확장 공사중(4차로→6차로)으로 도로확장과 병행하여 BRT 도입 시 사업시행청인 서울지방국토관리청과 협의 필요

※ 국도43호선(의정부~소흘) 확장공사 현황

- 위    치 : 경기도 의정부시 경계 ~ 포천시 소흘읍 송우리

- 사 업 량 : L=8.25km(4차로→6차로)

- 사업기간 : 2009.3 ~ 2016.5

- 사업시행청 : 서울지방국토관리청

포    천

송우지구

도봉산역

L=19.7KM

도로확장

L=6.4km

축석검문소