3호선 150칸 납품기한

구 분	수 량	납 품 기 한	비 고
1차	10량(1편성)	2020.4.20	초도차량
2차	10량(1편성)	2020.5.20	’20년: 80칸 ’21년: 70칸 ※ 초도편성 공사 반입 예정시기: ’21.4월
3차	10량(1편성)	2020.6.20
4차	10량(1편성)	2020.7.20
5차	10량(1편성)	2020.8.20
6차	10량(1편성)	2020.9.20
7차	10량(1편성)	2020.10.20
8차	10량(1편성)	2020.11.20
9차	10량(1편성)	2021.1.20
10차	10량(1편성)	2021.2.20
11차	10량(1편성)	2021.3.20
12차	10량(1편성)	2021.4.20
13차	10량(1편성)	2021.5.20
14차	10량(1편성)	2021.6.20
15차	10량(1편성)	2021.7.20

※ 최종편성 약 5개월 납품지연 예상(공정회의 자료)

5,7호선 336칸 납품기한

구 분	수 량	납 품 기 한	비 고
1차	8량(1편성)	2020.11.05.	초도차량
2차	8량(1편성)	2020.11.20.	’20년: 32칸 ’21년: 192칸 ’22년: 112칸 ※ 초도편성 공사 반입 예정시기: ’21.3월
3차	8량(1편성)	2020.12.05.
4차	8량(1편성)	2020.12.20.
5차	8량(1편성)	2021.01.05.
6차	8량(1편성)	2021.01.20.
7차	8량(1편성)	2021.02.05.
8차	8량(1편성)	2021.02.20.
9차	8량(1편성)	2021.03.05.
10차	8량(1편성)	2021.03.20.
11차	8량(1편성)	2021.04.05.
12차	8량(1편성)	2021.04.20.
13차	8량(1편성)	2021.05.05.
14차	8량(1편성)	2021.05.20.
15차	8량(1편성)	2021.06.05.
16차	8량(1편성)	2021.06.20.
17차	8량(1편성)	2021.07.05.
18차	8량(1편성)	2021.07.20.
19차	8량(1편성)	2021.08.05.
20차	8량(1편성)	2021.08.20.
21차	8량(1편성)	2021.09.05.
22차	8량(1편성)	2021.09.20.
23차	8량(1편성)	2021.10.05.
24차	8량(1편성)	2021.10.20.
25차	8량(1편성)	2021.11.05.
26차	8량(1편성)	2021.11.20.
27차	8량(1편성)	2021.12.05.
28차	8량(1편성)	2021.12.20.
29차	8량(1편성)	2022.01.05.
30차	8량(1편성)	2022.01.20.
31차	8량(1편성)	2022.02.05.
32차	8량(1편성)	2022.02.20.
33차	8량(1편성)	2022.03.05.
34차	8량(1편성)	2022.03.20.
35차	8량(1편성)	2022.04.20.
36차	8량(1편성)	2022.05.20.
37차	8량(1편성)	2022.06.20.
38차	8량(1편성)	2022.07.20.
39차	8량(1편성)	2022.08.20.
40차	8량(1편성)	2022.09.20.
41차	8량(1편성)	2022.10.20.
42차	8량(1편성)	2022.11.20.

4호선 210칸 납품기한

구 분	수 량	납 품 기 한	비 고
1차	10칸(1편성)	2022.09.05.	초도차량
2차	10칸(1편성)	2022.10.05.	’22년: 40칸 ’23년: 120칸 ’24년: 50칸
3차	10칸(1편성)	2022.11.05.
4차	10칸(1편성)	2022.12.05.
5차	10칸(1편성)	2023.01.05.
6차	10칸(1편성)	2023.02.05.
7차	10칸(1편성)	2023.03.05.
8차	10칸(1편성)	2023.04.05.
9차	10칸(1편성)	2023.05.05.
10차	10칸(1편성)	2023.06.05.
11차	10칸(1편성)	2023.07.05.
12차	10칸(1편성)	2023.08.05.
13차	10칸(1편성)	2023.09.05.
14차	10칸(1편성)	2023.10.05.
15차	10칸(1편성)	2023.11.05.
16차	10칸(1편성)	2023.12.05.
17차	10칸(1편성)	2024.01.05.
18차	10칸(1편성)	2024.02.05.
19차	10칸(1편성)	2024.03.05.
20차	10칸(1편성)	2024.04.05.
21차	10칸(1편성)	2024.05.05.