부문	과제번호	세부사업명	사업유형	기간	담당자(연락처)
물관리	Ⅲ-2-나-1	상수관로의 누수량 최소화를 통한 유수율 제고	기존보완	‘17~‘21	김영일(3146-1515)

사 업 명

[Ⅲ-2-나-1] 상수관로의 누수량 최소화를 통한 유수율 제고

주관부서

(협조부서)

상수도사업본부 누수방지과

담당자

김영일

연락처

3146-1515

적응부문

☐ 건강 ☐ 재난/재해 ☐ 산림/생태계 ☑ 물관리

사업유형

☐ 기존 ☑ 기존보완 ☐ 기존확대 ☐ 신규 ☐ 기타(        )

사업성격

☑ 구조적(시설설치·조성·정비 등)

☐ 비구조적(모니터링 및 유지관리, 자료구축·생산, 기술개발 등)

☐ 사회적(법·제도 제정·정비, 교육·홍보 등)

사업기간

2017년 1월～2021년 12월

사업예산

584,354백만원

(시비584,354백만원)

사업개요

□ 추진배경

○ 현황

- ‘89년 상수도사업본부 발족으로 상수도사업은 지방 공기업으로 운영

· 시민에게 맑고 깨끗한 물을 공급해야 하는 공익성과

· 공기업으로서의 경영 합리화도 이루어야하는 과제를 안고 출발

○ 문제점, 추진계기

- 89년 발족당시 유수율 55.2%에 불과하여 생산량 수돗물의 누수율이 42.4%로

생산된 물의 절반가량이 누수로 새어나가는 상황이었음

- 경영합리화를 이루는 방법은 누수량 감소로 유수율을 향상시켜 생산원가 및

제비용 절감이 최선의 방책

□ 사업개요

○ 2020년 유수율 목표 : 95.8% (최종목표 : 2022년까지 96.0% 달성)

- 연도별 유수율 현황

구분	‘89년	‘94년	‘00년	‘03년	‘06년	‘15년	‘16년	‘18년	‘19년
유수율(%)	55.2	62.2	72.0	82.7	90.0	95.2	95.3	95.1	95.8

추진실적

및 성과(’19년)

□ 추진방법

○ 유수율 향상위한 단위사업 추진 및 8개 수도사업소 유수율 경쟁체제

- 상하반기 유수율 향상 추진실적 각1회 점검 및 년1회 종합평가 포상

□ 추진실적(’19년)

○ 노후 상수도관 정비대상 138km중 109.2km 정비완료

○ 불용관 분기점 폐쇄 2,891건(목표1,904건) 정비완료(누수원인 제거)

○ 취약지역 선제적 누수탐지 1,888건(목표1,600건) 적출(누수방지량 431,644㎥)

○ 신속한 누수 복구(8,632건) 및 원인자 누수 제로화로 누수량 감축

－ 6시간이내 복구율 98.6%, 원인자(300mm이상)누수 15건(전년 18건대비 17% 감소)

○ 배수지 항 청소시 퇴수용수 최적관리 추진(배수지별 맞춤형 수위관리)

－ 유수율 평가항목에 추가, 상·하반기 퇴수량 151천㎥ 절감

○ 공공용수 관리대장 작성 및 용수량 관리 강화로 공공용수 648천㎥ 감소

□ 추진성과

○ 유수율 제고 추진성과

성과지표명(단위)	2019년 계획(A)	2019년 성과(B)	달성률(B/A×100)
유수율(%)	95.7	95.8(잠정)	100.1

- 노후관 교체, 선제적 탐지, 신속한 누수복구로 누수량 저감 → 유수율 95.8% 달성

· ‘89년 본부 창설이후 30년간 누수 5만여건 감소, 유수율 40.6% 증가

▶ 누수건수 : ‘89년 59,438건 → ’19년 8,632건 ⇒ 50,806건 감소

· ‘18년 대비 공급량 12,569천㎥ 감소, 누수량 8,322천㎥ 감소, 유수율 0.7% 증가

자체 성과평가

□ 자체 성과평가

○ 유수율 목표달성을 위한 세부사업 달성도 및 주요 추진사항

- 급수시설 정비 및 ICT를 활용한 선제적 탐지로 누수저감

· 노후관 교체 : 목표 138㎞ (실적 109㎞) → 진도 79.1%

· 불용관 정비 : 목표 1,904건(실적 2,891건) → 진도 151%

· 누수탐지 : 목표 1,600건 (실적 1,888건), 방지량 431,644㎥/일 → 진도 118%

- 신속한 누수복구 시행 : 목표 8,300건(추진실적 8,632건) → 초과 332건 (4%)

- 중블록별 공급량 · 조정량 분석, 유량시스템에 의한 공급량 관리 등

성공요인

및 극복사항

○ 공공용수 감소와 누수량 절감을 위한 원인자 누수 제로화 추진등

유수율 향상을 위한 제반 사업의 적극적 추진 성과

○ 문래동 사고이후 노후 상수도관 조기정비를 위해 긴급 추경(727억)을 통해

하반기 일괄 공사 착수하여 정비 추진등을 통해 누수량 감소 효과로 유수율 향상

대외확산·

홍보실적

○ 최종 유수율이 확정되는 4월 초에 유수율 향상(95.8%) 보도자료 배포 예정

관련

증빙자료

○ 상수도 원인자 누수 제로화를 위한 선제적 누수예방 활동 추진계획

(부본부장 방침:누수방지과-3628, 2019.4.2.)

○ 2019년 유수율 향상 추진계획 (본부장 방침:누수방지과-4129, 2019.4.12.)

○ 배수지 항 청소시 퇴수 용수 최적관리 추진방안(부본부장 방침:누수방지과-4619, 2019.4.23.)

○ 유수율 향상 추진실적 종합평가 및 시상계획(부본부장 방침:누수방지과-4378, 2019.4.18.)

계획대비

추진실적

구분	당초계획	연차별 추진현황
2017	유수율 95.5%	유수율 95.7% - 누수건수8,454건, 정비실적89km, 누수탐지1,980건
2018	유수율 95.6%	유수율 95.1% - 누수건수8,399건, 정비실적83km, 누수탐지1,753건
2019	유수율 95.7%	유수율 95.8%(잠정) 누수건수8,632건, 정비실적109km, 누수탐지1,888건
2020	유수율 95.8%	-
2021	유수율 95.9%	-

추진계획

□ ’20년 추진계획

○ 2020년 유수율 목표 : 95.8%

- 장기사용 수도관 38km정비 및 ICT를 활용 체계적인 누수탐지

- 재개발·재건축지역 시설물 관리실태 및 유수율 향상 추진실적 점검

- 유수율 90%미만 중블록 15개소 집중관리

- 유량감시 시스템을 통한 실시간 공급량 관리

※ 배수지 항청소시 퇴수용수 최적관리등 2019년 유수율 향상 사업 지속추진

□ ’21년 추진계획

○ 2021년 유수율 목표 : 95.9%

- 장기사용 수도관 112km정비 및 체계적인 누수탐지를 통한 누수방지 추진

- 재개발·재건축지역 시설물 관리실태 및 유수율 향상 추진실적 점검

- 유수율 저조 중블록 관리 및 유량감시시스템을 통한 과학적 공급량 관리

□ 향후 기대 성과

○ 유수율 향상 결과 누수량 저감에 따른 물 생산량 감소로 인한 생산비용(생산원가

및 제비용) 절감효과 ⇒ 예산절감 및 이산화탄소 생산량 저감⇒ 경영합리화

예산운용

구분

예산계획(단위 : 백만원)

총계

’17

’18

’19

’20

’21

총계

국비

시비

584,354

121,614

144,551

143,589

58,700

115,900

구비

공사

민자

구분

예산실적(단위 : 백만원)

총계

’17

’18

’19

’20

’21

총계

-

-

국비

-

-

시비

396,113

121,614

133,062

141,437

-

-

구비

-

-

공사

-

-

민자

-

-

목표

달성도

(’19년)

□ 목표달성률(%) : 100.1%

□ 목표달성도 : ☑ 매우 우수 ☐ 우수 ☐ 보통 ☐ 미흡 ☐ 미추진

성과분석

구분

지표명(단위 : %)

총계

’17

’18

’19

’20

’21

목표

95.7

95.5

95.6

95.7

95.8

95.9

실적

95.5

95.7

95.1

95.8

-

-

목표

달성도

(’19년)

□ 목표달성률(%) : 100.1%

□ 목표달성도 : ☑ 매우 우수 ☐ 우수 ☐ 보통 ☐ 미흡 ☐ 미추진

지표

유형

☑ 정량 ☐ 정성 ☐ 혼합 ☐ 기타(        )

측정방식

(산출근거)

유수율 산출공식 = (연간 조정량/연간 공급량)*100(%)

* 산출식 : 1,108,753천㎥ ÷ 1,157,017천㎥ = 95.8%

평가

결과

(’19년)

□ 평가결과

○ 성과 및 효과

- 95.8%(목표대비 0.1% 초과달성, 전년대비 0.7%실적증가)

- 수돗물 생산량 감소로 제반 비용 절감으로 경영합리화

· ‘18년대비 누수절감량 8,322천㎥ (’18생산총괄원가713.22원기준)절감: 59억3천5백만원

· ‘89~’19동안 누수절감량 누적 예산절감액(정수장 생산원가기준) : 3조2,071억원1,783억원

- 유수율 0.7% 향상으로 온실가스 감축(‘16년 전력기준) : 1,488tCO2

○ 평가결과

구분		세부내용
목표달성 노력	지표명(단위)	유수율 95.7%
	실적 / 계획	95.7% / 195.8%
	달성률(%)	100.1%
예산집행 노력	실적 / 계획	141,437 / 143,589 (백만원)
	집행률(%)	98.5%
추진실적 근거자료		2019년 유수율(연간 조정량/연간 공급량*100)
최종평가		매우 우수