문서번호	배수과-5826
결재일자	2014.9.4.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	배수과장	급수부장	상수도사업본부부본부장

비굴착갱생(신기술) 시험시공 시행

2014. 8.

상수도사업본부

(급수부)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(	예시 : 일상감사 대상여부 등	)		무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □ 빗물순환 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)		무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)		무 ■
언론홍보 계획	●	홍보계획	:	보도자료 □ 기자설명회 □ 현장설명회 □ 기획보도 □
				기고문 □ 기타 □ ( ) 없음 ■

비굴착갱생(신기술) 시험시공 시행

상수도관 비굴착갱생 신기술 개발자가 시험시공을 요청하여 현장적용 적정성 여부 검증을 위해 시험시공을 시행코자 함.

※ 근거 : 본부장 방침( 배수과-4589, ’13.8.20. )

1. 시험시공 요청 신기술 현황

신기술 개요

신기술 개발자	신기술 인증번호	신기술명	신기술 개요
			적용관경 (㎜)	갱생방법
동도기공(주) 한국건설기술연구원	환경신기술 제431호 유효기간 : ’14.3.6 ~ ’19.3.5	PPR 공법	D1000 ~ 1350	공장에서 융착 및 절첩된 고밀도 PE 라이너를 대구경 상수도관 내에 삽입시켜 가열 후 고온 고압으로 팽창시켜 갱생하는 공법

시험시공 대상관로 및 시행부서

신기술명	위 치	관 종 (구경, 연장)	사업비 (백만원)	사업소
PPR 공법	광진구 중곡동 589-9 ~ 187-23	SP, ‘82년부설 D=1000, L=180	250	동부수도사업소 급수운영과

□ 대상선정

- 동이로 구간(태능교~군자교간)에 매설된 노후 상수도관(’79~’82년 부설 강관, D=1000mm, L=6,300m)중에서 ’13~14’년 태능교~장평교간(D=1000mm, L=5,120m) 배수관를 정비 하였고,

- 잔여구간 1,180m 중에서 분기관 설치되어 있는 일부구간을 선정 시행

시험시공 추진일정

시험시공 대상선정 (‘14.9.2)	⇒	현장조사 및 설계 (‘14.9.3~9.18)	⇒	신기술활용심의요청 (기술심사 담당관) (‘14.9.29)	⇒	심의내용 보완 계약심사 의뢰 (‘14.10.6)	⇒
심사결과 반영 공사 발주 (‘14. 10.13)	⇒	공사계약 및 협약 (‘14.23.)	⇒	시험시공 및 평가 (‘14.11)	⇒	평가결과 통보 (‘14.12)

시행방법

□ 발주방법

- 시험시공임을 명시하여 발주하고 일반경쟁으로 낙찰자 선정 후  신기술부분을 협약에 의하여 시공

□ 대가지급 : 낙찰자와 협약에 의하여 대가지급(하도급 또는 기술료)

- 평가결과 이상이 없을 경우 대가를 지급하고, 부적합 판정시 원상복구비용을 시험시공자가 부담하는 조건을 계약서에 명시하여 시행

3. 평가계획

시험시공 관련 소관업무

□ 평가 주관부서 : 상수도사업본부 급수부

- 평가단 구성 및 평가일정 등 추진

□ 현장관리 주관부서 : 동부수도사업소 급수운영과

- 시험시공 공사 설계, 발주 및 공사 추진

- 평가관련 장비 준비 및 현장 안내

평가단 구성 및 운영

□ 평가단 구성 : 5명(내부 2명, 외부 3명)

- 외부평가단 : 상하수도기술사 등 상수도 전문가 3명

- 내부평가단 : 상수도연구원 1명, 동부수도사업소 급수운영과장

□ 현장적용성 평가 : 항목별로 점수 평가하여 90점이상시 현장적용

□ 평가결과를 신기술 개발자에게 통보

평가방법

□ 서면평가 : 재료의 안전성 및 장비인력의 적정/부적정 평가

평가항목		평가내용	평가결과	비고
요구 품질	재료의 안전성	위생안전기준(수도용자재 및 제품위생안전 공정시험방법 적용)	적정 / 부적정	KC인증 등
	구조의 안전성	신기술 지정당시 세부지침서 항목의 화학적, 물리적 안전에 대한 시험성적서	적정 / 부적정	KS규정 등
	장비 및 인력보유상태	장비1조 이상 인력 20명 이상 (최소 1개조 운용장비 및 인력)	적정 / 부적정	장비 및 인력보유 증빙자료

□ 현장적용성 평가 : 항목별로 점수 평가하여 90점 이상 시 현장적용

- 평가항목 및 배점기준

평가항목	평가내용	배점기준	점수
경제성	기존공법 및 유사신기술 대비 경제성 유지관리비용, 보수비용 발생여부	25점
시공성	공기단축, 공사구간의 적정여부 취약부(곡관부, 분기부) 처리상태 시공성 및 지침서, 세부지침서의 이행상태	25점
품질관리	사용자재의 품질관리 적정여부 세정, 세척의 적정성 세정 후 취약부 보수 보강 상태	25점
안전성	작업자 및 현장 안전관리(장비 및 계획수립) 시민 불편저감 대책 및 이행상태 기계화 자동화 도입여부	15점
유지관리 및 기타	유지관리 편의성, 결함발견 용이성 등 작업구 구축 및 관리상태 발생 폐기물 처리상태	10점

4. 행정사항

시험시공 추진

□ 『현장적용을 위한 신기술(비굴착갱생) 시험시공 기준 (본부장방침   ’13.8.20.)』에 의하여 시행

□ 시험시공 시행 및 평가를 ’14. 12월 중 시행할 수 있도록 추진

평가단 수당지급

□ 외부평가위원 참여 일정에 따라 수당 지급

- 1개소 × 3명 × 150,000원 = 450,000원

- 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 일반관리비, 일반운영비(운영수당)

따로붙임 : 1. 시험시공 신청서

2. 비굴착갱생(신기술) 시험시공 평가표

3. 시험시공 위치도면 1부. 끝.