빗물펌프장 신․증설 추진현황

□ 현 황

(2016. 7.)

계	증설 완료	공사 중	설계완료	계 획 수립중	미 시 행		비고
					사업 보류	사업 취소
120	86	6	7	4	12	6	잠원2( -1)

※ ‘16.6. 준공 2개소(용두3, 공릉2), ’17.6. 준공 예정 2개소 (도곡, 한강교) 포함

□ 추진계획

○ 공사 중(6개소) : 마곡1, 수서, 합정, 도곡, 한강교, 잠원2(자연방류관로)

- 2016. 12. : 3개소(마곡1, 수서, 잠원2 자연방류관로) 완료

- 2017. 06. : 3개소(합정, 도곡, 한강교) 완료

○ 설계 완료(7개소) : 상수, 당인, 박미, 염창1, 행당, 한남, 잠원

- ‘17년 공사 착수 → ’18년 사업 완료

※ 기존 잠원펌프장은 잠원2펌프장 신설 후 착수

○ 계획 수립(4개소) : 중곡, 증산, 영등포, 신길

- ‘17년 설계 착수 → ’19년 공사 착수 → ‘20년 사업 완료

○ 사업 보류․취소(18개소) : 배수개선사업 6개소, 재개발사업 4개소, 사유지내       위치 2개소, 방류수역 미확보 1개소, 가동빈도 저조 5개소

※ 사업 보류대상(12개소)은 해당 사업과 연계 또는 사유 해소 시 개별적으로 증설 추진

□ 30년 빈도 단계별 현황(2020년 85.8% 확보)

년도	2016.12.	2017.12.	2018.12.	2020.12.	비고
계	88	93(+5)	99(+6)	103(+4)
펌프장	마곡1,수서	합정,도곡,빙창 한강교,용산	상수,당인,박미, 염창1,행당,한남	중곡,증산, 영등포,신길
확보율(%)	74.6	77.5	82.5	85.8

※ 2020. 12월까지 사업 보류․취소 18개소를 제외한 모든 펌프장 30년 빈도 확보