한양도성전시관 전시설계 및 전시물 제작 설치공사

(한양도성연구소)

□ 사업개요

◦위   치 : 종로구 율곡로 283 서울디자인지원센터 1~3층

◦규   모 : 3층 상설전시실 440㎡

◦기   간 : ’13. 7.26 ～ ’14. 2.28(’14. 2월말 현재 공정율 80%)

◦총 사업비 : 990,000,000원

□ 사고이월 요구 세부내역

◦이월내역

- 예산과목 : 한양도성전시관 운영, 한양도성전시관 전시설계 및 전시물 제작 설치 공사 , 사무관리비(100-201-01) 및 시설비(100-401-01)

- 이월 세부내역

(단위 : 원)

구 분		예산현액(A) '12이월비 제외	(재)배정액 (B)	원인행위액 (C)	지 출 액 (D)	사 고 이 월 액(E) (원인행위미필액)	집행잔액 (A-(D+E))
계		1,174,000,000	1,174,000,000	1,004,358,000	410,358,800	594,000,000	169,641,200
	사무 관리비	14,000,000	14,000,000	13,998,800	3,998,800	10,000,000	1,200
	시설비	1,160,000,000	1,160,000,000	990,360,000	406,360,000	584,000,000	169,640,000

◦이월사유

- ’13. 5월 입찰공고 후 ’13. 7월 용역을 계약 발주·전시설계 진행

- ’13. 8월~9월 상설전시관 전시설계 후 기존 건물의 용도변경 및 외부 출입구 시설 설치에 따른 문화재청 문화재위원회 사적분과 심의(10~11월), 종로구청 건축심의(12월) 등으로 사업절차 지연

- 충실한 전시물 제작과 전시시설물 설치를 위해 사업기간을 연장('14. 5월)하여 전시관 개관에 만전을 기하고자 함

- 이에 총 예산 1,174,000천원 중 ‘한양도성전시관 상설전시 전시설계 및 전시물 제작 설치 용역’ 계약 금액 990,000천원(사무관리비 10,000천원, 시설비 980,000천원)에서 선급금 396,000천원 지출 후 남은 준공 금액 594,000천원(사무관리비 10,000천원, 시설비 584,000천원)을 사고이월하고자 함