<서식 2>

2018 회계연도 사고이월 요구서

(단위 : 천원, ’18.12.31.기준)

사 업 명 (사업코드)	예 산 과 목				예산 현액	지출원인행위		지 출 액		2018 회계연도 이월예산				불용액	이 월 사 유	완공예정 연월일
	관	항	세항	목 (세목)		월일	금 액	월일	금액	목 (세목)	계 (국고)	원인행위 필 (국고)	원인행위 미필 (국고)
수색동308일대 노후하수관로개량공사	자본적지출 (200)	유형자산취득 (230)	구축물 (234)	시설비 및 부대비 (401-01)	1,000,000	1.1	343,600	5.11	171,800	시설비 및 부대비 (시설비)	171,800	171,800	0	0	월류수대책 수립을 위한 기존관로상태불량으로 대체노선 검토기간등 설계지연으로 사고이월 (원인행위미필은 공사를 위한 예산으로 설계 미완성에 따라 전액 건설개량으로 이월 656,400천원)
노후기반시설실태평가(하수관로)기술용역	사업비용	영업비용	관거비	연구개발비 (연구용역비)	400,000	12.	376,200	0	0	연구개발비 (연구용역비)	376,200	376,200	0	0	13개부서 일괄작성된 과업지시서 작성지연으로 전체적 사업공정 지연

2018 회계연도 사고이월 요구서

(단위 : 천원, ’18.12.31.기준)

사 업 명 (사업코드)	예 산 과 목				예산 현액	지출원인행위		지 출 액		2018 회계연도 이월예산				불용액	이 월 사 유	완공예정 연월일
	관	항	세항	목 (세목)		월일	금 액	월일	금액	목 (세목)	계 (국고)	원인행위 필 (국고)	원인행위 미필 (국고)
하수도 정책자문단 운영 (000006)	사업비용 (700)	영업비용 (710)	일반관리비 (751)	일반운영비 (사무관리비) (201-01)	233,000	8/9	450	8/9	450	일반운영비 (사무관리비) (201-01)	-	-	-	124	‧ 사고이월 요구금액은 “하수도 정책자문단(2기) 운영 및 정책구상 마련” 용역비임 ‧ 정책자문단 구성(′18.6.30 1기 임기 만료 및 ′18.10.29 2기 발족) 및 2회 유찰에 따른 수의계약 등의 지연사유로 ′18.12.14 용역계약됨 ‧ 잔여용역기간에 따라 지급시기가 미도래하여 시고이월 요청	′19.12.13
						11/05	18,506	11/05	18,506
						11/19	4,320	11/23	4,320
						11/27	2,600	11/28	2,600
						12.17	210,000	-	-
CSOs 저감을 위한 하수도시설 개선 타당성조사 및 기본계획 (000008)	자본적지출 (200)	비가동설비자산취득 (260)	건설중인 자산 (261)	시설비 및 부대비 (시설비) (401-01)	500,000	4.11	500,000	4.27	200,000	시설비 및 부대비 (시설비) (401-01)				300,000	‧ 사고이월 요구금액은 용역비임 ‧ 정상 추진중으로 공정율 및 잔여용역기간에 따라 지급시기가 미도래 하여 사고이월 요청	′19.10.02
서울형 하수도 시뮬레이션 인자 영향도 실증 용역 (000010)	사업비용 (700)	영업비용 (710)	일반관리비 (751)	연구개발비 (연구용역비) (207-01)	200,000	12.3	200,000	-	-	연구개발비 (연구용역비) (207-01)	-	-	-	-	‧ 사고이월 요구금액은 용역비임 ‧ 2회 유찰에 따른 수의계약 등의 지연사유로 ′18.10월말 용역계약됨 ‧ 잔여용역기간에 따라 지급시기가 미도래하여 시고이월 요청	′19.12.24