투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울역사박물관
수신자	총무과장
(경유)
제 목	사고이월 및 납품기한 연기 의뢰(야주개홀 무대장치 구매 설치)

1. 시설과-6002(2016.11.7.)호와 관련입니다.

2.『야주개홀 무대장치 구매 설치』관련하여 사고이월 및  납품기한 연기의뢰 하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 사고이월 내역

- 예산과목 : 관람 지원기반 구축, 박물관 유지․운영, 시설비 및 부대비,

시설비

- 이월금액 : 125,111,200원

- 이월사유 : 야주개홀 무대장치의 구동부(모터, 감속기)가 수입물품으로,

제작, 통관, 설치, 시운전 등에 소요되는 기간이 예상보다

증가(26일→85일)하여 사고

나. 납품기한 변경내역

계약건명	계약업체	계약금액	납품기한 연기
			당 초	변 경
야주개홀 무대장치 구매 설치	㈜터보이엔지	125,111,200원	`16.12.5~ `16.12.31	`16.12.5~ `17.2.28

붙임  1) 야주개홀 무대장치 구매설치 사고이월자료 1부.

2) 납품기한 연기사유서 1부.

3) 합의각서 1부.  끝

	시설과장
주무관			시설과장
협조자
시행	시설과-6798	(		)	접수		(		)
우	03177	서울특별시 종로구 새문안로 55	/	www.museum.seoul.kr
전화		/전송	724-0244	/		/	대시민공개