옥상녹화 텃밭 조성사업

(중부공원녹지사업소)

□ 사업개요

◦위치 : 2개소 옥상(서울독립문초등학교, 서울시의원회관)

◦규모 : 총294㎡(서울독립문초등학교 229㎡, 서울시의원회관 65㎡)

◦기간 : 2015.12.21 ～ 2016.03.30 (15.12월말 현재 공정율 0%)

◦총사업비 : 100백만원

□ 사고이월 요구 세부내역

◦이월내역

- 예산과목 : 시민참여녹지조성, 옥상녹화텃밭조성, 시설비및부대비, 시설비

- 이월세부내역

(단위 : 원)

구 분		예산현액(A) '14이월비 제외	(재)배정액 (B)	원인행위액 (C)	지 출 액 (D)	사 고 이 월 액(E) (원인행위미필액)	집행잔액 (A-(D+E))
계		416,123,000	416,123,000	380,896,630	286,366,130	88,962,500	40,794,370
공 사 비		393,215,000	393,215,000	359,071,630	264,541,130	88,962,500	39,711,370
	도 급 비			352,541,570	263,585,000	83,388,570
	관 급 비			6,530,060	956,130	5,573,930
보 상 비
이전비․기타 (용역비)		22,908,000	22,908,000	21,825,000	21,825,000		1,083,000

※ 용역 및 물품 구매인 경우에도 상기 서식에 준하여 작성(구분란에 용역비, 자산취득비, 일반운영비 등 기재)

◦이월사유(구체적으로 기재)

-  본 사업 대상지는 하반기 사업 결정되어 2015.09.09일 예산이 재배정되었으며, 옥상녹화 공사 시행을 위한 제반절차(구조안전진단용역 및 설계용역, 수요 기관 의견 수렴, 설계 심의 등)에 오랜 기간이 소요되어 공사 발주가 2015.12.09일 이루어짐에 따라 연내 공사가 불가한 실정이므로 사고이월하고자 함.

첨부  <서식1> 작성요령에서 명시한 제출서류 각1부(해당시).  끝.