사고이월 명세서

재 무  과 장  김 병 인 (인)

사업주관과장  이 종 한 (인)

작   성   자  이 진 휘 (인)

□ 사 업 명 : 국사봉 까치생태 놀이터 조성공사

□ 사업 개요

◦ 사업기간 : ’16. 9. 30. ~ ’17. 4. 17.(’16. 12월말 현재 공정률:80%)

◦ 사업규모 : 1,900㎡

◦ 사업내용 : 오르막 놀이대 및 미끄럼틀 설치, 흙・모래놀이터 조성, 산림수종 식재 등

□ 이월요구 세부내역

◦ 이월사유 : 국(환경부)・시(푸른도시국) 매칭사업으로 국비를 8월에 배정받아 동절기 공사가 불가피하게 됨에 따라, 다음해로 사고이월하여 공사품질을 향상코자 함

◦ 이월내역

∙ 예산과목

- 정책사업 : 산림보호육성  - 단위사업 : 임야보호관리

- 세부사업 : 생태놀이터조성사업  - 편성목(통계목) : 시설비 및 부대비(시설비)

∙ 예산내역

(단위 : 원)

배정일자	구 분	예 산 액	배 정 액	지출원인행위액	지 출 액	사고이월액
	계	374,000,000	374,000,000	370,839,410	207,157,170	163,682,240 (국:53,889,073) (시:109,793,167)
’16.02.24	용 역 비	21,417,000	21,417,000	20,300,000	20,300,000	0
’16.04.12	측 량 비	3,384,000	3,384,000	3,383,600	3,383,600	0
’16.08.05	공 사 비	349,199,000	349,199,000	347,155,810	183,473,570	163,682,240

<서식4>

2016 회계연도 사고이월 요구서

기획예산과장 : 이 정 현 (인)

재 무 과 장 : 김 병 인 (인)

사업주관과장 : 이 종 한 (인)

작   성   자 : 이 진 휘 (인)

예 산 과 목				사업명	2016년 예산액	지출원인행위액 (‘16. 12. 31. 기준)		지 출 액 (‘16. 12. 31. 기준)		불용액	2016년 이월액			준 공 예정일	이 월 사 유	예산편성 (당초/추경 /간주)
정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성목 (통계목)			월일	금액	월일	금액		계	보조금 구분	구비
산림 보호 육성	임야 보호 관리	생태놀이터조성사업	시설비	국사봉 까치생태놀이터 조성공사	374,000,000	’16. 3.13. ~ 12.27.	370,839,410	’16. 4.22. ~ 12.30.	207,157,170	3,160,590	163,682,240	163,682,240	-	’17. 4.17	동절기 공사시 공사품질 저하우려가 있어 내년으로 이월하여 공사 품질을 향상코자 함	간주