<서식 3>

세부사업명

(예산편성부서명/재배정부서명)

□ 사업개요

◦위치 :

◦규모 :

◦기간 : 착공일 ～ 준공예정일 (15.2월말 현재 공정율)

◦총사업비 :

□ 사고이월 요구 세부내역

◦이월내역

- 예산과목 : 단위사업, 세부사업, 편성목, 통계목

- 이월세부내역

(단위 : 원)

구 분		예산현액(A) '13이월비 제외	(재)배정액 (B)	원인행위액 (C)	지 출 액 (D)	사 고 이 월 액(E) (원인행위미필액)	집행잔액 (A-(D+E))
계						( )
공 사 비						( )
	도 급 비					( )
	관 급 비					( )
보 상 비						( )
이전비․기타						( )

※ 용역 및 물품 구매인 경우에도 상기 서식에 준하여 작성(구분란에 용역비, 자산취득비, 일반운영비 등 기재)

◦이월사유(구체적으로 기재)

-10월에 공사 발주한 경우 10월전까지 추진상황(지연된 사유) 등을 구체적으로 기재

-1분기에 공사 등을 발주하였으나 사고이월 요구시 그 이유를 구체적으로 기재

예) 사전절차(설명회, 토지보상, 민원처리) 등으로 착공 지연

첨부  <서식1> 작성요령에서 명시한 제출서류 각1부(해당시).  끝.

(1) 예산현액(①)은 ′14년 최종 예산현액(’13회계연도 이월사업비는 제외)으로 작성하고 포괄사업의 경우 개별사업건별로 배정(재배정)받은 예산액을 기재
(※ 작성시 금액은 “원”단위)

(2) 지출원인행위액(③) 및 지출액(④)은 반드시 관련 회계장부 및 e-호조시스템 등을 참고하여 정확히 일치하게 기재하고 지출원인행위부, 지출부 제출

(3) 지출원인행위 미필의 사고이월액(부대경비)도 사고이월 명세서와, 근거서류(산출조서 등) 첨부하여 제출

(불용액⑥ = 예산현액① - 지출액④ - 이월액⑤)

(4) 사업 건별 계약서(변경계약서 포함), 준공연기 관련 방침 등 첨부

(5) 보상비는 감정평가서, 지번별 평가액 조서 및 계약서, 수용재결서 통보서 등 보상추진과 관련한 근거서류 첨부

※ 여기서 감정평가는 토지주, 관공서 2자가 결정한 감정평가 가격을 의미함, 일부의 경우 관공서 1인이 실시한 감정평가서를 근거로 제출하여 나중에 토지주가 동의하지 않아 전액 불용될 소지가 있음

(6) 세부사업(포괄사업) 중 자치구나 사업소로 재배정되는 사업은 재배정 사업명을 표시하여 개별 건으로 사고이월 요구서 작성(예 : 교통, 공원, 도로 등 관련사업)

※ 재배정사업의 경우 불용액은 재배정액(②) 기준으로 작성

(7) 사고이월요구서 이월사유 입력코드

원 인 별	유 형 별	시 기 별
1 : 공사추진중 장애발생 2 : 보상협의지연 3 : 사전절차 지연 4 : 유관사업지연 5 : 사업계획변경 6 : 관급 및 외자재 구매지연 7 : 기타	1 : 시설공사(보상포함) 2 : 순수보상 3 : 물품구매 4 : 용역 등	1 : 1분기 발주 2 : 2분기 발주 3 : 3분기 발주 4-1 : 10월 발주 4-2 : 11월 발주 4-3 : 12월 발주

※ 기타(코드 : 7)의 경우 사고이월 사업별 명세서(서식2)에 사유를 자세히 기술