사고이월 자체심사 결과

( 서울역사박물관)

□ 사고이월 요구

(단위 : 백만원)

구 분		최종예산	지출원인 행 위 액	지출액	사고이월액			집행율
					계	원인행위 필	미필
'12 이월액		260	237	76	160	160	-	29.2%
'13 이월	요 구	1,174	1,004	410	594	594	-	34.9%
	승인안
'12대비 증감					▲434	▲434	-

□ 주요사업별 사고이월 내역	1건  594백만원

(2012년 1건  160백만원)

◦ 한양도성전시관 전시설계 및 전시물 제작 설치 공사

- 사무관리비 :  10백만원

- 시 설 비 : 584백만원

□ '12년 대비 증․감사유

◦’12년의 경우, ‘박물관 교육시설 확충 및 재배치 사업’에서 교육 시설 확충 대상지의 사용허가기간 만료 후에도 반환 거부로 소송이 진행되어 '13년으로 불가피하게 이월(160백만원)·집행하였음

◦’13년의 경우,  ’13. 5월 입찰공고 후 7월 용역계약 발주·전시설계를 진행하였으나,  8월~9월 상설전시관 전시설계 후 기존 건물의 용도변경 및 외부 출입구 시설 설치에 따른 문화재청 문화재위원회 사적분과 심의, 종로구청 건축심의 등 사전절차의 지연으로 인한 불가피한 사고이월임

□ 심사결과 주요 조정내역

(단위 : 백만원)

사 업 명	요 구 액	조정사유
한양도성전시관 전시설계 및 전시물 제작 설치 공사	594	사전절차(문화재청 문화재위원회 사적분과 심의, 종로구청 건축심의 등) 지연으로 인한 사고이월

□ 사고이월 감소를 위한 개선대책

◦ 사업계획 수립단계부터 충분한 검토를 통해 사업추진의 사전절차 및 문제점 등을 사전에 면밀히 파악하여 사고이월 미연에 방지

첨부  1. 사고이월 요구서(엑셀서식) 1 부

2. 사고이월 사업별 명세서 1 부.  끝.