사당천(이수역 ~ 방배펌프장) 단면확장

과 업 내 용 서

2018. 1.

서울특별시

(하천관리과)

목      차

1.0 일반사항	1

1.1 과업의 명칭	1

1.2 과업의 목적	1

1.3 과업의 개요	1

1.4 주요업무의 사전승인	1

1.5 과업수행 및 공정보고	2

1.6 용역감독 등	4

1.7 계약상대자의 책임	5

1.8 관계기관 협의 및 인․허가	5

1.9 설계자문 등	6

1.10 건설기술심의위원회 심의 등	6

1.11 설계의 경제성 등 검토(설계 VE)	7

1.12 신기술․신공법의 도입 등	7

1.13 보안 및 비밀유지	8

1.14 타 계약상대자와의 업무한계	8

1.15 하도급 사항	8

1.16 과업내용 변경	9

1.17 용역수행자의 교체	9

1.18 용어의 해석	9

1.19 설계 등 손해배상	10

1.20 계약상대자의 시정요청	10

1.21 용역성과품의 품질관리	10

1.22 발주기관의 제공자료	10

1.23 적용기준 및 시방서	11

1.24 준수사항 및 설계 시 고려되어야 할 사항	11

2.0 자료수집 및 조사	14

2.1 기본방침	14

2.2 관련자료 조사	14

2.3 현지답사 및 현장조사	15

2.4 수리‧수문조사 및 분석	15

2.5 지장물 조사	15

2.6 측량	15

2.7 지반조사 및 토질시험	17

2.8 관로 현황조사	21

2.9 동일 또는 유사 공종의 건설공사 사후평가 조사	21

2.10 용지조사	22

2.11 위험공종 목록화하여 안전사고 예방	22

2.12 설계에 적용된 현장 조사결과 목록화	22

3.0 기본 및 실시설계	23

3.1 일반사항	23

3.2 기본 및 실시설계	23

3.3 설계기준 설정	25

3.4 포장 및 보도설계	25

3.5 지장물이설 설계	26

3.6 가시설 설계	27

3.7 계측계획	28

3.8 교통처리계획 수립	28

3.9 사후평가	29

3.10 시공 및 유지관리계획	29

4.0 성과품 작성 및 납품	29

4.1 일반사항	29

4.2 성과품의 구성 및 내용	30

4.3 성과품 납품	37

※ 위치도	39

1.0 일반사항

1.1 과업의 명칭

본 과업의 명칭은 『사당천(이수역~방배펌프장) 단면확장 기본 및 실시설계 용역』이라 하며 서울특별시 하천관리과를 ‘발주기관’이라 하고 용역사를 ‘계약상대자’라 한다.

1.2 과업의 목적

본 과업은 사당역 일대(동작구 및 서초구)의 침수를 저감시키기 위해 사당천 이수역 ~ 방배펌프장 구간에 암거를 신설함으로써 사당천의 통수능을 증가시키는데 그 목적이 있다.

1.3 과업의 개요

1) 과업의 위치 : 사당천 이수역 ~ 방배펌프장 구간 약 570m

2) 과업의 규모 및 내용

○ 현장조사 및 측량

- 노선측량 610m,(단면확장 구간 570m + 상,하류 각20m)

- 육안조사 1,830m(노선측량*3련박스)

- 지하매설물조사(굴착조사 4개소, GPR 조사 17개소)

○ 지반조사 : 6공

○ 기본 및 실시설계

- 암거신설 □2.0m×5.0m, L=570m

- 연결관로 및 맨홀 1식

3) 과업기간

(1) 본 과업기간은 착수일로부터 180일로 한다.(공휴일 등 휴지일수 포함)

(2) 과업의 추진은 합리적인 공정계획에 의하여 차질 없이 수행하여야 하며, 다음의 경우에는 발주기관의 승인을 얻어 과업기간을 변경할 수 있다.

① 천재지변으로 과업수행에 차질이 있을 때

② 발주기관의 계획변경에 따라 본 과업의 중단 또는 과업내용의 현저한 변경이나 증감이 있을 때

③ 당초 과업수행에서 예기치 못한 사항의 발생으로 변경이 불가피하게 될 때

④ 기타 통념상 인정되는 부득이한 사유가 발생 되었을 때

1.4 주요업무의 사전승인

계약상대자는 다음사항에 대해서는 사전에 발주기관과 협의하여 과업을 수행하여야 한다.

1) 과업수행계획서 및 착수신고서의 내용 변경

2) 관계기관과의 협의사항

3) 용역 수행자의 교체

4) 설계기준의 설정 또는 변경

5) 하도급 사항

6) 공공측량 계획

7) 기타 발주기관의 지시나 계약상대자의 판단에 따라 승인 받아야 할 사항

1.5 과업수행 및 공정보고

1.5.1 과업수행방법

1) 계약과업내용서와 관계법령 및 제 규정 등에 따라 발주기관의 지휘감독을 받아 본 과업을 성실히 이행하여야 한다.

2) 용역수행처리절차는 본 과업내용서에 따르고, 과업내용서에 명시하지 않은 사항에 대해서는 발주기관과 사전협의하여 처리함으로써 내실 있는 설계가 되도록 하여야 한다.

3) 공정계획에 의한 과업수행 중 중요 결정사항 등은 수시로 협의하여 공정추진에 지장이 발생하지 않도록 하여야 한다.

4) 공정부진 및 설계품질 저하 우려 시 계약상대자는 본 과업의 목적을 달성할 수 있도록 인력 및 기술적 대책 등을 제시하고 추진하여야 한다.

1.5.2 착수신고서 제출

1) 계약상대자는 계약일로부터 7일 이내에 계약문서에 정하는 바에 따라 기술용역을 착수하여야 하며 착수 시 관계 법령에서 정한 서류 및 다음 각 호의 사항이 포함된 착수신고서를 발주기관에 제출하여야 한다.

(1) 착수신고서

① 착수보고서(설계공모, 기본설계 등의 시행 및 설계의 경제성 등 검토에 관한 지침 별지 제1호 서식)

② 기술용역 예정공정표

③ 사업책임기술자 선임계(이력서, 기술자격증 사본 첨부)

④ 도급내역서

⑤ 건설기술용역 실적관리 시스템의 정보입력 결과

(2) 분야별 참여기술자 및 장비 투입계획서

(3) 용역수행에 필요한 다음 서류

① 내국 기술자인 경우는 기술자 자격수첩 사본 및 건설기술인협회 등 공인기관의 경력증명서

② 외국기술자인 경우는 졸업증명서, 경력확인서 등 학력, 경력사항을 확인할 수 있는 서류

(4) 기타 계약담당공무원 또는 법령이나 용역과업에서 제출하도록 한 사항

(5) 계약상대자는 건설기술진흥법 제30조에 따라 건설기술용역 실적관리 시스템에 해당 용역의 정보를 입력한다. 그리고 동법 시행규칙 제27조(별지27호 서식)에 의거 설계 등 용역업자의 현황통보 및 관리를 위한 자료(전산파일)를 발주기관에 제출한다.

1.5.3 과업수행계획서 제출

1) 과업수행계획서는 계약체결 후 14일 이내에 과업의 특성 및 현장여건을 감안한 과업수행계획서(공동수급일 경우 공동수급인 상호간의 과업분할협의서 첨부)를 제출하여 발주기관의 승인을 받아야 하며, 이에 포함될 내용은 다음과 같다.

(1) 세부공정계획서

(2) 과업의 단계별 성과품 제출계획서

(3) 과업수행조직 및 분야별 참여 인력(장비) 투입계획서

(4) 건설기술 경력사항 확인서

(5) 참여기술자 인적사항, 참여하고 있는 과업내용 및 예상기간

(6) 참여기술자의 보안대책 및 보안각서

1.5.4 업무협의 및 공정보고

1) 보고시기

(1) 조사 및 자료수집 완료 시

(2) 용역착수, 중간단계, 마무리단계 검토 시

(3) 설계심의 또는 자문회의 시

(4) 성과품 작성 시

(5) 준공 시

(6) 공정보고 시

(7) 주간 업무협의, 월간 정기 공정보고 시

(8) 기타 발주기관의 요청이 있는 경우

2) 월간 정기 공정보고

계약상대자는 과업수행기간 중 다음 사항을 포함한 월간공정보고서를 매월 말일을 기준으로 하여 다음달 5일까지 발주기관에 제출하여야 한다.

(1) 과업추진 내용 및 공정 현황

(2) 관련기관(부서) 업무협의 등 추진사항

(3) 업무관련 회의 및 발주기관 지시사항 처리결과 (승인사항 포함)

(4) 과업 수행상 중요 문제점 및 대책

(5) 참여기술자 현황

(6) 다음 달 과업수행 계획

3) 중간보고

설계용역 시행과정에서 담당공무원 및 용역 참여기술자간 합동회의를 주기적으로 추진하고 계약상대자는 발주기관의 요구가 있거나 다음 각각의 경우 관련자료를 제출하고 분야별 책임기술자로 하여금 설명토록 하여야 하며, 발주기관의 지시사항(구두 및 서면지시 포함)을 성실히 수행하고 조치결과를 서면으로 제출하여야 한다.

(1) 주요 단계별 과업이 종료 되었을 때

(2) 분기 1회 이상의 중간보고 시

(3) 주요계획 및 방침의 설정과 변경 시

(4) 주요민원 발생시

4) 작업일지 작성

계약상대자는 착수와 동시에 작업일지를 작성하여 과업수행 완료시 제출하여야 하며 작업일지 양식은 서울특별시 설계용역관리 편람에 수록된 양식으로 한다.

5) 참여기술자 투입일수 기록(Time Sheets) 제출

계약상대자는 참여기술자의 투입일수에 대한 개인별기록을 월간 단위로 작성하여 월간공정보고시 제출하되 과업 착수후 3개월이 지난 후 10일 이내에 투입기록을 제출하여야 한다.

참여기술자별 투입기록(  월)

성      명 :       인

책임기술자 :       인

월/일	투입시간	휴일(야간) 근무시간	수행업무	비 고
1/1
.
1/31

6) 발주기관 지시사항 검토

(1) 계약상대자는 발주기관의 요구가 있을 경우 각종 검토회의 등을 통하여 기술자문 및 검토를 받아야 한다.

(2) 계약상대자는 발주기관의 요구가 있거나 주요 공정을 선정 또는 완료하기 이전에 관련 자료를 제출하고 담당분야별 책임 또는 관련 기술자로 하여금 설명토록 하여야 하며, 지적 및 보완사항에 대하여는 발주기관의 의견을 수렴한 후에 조치결과를 서면으로 제출하여야 한다.

1.6 용역감독 등

1) 용역감독

발주기관은 과업을 시행함에 있어 수시로 계약상대자에 대하여 다음의 계약관련 업무 내용을 확인․감독할 권한을 가지며, 계약상대자는 이에 적극 협조하여야 한다.

(1) 기술인력 동원 현황

(2) 용역 단계별 과업추진 내용 및 공정현황

(3) 기타 확인에 필요한 사항

2) 용역점검

(1) 계약상대자는 발주기관이 설계품질 확인과 용역업무의 적정 수행여부 확인에 적극 협조

(2) 정기점검과 수시점검을 실시 할 수 있으며 발주기관으로부터 지적받은 내용 및 요구내용에 대하여 계약 상대자는 과업범위를 벗어나지 않는 한 모두 반영하여야 한다.

(3) 용역점검자는 제출된 추진계획에 대비하여 공정이 지연될 때는 계약상대자로 하여금 부진공정 만회대책을 작성 제출토록 하고, 필요시 부실벌점 부과 등의 조치를 취한다.

1.7 계약상대자의 책임

1) 계약상대자의 책임범위

계약상대자는 발주기관의 승인을 받아 작성한 도서라 할지라도, 계약상대자의 과오나 오류 등으로 과업 수행 상 발생한 모든 하자에 대하여 계약상대자의 책임이 면제되는 것은 아니며, 용역 준공 후라 할지라도 설계과오나 오류 등이 있어 이에 대한 발주기관의 수정, 보완 요구가 있을 때에는 타당한 범위 내에서 계약상대자 부담으로 시정․조치하여야 한다.

2) 문서의 기록비치

계약상대자는 과업의 수행 중에 관계기관과의 협의사항, 발주기관의 지시 및 조치사항 등 과업추진에 따른 주요 사항을 문서로 작성․비치하여야 하며, 발주기관의 제출요구가 있을 경우에는 이에 따라야 한다.

3) 안전관리의 의무

계약상대자는 관계법규에 따라 안전수칙을 준수하는 등 안전관리에 최선을 다하여야 하며 계약상대자의 과실이나 부주의로 인하여 발생하는 사고 및 손해에 대하여 책임을 져야 한다.

4) 법률준수의 의무

계약상대자는 이 과업을 수행함에 있어 관계 법률에 저촉되는 행위로 인한 모든 피해사항에 대하여 책임을 져야 한다.

1.8 관계기관 협의 및 인 ․ 허가

1) 계약상대자는 본 과업과 관련하여 다음과 같은 관련부서의 인 ․ 허가에 필요한 서류를 작성 제출하여야 한다.

항 목	수 량	관련기관	비 고
도로점용허가 신청서류	1 식	관련구청
공사 중 교통처리에 관한 사항	"	교통운영과, 서울지방경찰청
기타 인․허가에 필요한 부수되는 서류	"	해당부서

2) 계약상대자는 과업과 관련하여 관계기관 협의 및 인 ․ 허가에 필요한 자료를 설계공정 진행에 따라 필요한 시기에 작성 제출하여야 하며(인․허가 및 협의 주체는 발주기관) 제출된 자료에 대하여는 계약상대자가 책임진다.

3) 계약상대자는 본 과업 중 관련기관과 사전협의 및 설명이 필요한 경우에는 성실히 협조하여야 한다.

1.9 설계자문

1) 계약상대자는 발주기관으로부터 설계자문의 시기, 내용 등에 대한 계획이 통보되면 설계자문이 효율적으로 시행될 수 있도록 자료를 제출하여야 한다.

① 기본설계 완료단계

② 실시설계 완료단계

③ 설계방향 결정이 필요한 경우 또는 설계내용 주요사항이 변경될 경우

④ 기타 발주기관이 필요하다고 인정하는 경우

2) 발주기관은 설계자문 시기, 내용 등 설계자문 등 계획을 설계자문 등 시행 14일 전까지 계약상대자에게 통보하여야 하며, 계약상대자는 효율적인 설계자문이 될 수 있도록 발주기관에 자문시행 7일 전까지 설계자문을 위한 자료를 제출하여야 한다.

3) 계약상대자는 설계자문 시 지적사항에 대하여 면밀히 분석․검토하여 발주기관에 조치계획을 보고하며 특별한 사유가 없는 한 설계에 반영하여야 한다.

1.10 건설기술심의위원회 심의 등

1) 심의시기

건설기술심의위원회 설계심의는 과업의 난이도와 소요공사비 등을 고려하여 관련 지침에 따라 시행토록 한다.

2) 심의준비

계약상대자는 발주기관으로부터 설계심의 등에 대한 계획이 통보되면 심의에 필요한 자료를 작성 제출하여야 한다.

3) 심의결과 반영

계약 상대자는 설계심의 시 지적사항에 대하여 면밀히 분석‧검토하여 발주기관에게 조치내용을 보고하여야 하며 특별한 사유가 없는 한 설계에 반영하여야 한다.

1.11 설계의 경제성 등 검토(설계VE)

1) 계약상대자는 관련지침에 따라 설계의 경제성 심의자료를 작성하여 발주기관 사전 검토를 받은 후 실시할 수 있도록 하여야 한다.

2) 계약상대자는 다음 각 호의 자료를 설계의 경제성 등 검토 실시 최소 10일 전에 검토조직에 제시하고 설계의 경제성 등 검토업무 진행 과정에서 추가로 요구되는 자료가 있을 경우 이에 적극 협력하여야 한다.

① 설계도

② 주요 설계기준

③ 설계도서

④ 사업내역서, 공사비산출서

⑤ 각종계산서

⑥ 기타 필요하다고 인정하여 요구하는 자료

3) 계약상대자는 설계의 경제성 등 검토결과 승인된 VE 제안에 대한 조치계획서를 작성하여 발주기관에 제출하고, 설계내용에 수정․반영 및 그 결과를 보고서에 수록하여야 한다.

1.12 신기술 ․ 신공법의 도입 등

1) 계약상대자는 건설기술진흥법 시행규칙 제40조 따라 신기술과 기존 공법에 대하여 시공성, 경제성, 안전성, 유지관리성, 환경성 등을 종합적으로 비교·분석하여 해당 건설공사에 적용할 수 있는지를 검토해야 한다.(환경 신기술 등 타법에 의해 지정된 신기술도 필요시 설계 반영 여부 검토)

2) 신기술을 반영하는 경우에는 건설기술심의위원회 심의(공사비가 100억원 이상)나 건설신기술 활용심의위원회 심의 또는 자문(공사비가 100억원 미만)을 받아야 한다.

3) 신기술 등 특정공법 적용시에는 자체공법선정위원회를 구성하여 공법을 선정하고 건설기술심의위원회 심의나 건설신기술활용심의위원회 심의 또는 자문을 받는 방안을 검토하여야 한다.

4) 신기술 등 특정공법을 적용하기로 결정한 경우에는 목록표 작성과 해당 도면에 공법 명칭을 명기하여야 한다.

5) 공법 선정시 관련 신기술이 있음에도 불구하고 기타의 유사 또는 기존 기술을 반영하고자 하는 때는 서울특별시 건설신기술 활용촉진에 관한 조례 제10조에 따라 발주기관의 자체공법선정위원회의 의결을 거쳐야 하며, 그 사유를 시장이 정한 양식에 따라 설계보고서에 기록하여야 한다.

1.13 보안 및 비밀유지

1) 보안관계 법규의 준수

계약상대자는 정부 또는 발주기관에게 필요한 보안관계 법규 등에 저촉되는 일이 없도록 세심한 주의와 의무를 다하여야 하며 이의 불이행으로 인한 모든 책임은 계약상대자가 져야한다.

2) 과업성과품 발간 시 유의사항

계약상대자는 중간 및 최종보고서 등 과업성과물을 용역감독자와 협의하여 내용의 중요도에 따라 대외비로 분류, 관리하여야 하고 대외비로 분류되는 자료의 발간 시는 발주기관과 협의하여 발간한다.

3) 보안관리의 책임

계약상대자는 관계법규에 의해 보안관리에 최선을 다하여야 하며 계약상대자의 과실이나 부주의로 인하여 발생한 손해에 대해서 책임을 져야 한다.

1.14 타 계약상대자와의 업무한계

본 과업을 수행함에 있어 다수의 공동계약에 의거 과업을 수행할 때는 계약상대자 상호간에 과업분할 협의서를 작성, 수정 하여야 한다.

1.15 하도급 사항

1) 건설기술용역의 하도급 계약과 관련하여 관계법령이나 계약서 등에 특별히 정한 경우를 제외하고는 건설기술용역 하도급 관리지침에 따른다.

2) 계약상대자는 건설기술진흥법 시행규칙 제31조에 따라 하도급 승인을 받기 위해서는 동법 시행규칙 별지 제32호서식의 하도급 계약승인신청서를 발주기관에 제출하여야 한다.

3) 발주기관은 건설기술용역 하도급 관리지침에 따라 하도급 계약의 적정성 여부를 검토하여 7일 이내에 그 승인 여부를 계약상대자에게 알려야 한다. 다만, 하도급 적정성 판단에 상당한 시일이 요구되는 등 불가피한 사유가 있는 경우에는 1회에 한해 통지기간을 연장할 수 있으며, 통지기간을 연장한 경우에는 그 사유와 7일 이내의 통지예정 기한을 정하여 지체없이 계약상대자에게 알려야 한다.

4) 계약상대자는 하도급 부분에 대하여 발주기관으로부터 선급금, 기성금 및 준공금을 지급 받았을때에는 그 대금을 받은날로부터 15일 이내에 하수급인에게 해당부분에 대한 대금을 지급하여야 한다.(하도급거래 공정화에 관한 법률 제6조 및 제13조3항)

5) 하도급으로 시행한 당해 용역성과에 대하여 전적으로 계약상대자의 책임으로 한다.

1.16 과업내용 변경

1) 과업 내용 변경사항이 발생하였을 경우, 발주기관은 행정안전부 예규 제21호(2018. 1. 10.) 『지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준』 제 14장 용역계약 일반조건에 따른다.

2) 계약상대자는 설계용역수행 중에 주요 설계과업내용에 대한 변경 없이 경미한 변경사항이 발생한 경우에는 변경사항 등에 대한 타당성여부를 면밀히 검토하여 타당한 경우, 변경으로 인한 전체 용역비의 증감이 균형을 이루는 범위 내에서 발주기관의 지시를 받아 우선 과업을 변경하여야 한다.

3) 다만, 주요 설계과업의 변경이 필요한 경우에는 그 사유와 의견을 첨부하여 발주기관의 장에게 서면 보고하여 승인을 얻은 후 변경하여야 하며, 설계변경에 필요한 내역서 등 관련자료를 발주기관에 제출하여야 한다.

4) 계약상대자는 다음 항목에 해당하는 때에는 발주기관과 협의하여 변경을 요구할 수 있다.

(1) 과업업무량 조정으로 참여기술자의 증감이나 등급변경이 있을 때

(2) 계약내용에 따른 이행수량에 의한 정산 변경 시

(3) 민원발생에 의해 과업수행이 지연 또는 불가능할 때

(4) 천재지변, 전쟁, 내란 등 불가항력 사태의 발생으로 업무수행이 불가능할 때

(5) 관계기관과의 협의, 발주기관의 계획이 변경된 때

(6) 지층상태가 불규칙하여 변경이 불가피할 때

1.17 용역수행자의 교체

1) 과업에 참여하는 기술자는 충분한 학력, 경험 및 자격을 갖추어야 하며, 발주기관에서 과업수행에 부적합하다고 판단한 기술자에 대해서 발주기관으로부터 교체요구가 있는 경우 계약상대자는 정당한 사유가 없는 한 즉시 교체하여야 한다.

2) 과업에 참여하는 기술자가 퇴직 혹은 기타, 다른 사유로 과업을 수행할 수 없을 때에는 그와 동등이상의 등급․경력을 갖춘 기술자로 발주기관의 승인을 받아 교체하여야 한다.

3) 과업의 수행을 위하여 투입된 기술자는 과업 기간 중에 계약상대자가 임의로 교체할 수 없으며, 교체가 불가피한 경우에는 발주기관의 사전 동의를 받아야 하고, 본 과업수행에 참여하는 기술자의 투입지연에 따른 모든 손해의 책임은 계약상대자에게 있다.

1.18 용어의 해석

1) 과업내용서상의 용어해석에 차이가  있을 경우에는 발주기관과 계약상대자가 상호 협의하여 결정하여야 한다.

2) 과업성과품에 사용하는 용어, 맞춤법, 문장구성, 표현방법 등은 발주기관과 계약상대자간에 해석상 분쟁이 야기되지 않도록 알기 쉽게 정확히 정의한 후 사용하여야 한다.

1.19 설계 등 손해배상

계약상대자는 설계 등 용역계약을 이행함에 있어 고의 또는 과실로 당해 용역 목적물 또는 제3자에게 재산상의 손해를 발생하게 한 경우 이를 배상하여야 하며, 계약상대자는 보험 또는 공제에 가입하고, 당해 용역을 완료하기 전에 보험증서 또는 공제증서를 발주기관에 제출하여야 한다.

1.20 계약상대자의 시정요청

계약상대자는 발주기관 주관부서 업무담당자(이하 용역감독자)가 다음의 각 호의 1에 해당하는 경우 서면으로 발주기관의 장에게 이의 시정을 요청할 수 있다.

1) 용역감독자가 설계과업 범위 이외의 부당한 업무를 지시할 때

2) 용역감독자가 정당한 사유 없이 건설기술자의 교체를 요구할 때

3) 용역감독자가 정당한 사유 없이 용역 업무를 지연시킬 때

1.21 용역 성과품의 품질관리

1) 설계의 실명화를 통한 설계도서의 품질관리를 위해 최종 용역보고서 및 설계도면에 각 시행과정에 참여한 관계 공무원 및 용역기관의 담당자(설계 등 용역에서 도서를 작성하거나 공사비를 산정한 자 등을 포함)에 대하여 각 참여자별 참여기간, 수행업무 등을 기재하여야 하며, 당사자로 하여금 이를 확인 후 날인하도록 하여야 한다. (건설기술진흥법 제48조 제5항, 시행규칙43조, 본 과업내용서의 별표2 참조)

2) 참여기술자의 명단은 “설계공모, 기본설계 등의 시행 및 설계의 경제성 등 검토에 관한 지침” 별지 제5호 서식에 의거 작성하되, 주민등록번호 뒷자리는 **로 암호화 처리하여야 한다(보고서도 동일)

1.22 발주기관의 제공자료

1) 본 과업수행을 위해 계약 후 발주기관이 제공할 자료는 다음과 같다.

(1) 사업예정지 주변지역 수치지형도 또는 수치지도 1부

(2) 사업예정지 주변 하수관망도 및 내부조사 자료 1부

(3) 본 과업관련 보고서 및 수리분석자료 1부

- 대동천 등 7개 하천정비기본계획

- 사당천 복원 타당성 조사

- 사당역 일대 배수개선대책 기본설계

(4) 기타 필요자료 1식

2) 상기 자료는 설계 참고용으로 제공된 것으로 계약상대자는 그 내용의 오류, 정확성을 확인하되, 오류가 발생한 경우 발주기관에 보고하여 확인 후 사용하여야 하며, 본 과업 이외의 목적으로 사용할 수 없다.

3) 상기 제공 자료는 성과품 제출 시 반납한다.

1.23 적용기준 및 시방서

1) 본 설계용역에 적용하는 다음의 설계기준 및 시방서는 최신의 것이어야 하며, 관련 기준이 개정된 경우 용역완료일까지 수정된 최신 기준을 적용하고 특별히 규정되지 않은 사항은 발주기관과 협의․적용하여 수행한다.

(1) 국토교통부 및 관련 학회 각종 표준시방서, 설계기준 및 설계지침서

(2) 한국산업규격(KS)

(3) 서울시 각종 설계 및 시공편람

- 전문시방서, 지반조사 편람, 시설물 설계 및 시공편람

(4) 관련법령

- 하천법, 하수도법, 도로의 구조․시설기준에 관한 규칙, 도시·군계획시설의 결정·구조 및 설치기준에 관한 규칙, 지진재해대책법

(4) 관련설계 기준

- 하천설계기준, 하수도설계기준, 하천시설물표준도, 하수도표준도

(5) 시설물 안전관리에 관한 특별법

(6) 건설기술진흥법령 한 품질시험규정

(7) 서울특별시 친환경상품 구매촉진에 관한 조례․시행규칙

(8) 기타 관련 법규

(9) 기타 발주기관이 제공하는 관련자료

2) 통계자료는 공신력 있는 기획재정부, 국토교통부 및 정부기관, 지방자치단체, 기타 한국은행 등 공공기관의 자료를 활용하고 인용된 통계자료는 반드시 출처를 명시한다.

3) 관련법령 및 기준에 대하여 명기한다.

1.24 준수사항 및 설계 시 고려되어야 할 사항

1) 준수사항

(1) 본 과업을 충실하게 수행하기 위하여 계약상대자는 본 과업내용서와 관계법령 및 제규정에 따라 성실히 수행하여야 한다.

(2) 과업수행 중 정책변경 등 불가피한 경우는 본 과업의 일부 또는 전부를 타절하거나 과업내용을 변경할 수 있다.

(3) 본 과업 내용서에 명시되지 않은 사항이라도 발주기관이 과업 수행상 필요로 추가 과업을 요청할 경우에는 그 내용 및 비용 등을 상호 협의하여 결정하며 계약상대자는 이를 성실히 수행하여야 한다.

(4) 본 과업내용서 내용에 대하여 상호 의견을 달리하는 경우 협의에 의하여 결정하되, 협의 불가 시는 지방자치단체 용역계약 일반조건에 따른다.

(5) 계약상대자는 본 과업을 수행하기 위한 과업수행팀을 별도 구성하며, 과업의 내용에 따라 단계별 과업기간을 세분한 과업수행 계획서를 작성 제출하여 효과적인 사업관리가 될 수 있도록 한다.

(6) 발주기관은 다음과 같은 사유로 계약상대자가 과업 수행을 계속하기가 곤란하다고 판단될 때는 해약할 수 있다.

① 과업 수행이 불가능하다고 인정될 때

2) 조사 및 설계 시 고려되어야 할 사항

(1) 설계변경 및 공사비 증액의 최소화

(2) 환경 친화적 건설공사를 위한 공법 및 적용기준 제시

(3) 건설폐자재 활용방안 검토, 제시

(4) 계약상대자는 발주기관이 실시설계에 대한 설계의 경제성 등 검토를 실시하고자 하는 경우 이에 필요한 관련 자료 등을 제공하여야 하며, 설계개념 발표 및 VE제안서에 대한 의견개진 등 설계VE 활동에 적극 협조하여야 한다.

(5) 계약상대자는 설계의 경제성 등 검토결과 승인된 VE제안에 대한 조치계획서를 작성하여 발주기관에 제출하고, 설계내용에 수정․반영 및 그 결과를 보고서에 수록하여야 한다.

(6) 발주기관과 시공자간에 클레임이 발생하지 않도록 설계도서 작성

(7) 공사시방서에 시공상세도면의 목록 제시

(8) 동일 또는 유사공종의 건설공사 사후평가 결과를 조사, 검토하여 본 설계에 반영

(9) 건설공사 사후평가 결과 작성을 위한 실시설계 사후평가표 작성(서울특별시 건설공사 사후평가 수행지침 참고)

(10) 산업안전보건관리비(근로자의 안전관리를 위한 비용)와는 별도로 안전관리비(시설물의 안전관리를 위한 비용) 계상 : 안전관리비를 잠정금액(PS단가)으로 설계내역서에 포함하여 작성

(11) 관계기관과의 충분한 협의를 통한 공사 중 설계변경 요구사항 사전 방지

(12) 동일 또는 유사 공사의 사고사례 조사 및 안전대책 수립 의무화

(13) 설계에 적용 가능한 건설 신기술의 공법 및 적용기준 제시

(14) 우기・동절기 등 공사 중지 기간 및 출퇴근 시간대 공사로 인한 교통체증으로 시민불편 유발 여부 등을 충분히 고려하고 공정관리 전문가 참여하여 적정 공사기간 산정

(15) 본 과업내용서에 명시되지 아니한 사항(설계심의결과 미 반영된 사항, 자치구 및 주민요구사항, 기타)등에 대해서도 발주기관의 지시가 있을 때는 성실히 수행해야 한다.

(16) 건설안전을 고려한 설계(DFS, Design For Safety)

① 설계에서 가정한 시공법 및 절차에 의해 발생하는 위험요소가 회피, 제거, 감소되도록 한다.

② 시공단계에서 설치되는 가설 시설물의 안전한 설치 및 해체를 고려해야 한다.

· 「건설현장 가설구조물시공·관리 개선 방안」기술심사담당관-16298. ‘17.9.19)을 반영하여야 하며 설계심의 시 가설구조물 관련 구조검토서를 첨부하고 부문별 설계변경이 가능하도록 설계도서(물량, 규격, 재료, 공법 등)를 명확히 작성하여야 한다.

③ 깊은 지하 굴착을 최대한 배제하여야 한다.

④ 위험장소에서의 작업을 최소화하기 위해 공장제작 자재의 활용을 적극적으로 고려한다.

⑤ 동일 작업장소에서 시공절차가 충돌되지 않고 안전하게 작업이 이루어지도록 해야 한다.

⑥ 시설물의 유지관리가 용이하도록 개・보수 및 청소를 위한 전용통로, 설비의 설치 및 제거가 용이한 반입구 등이 고려되어야 한다.

⑦ 부서지기 쉬운 자재가 사용되지 않도록 하여야 하며, 석면 및 석면이 함유된 자재가 사용되지 않도록 하여야 한다.

⑧ 해체 및 개・보수 공사 시 기존 구조물이 안전하도록 하여야 한다.

⑨ 지반굴착공사의 시공시기가 장마철, 해빙기와 겹칠 경우에는 이에 대한 안전성검토를 실시하여야 한다.

⑩ 건설공사 중 근로자의 안전확보를 위하여 「산업안전보건법」 제23조부터 제24조까지에서 정하는 내용을 고려해야 한다.

(17) 안전관리문서의 제출

① 설계과정 중에 도출한 건설안전 위험요소(Hazzard) 및 위험성(Risk)에 대한 평가를 실시한 결과로서 HRA(위험요소/위험성/저감대책) 형태로 작성된 설계안전성검토(DFS)보고서

② 설계에 가정된 각종 시공법과 절차에 관한 사항

③ 설계에서 잔존하여 시공단계에서 반드시 고려해야 하는 HRA(위험요소/위험성/저감대책)에 관한 사항

(18) 기존 설계에서 조사한 구간은 기존 자료를 최대한 활용하되, 현장을 확인하여 현황이 맞지 않아 조사가 필요하다고 판단되는 구간은 재조사 실시

(19) 유지관리대상 시설은 유지관리 시설물 목록을 작성하고 실시설계 준공 시 제출하여 하수도 관리 전산시스템에 별도 DB관리되도록 할 것.

(20) 최종 성과품은 하수도 또는 방재시설 관리 전산시스템 보유 데이터 갱신에 활용될 수 있도록 하수도 또는 방재시설 GIS DB 관리부서와 긴밀히 협의하여 설계

(21) 과업의 범위는 관련계획 변경 등 설계 수행과정에서 조정될 수 있다.

(22) 자치구별 품셈적용과 성과품 분리 작성 검토

(23) 설계단계부터 ‘주계약자 공동도급’ 발주 방법 검토

공종과 내역서를 검토하여 분리가능한 공종으로 별도 내역서를 작성하고, 합리적 공종 구분을 위해 CM, 시공전문가 등이 참여하는 자문위원회를 운영하여 ‘주계약자 공동도급’ 발주를 검토

(24) 환경영향 평가를 고려한 설계

(25) 문화재 보호를 고려한 설계

2.0 자료수집 및 조사

2.1 기본방침

1) 현장조사 및 계획수립 시 발주기관의 지역현황을 토대로 기 수립된 도시계획, 하천정비 기본계획, 하수도정비 기본계획변경 등을 검토하여 계획을 수립한다.

2) 모든 계획은 기존 자료를 최대한 이용하여 검토하며 합리적인 계획을 수립한다.

3) 본 과업은 대상지역에 대한 기본계획 검토를 토대로 설계를 수행한다.

4) 지반 및 지하수위 조사를 통하여 관로 하부의 지지력을 확보하여 암거 및 인접건물 침하, 암거경사 불량 등과 같은 문제점을 해소한다.

5) 조사업무 수행 중 과업여건상 과업내용의 변경이 필요할 경우 상호간의 합의에 의해 변경할 수 있다.

6) 서울시 제공 및 기 완료된 용역 결과 자료를 충실히 조사하여 최대한 활용하되 일목요연하게 그 내용을 정리하고, 용역수행을 위해 반드시 보완이 필요하다고 판단되는 경우 해당 자료의 조사를 추가로 지시할 수 있다.

2.2 관련자료 조사

1) 제반사업의 연관성

본 과업과 관련된 제반사업계획을 조사하여 설계의 자료로 활용한다.

2) 도시계획사항 및 토지이용계획

계획구간내의 도시계획 현황과 토지이용 계획 등 관련 사업계획을 조사․검토하여 일관성 있는 계획이 수립될 수 있는 자료를 제공한다.

3) 계약상대자는 본 과업과 관련된 다음 제반계획 및 시설을 검토하여 설계의 자료로 활용한다.

(1) 각종 장기계획(하천정비계획, 하수도정비기본계획, 도시계획 등)

(2) 각종 관련계획(사당역 일대 배수개선대책 기본설계, 사당천 복원 타당성 조사 등)

(3) 기존시설에 관한자료

(4) 지형도 및 주요 지하매설물(상수도, 전기, 통신, 가스 등), 지하철 및 지상구조물 기초형상

(5) 타 기관 및 타 부서 사업계획

(6) 도로대장 등 타 부서 시설물관리대장

(7) 기본계획 이후 설치된 관로 및 관련 시설물에 대한 자료

(8) 토지이용계획, 가로 및 도로계획

(9) 사업지구 내 주변 토질조사 자료

(10) 기타 본 설계와 관련된 자료

(11) 관로매설 관련 지역주민 요구사항 등 민원현황

4) 조치사항

계약상대자는 기존 도시계획시설 변경 또는 신규결정이 필요할 경우 도시계획시설 변경 및 결정고시를 위하여 필요한 자료를 발주기관과 협의하여 작성하여야 한다.

2.3 현지답사 및 현장조사

1) 과업구간에 기존 배수시설물 및 관로의 내부를 면밀히 조사하고 통수단면과 관로종단도에 대하여 사전에 조사 후 계획규모의 홍수량이 통과할 수 있는지 상세히 검토하여 설계에 반영토록 한다

2) 또한, 지형, 지질, 하천 등의 자연 상황과 주변도로, 용지조건 등을 상세히 파악하여 공사용도로, 공사부지, 작업장 등의 확보 가능여부를 판단하여야 한다.

3) 현지답사 시에는 반드시 사진(또는 드론촬영 영상 등)을 찍어 사진첩에 정리하고 계획, 설계 시에 참조하도록 한다.

2.4 수리․ 수문조사 및 분석

1) 침수피해현황 및 사당천에 연결된 하수도 시설물 현황을 상세히 조사하고, 암거신설에 따른 변화 및 하수도시설(관거, 맨홀 등) 신설을 제시한다.

2) 과거 침수피해 발생 일시와 관련된 피해현황, 피해원인, 피해규모에 대하여 조사하여야 하며, 침수 피해 당시 강우발생기록 및 홍수규모 (해당빈도)를 년도 별로 상세히 조사 후 원인분석을 하여 설계에 반영토록 한다

3) 강우시 사당천 수위 및 방배펌프장의 가동률을 조사하고 암거신설과 연계하여 분석한다.

4) 수리‧수문 조사 및 분석을 시행하여 설치암거의 적정단면을 계획하고, 하천기본계획의 변경이 필요시에는 변경을 진행하여야 한다.’

2.5 지장물 조사

1) 조사방법

(1) 발주기관은 지하시설물 통합정보 시스템을 의무적으로 활용하여 대상지 주변 지하 시설물도를 설계용역업체에 기본적으로 제공한다.

(2) 계약상대자는 발주기관에서 제공된 지하 시설물도를 참고하여 계획구간의 각종 지하매설물 및 지장시설물의 저촉여부를 조사하여 누락된 지하시설물이 없도록 유관기관과 협의(협의결과 발주기관 사전보고)한다.

2) 설계적용

(1) 현장조사 결과와 당해 시설물 관리부서의 관리도면 및 서울특별시(공간정보담당관)에서 제작한 수치지형도(S=1:1,000)를 비교․검토하여 맨홀의 위치 등 지장물의 위치를 정확히 측량하고 지장물의 폭(직경), 매설심도를 표시한 지장물도를 작성, 제출하여야 한다.

(2) 지장물중 이설이 필요한 시설은 해당기관과 협의를 완료하여 이를 설계에 반영하여야 한다.

(3) 공사시 터파기 등으로 인한 보호공이 필요한 시설 등에 대하여는 해당기관과 협의하여 적절한 보호방안을 수립하고 공사중에 손상이 없도록 한다.

(4) 조사된 지장물은 현황도에 정확히 표기되어 있어야 한다.

2.6 측량

1) 일반사항

(1) 측량은 공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률 및 동법 시행령에 의거 용역감독자의 지시에 따라 실시하고 측량이 완료되면 발주기관의 확인을 받는다. 서울특별시 수치지도(1/1,000)와 비교 ․ 평가하여 정확도를 높여 시행하여야 한다.

(2) 계약상대자는 측량을 실시하기 전에 작업계획서를 작성하여 제출하여야 한다.

(3) 작업계획서에는 다음 사항이 포함되어야 한다.

① 조사물량

② 작업계획표 (외업, 내업)

③ 인원편성

④ 주요기기

⑤ 특기사항 (안전관리, 사진촬영)

⑥ 위 치 도

⑦ 기    타

(4) “계약상대자”는 측량작업 시 안전사고 방지에 유의하고 안전사고 발생에 따른 모든 책임을 진다.

(5) 측량작업 시 필요한 관계기관의 제 수속은 “계약상대자” 부담으로 신속히 처리한다.

(6) 측량을 위해 교통 혹은 보행의 금지 또는 제한이 필요한 경우 해당 경찰서 및 발주기관과 협의하여 허가를 득한 후 시행한다.

(7) 기 시행한 측량성과를 활용하는 것을 원칙으로 하되 필요시 측량을 시행하도록 한다.

(8) 작업일지

계약상대자는 작업 진행사항을 작업일지에 기록하여 발주기관이 확인할 수 있도록 하여야 한다.

(9) 측량기구의 점검 및 보정

측량기구는 각 조사에 적정한 것을 사용하여야 하며 사용 시에는 점검 및 보정하여야 한다.

(10) 성과품 제출

성과품(원도, 작업일지, 야장)은 용역준공 납품 시 발주기관에 제출하여야 한다.

2) 현황측량

(1) 각종 기준점이나 주요 측점은 도면 및 보고서에 표기한다.

(2) 현황측량의 축척은 1/500~1/1,200으로 한다.

(3) 교차로 주요건물 및 시설 등에 대한 지형지물 명칭을 기입하고, 지하 매설물 및 지상공작물에 대한 현황을 포함하여 「공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률 시행 규칙」에 따라 작성한다.

(4) 지적현황도는 현황측량의 성과와 구청(또는 해당구청)에 비치된 지적원도 및 도시계획 선을 확인하여 작성하여야 한다.

3) 종․횡단측량

(1) 기본 및 실시설계 시 국가수준점과 서울시 공간정보담당관에서 기설치하여 관리하는 도시기준점을 활용토록 한다.

(2) 국토지리정보원의 수준점 성과를 이용하여 그 폐합차가 허용범위 이내에 들도록 하고 주요지점에 표석(수준점)을 설치하고, 위치 및 표고를 평면 및 측량 성과품에 명시하고 추후 공사 측량에 이용이 가능하도록 한다.

(3) 기존 관로의 측량결과(관저고 및 맨홀 지반고)는 관로 정비계획의 기초 자료로 활용하고 기존 하수관망도에 기록한다.

(4) 본 공사에 필요한 종‧횡단측량은 20m 간격으로 시행하되 지형 등이 급변하는 곳에는 보조측점을 설치하도록 한다.

(5) 종‧횡단 측량은 종단면도의 축척 측점에 종 ․ 횡단 측량을 실시하되 왕복측량으로 허용오차 내에 들도록 실시하고 종단면도의 축척은 종 1:100, 횡 1:500으로 작도하고 횡단면도의 축척은 1:100으로 한다.

4) 기타

(1) 공공측량 성과심사에 지장이 없도록 자료를 작성 제출한다.

2.7 지반조사 및 토질시험

1) 일반사항

(1) 기 시행한 지반조사 성과의 활용 여부를 검토한다.

① 서울특별시의 지반정보통합 관리시스템 : http://surveycp.seoul.go.kr

② 국토교통부의 국토지반정보 통합관리 시스템 : http://www.geoinfo.or.kr

(2) 계약상대자는 본 과업내용서에 의거 조사하며, 과업내용서에 명시되지 않은 사항은 「토질 및 암석시험규정」, 「한국산업규격(KS)」, 「서울특별시 지반조사편람」 및 기타 토질 규정에 따라 시행하여야 한다.

(3) 지반조사에 대한 자료는 국토교통부 국토지반정보포털시스템(www.geoinfo.or.kr)에 등록할 수 있도록 전산파일 형식(한글, 워드, PDF, CAD 등)으로 작성하여 CD에 담아 발주기관에 제출한다.

(4) 과업내용서 이외의 조사

본 과업내용서에 명기되지 않았으나 설계 목적상 필요하다고 판단되는 조사사항은 그 사유를 서면 제출하여 발주기관과 협의 후 실시한다.

(5) 인‧허가 사항

인‧허가(토지사용, 진입로, 기타 시설물 이용 등)에 관한 제반사항은 계약상대자 부담으로 이행하여야 한다.

(6) 세부조사계획서의 제출

계약상대자는 지반조사 세부 조사계획서를 제출하여 발주기관의 승인을 득한 후 조사에 착수하여야 하며 조사계획서는 계약서, 과업내용서, 지반조사 편람 등을 참고하여 작성하되 다음사항을 포함하여야 한다.

① 조사내용(목적, 개요)

② 조사의 순서 및 방법(위치도, 계획표, 시험방법 등 포함)

③ 조사공정표

④ 조사조직표

⑤ 조사내용, 조사방법, 주요장비 및 기기

⑥ 가설비계획

⑦ 기타 교통처리 등 필요한 사항

(7) 안전관리

① 계약상대자는 공사안전 관리지침을 참고로 하고, 항상 조사의 안전에 유의해 현장관리를 하여야 하며 재해의 방지에 노력하여야 하고, 조사현장이 위험하여 일반의 출입을 금지할 필요가 있을 경우는 가설펜스 등에 의한 충분한 안전조치 및 출입금지의 표시를 해야 한다.

② 계약상대자는 조사 실시 중 관리자의 허가없이 유수 및 교통의 방해, 공중에 불편이 되는 행위 및 조사방법을 택하여서는 안 된다.

③ 계약상대자는 조사지점 주변에 있는 지상․지하의 기존 및 가설구조물에 피해나 지장을 미치지 않게 조치하여야 한다.

(8) 사전 및 사후 조치사항

계약상대자는 도로상에서 조사를 행하는 경우는 교통안전에 대한 발주기관, 도로관리자 및 관할경찰서와 협의해 안전표지판 등을 설치하여야 하며, 조사완료 후 노면을 원상복구하고 현장정리를 깨끗이 하여야 한다.

2) 조사 및 시험

(1) 기존자료 조사 및 조사계획서 제출

계약상대자는 본 과업을 수행함에 있어 지형도, 지질도, 항공사진 등과 타 기관에서 기시행한 조사기록과 기본설계 등 기존자료를 수집하고 대상지역의 지형 및 지질특성을 파악하여 시추공의 위치 등을 포함한 조사계획을 수립하고 본 조사의 성과분석시에 참고하여 최상의 결과가 도출되도록 한다.

(2) 지표지질조사

축척 1: 25,000 지형도와 기존지질도를 이용하여 계획지역 일대에 노출되어 있는 지층의 다음과 같은 특성을 위주로 지표지질조사를 시행하여야 한다.

① 암석의 종류 및 분포상태

② 풍화심도 및 상태

③ 절리나 단층 등 지질구조의 발달상태

④ 계획지역 지역사면의 안정성

⑤ 구하천이나 매립지의 분포

⑥ 지반의 특수성, 자연 지하수위, 피압용출수 등 지하수 특징

⑦ 풍화대, 퇴적층 및 연약지반 특성 및 분포상태

⑧ 기타 구조물 건설에 영향을 줄 수 있는 제반지형 및 지질적 주변상태

(3) 시추조사

① 상수도, 가스, 기타 지중케이블선 등의 관리기관과 사전 협의하여 지하매설 지장물이 예상되는 지역은 피하여 인근지점에서 시추를 실시하되 일정심도 까지는 인력터파기를 실시하여 반드시 지장물을 확인하여 지장물의 파손을 사전에 예방하여야 한다.

② 시추조사는 원칙적으로 일정한 압력 및 회전속도를 유지할 수 있는 유압식 시추기를 사용하고 시추공경은 NX로 굴진하는 것을 원칙으로 한다.

③ 시추간격 및 심도는 서울특별시 지반조사 편람의 규정을 원칙으로 하나 지질상태의 변화가 심하고 공사기간 중․장기적 안정성이 요구되는 주요구조물(교량, 지하차도) 설치지역은 발주기관의 승인을 득한 후 시추간격 및 심도를 조정할 수 있으며 기반암층 확인을 원칙으로 하되 기반암이 깊을 경우 하부 5.0m이상 또는 기초 폭 단변의 2배 이상을 시행한다.

④ 시추 시 사용하는 용수는 굴진 시 순환수나 스라임의 색조를 이용하여 지층변화 상태를 파악할 수 있도록 청수를 사용하여야 한다.

⑤ 암반층 시추 시에는 반드시 다이아몬드비트를 사용하고 이중 코어베럴을 사용하여 코어회수율을 최대한 높여야 하며, 굴진속도를 가능한 범위 내에서 암층별로 구분, 기록·유지하여야 한다.

⑥ 지반강도가 낮은 풍화토층, 풍화암층, 연암층, 또는 파쇄대가 나타나는 경우는 코어 회수율을 높이기 위하여 삼중 코어베럴이나 D-3 코어베럴을 이용하여 시추한다.

⑦ 시추각도는 수직으로 함을 원칙으로 하되 지표 지질조사 결과에 따라 파쇄대나 단층 등 구조선의 확인 등을 위하여 필요한 경우에는 경사시추를 수행하여 최대의 시추효과를 얻도록 한다.

(4) 자연시료 채취

연약점토층에서는 시추조사와 병행하여 실내시험용 불교란 자연시료를 채취하여야 하며 시료는 함수비의 변화를 방지하기 위하여 파라핀을 사용하여  밀봉하고 시료상자에 보관하며 이동중의 교란을 방지한다.

(5) 지하수위 측정

시추공내의 지하수위는 시추 완료 후 24, 48 및 72시간이 경과한 후 각각 측정하여 조사지점의 안정된 수위를 산정하고 지하수위의 유동이 심한 지점에 대해서는 조사 전 기간을 통하여 수시로 측정하여 지하수위의 변동 상태를 파악한다.(발주기관 협의 후 시행)

(6) 시추공 보존

① 시추를 완료한 시추공은 매몰되지 않게 PVC 관과 뚜껑을 설치하여 공사 중 지하수위 측정이 가능하도록 하여야 한다.

② 별도의 이용계획이 없는 시추공은 오물이 투입되지 않도록 하여야 하며, 지표면 하부 1m까지는 벤토나이트 또는 시멘트 슬러리를 주입하여 다짐하면서 되메움한 후, 되메움 조치한 굴착공 위에 30～40㎝ 두께의 콘크리트를 밀봉하고, 콘크리트면에서 지표면까지는 깨끗한 흙으로 다지면서 되메움하여야 한다.

3) 현장시험

(1) 표준관입시험

① 표준관입시험은 KS F 2307 규정에 의거한 시험방법에 따라 실시하여야 한다.

② 시험회수는 지층이 변할 때마다 동일층이라도 1.0m 깊이마다 1회씩 실시하여야 하며 N치가 50회에 도달하더라도 관입깊이가 10㎝ 미만일 때는 타격을 중지하고 그때의 관입깊이와 타격회수를 기록한다.

③ 채취된 시료를 함수비 변화가 없도록 200g 이상으로 2개의 시료병에 넣어 밀폐시킨 후 시추번호, 심도 및 N치, 현장, 토질분류 등 제반정보가 기록된 규정된 명패를 부착한다.

(2) 기타 현장시험

① 특정구간의 현장여건으로 인하여 설계 목적상 필요하다고 판단되는 경우 계약상대자는 다음과 같은 시험을 수행할 수 있다. 이때 계약상대자는 추가시험의 합당성에 대한 전문가의 자문의견서를 첨부한 시험계획서를 제출하여 발주기관의 검토․확인 후 사전승인을 득하여야 하며, 시험소요 경비는 실비 정산한다.

② 양수시험, Sounding, 물리탐사, 공내재하시험, 현장투수시험

4) 시료정리

(1) 조사중 채취된 흙시료는 채취, 시추공번호, 채취심도 등 필요한 사항을 기록한 표준명패가 부착된 시료병에 넣어서 시료상자에 보관한다.

(2) 암석코어는 표준규격의 시료상자에 시추공 및 채취심도별로 정리하며, 상자에는 시추공번, 상자번호, 과업명, 조사일시 등 제반정보를 기재하여 상자의 식별이 용이하도록 한다.

(3) 암석코어가 아닌 스라임만이 채취된 경우에는 스라임을 흙시료와 같은 요령으로 시료병에 넣어 시료상자에 보관한다.

5) 보고서

(1) 지반조사 보고서는 과업내용에 명시한 사항과 조사방법 및 결과, 조사지역의 지층분포 및 기타 설계에 필요한 자료들을 검토하여 보고서내에 수록한다.

(2) 지층명, 두께, 토성 및 역학적 성질을 분석 ․ 수록하여야 한다.

(3) 시료의 종류와 시료의 공학적 특성을 분석 ․ 수록하여야 한다.

(4) 시추위치 평면도, 시추주상도, 지질단면도, 시추작업 사진 등을 수록하여야 한다.

(5) 시추 주상도에는 다음 사항을 명시한다.

① 시추공번호, 시추지점 좌표 및 표고

② 암석명, 색상, 풍화도

③ 분류된 지층명과 특성

④ 강도, 절리간격, 절리면 상태, 암질표시율(RQD), 코어회수율(TCR)

⑤ 지하수위 관측치

⑥ 표준관입시험 결과의 N치

⑦ 기타 참고사항

(6) 각종 현장시험 결과 및 성과분석 자료를 수록한다.

(7) 조사 ․ 시험결과로 얻어지는 각종지반의 물성치를 기재하여야 하며, 계획지역의 지반구성상태, 연약지반현황, 예상되는 구조물 기초의 종류(콘크리트기초, 자갈기초, 모래기초 등)에 따른 적합성 여부, 허용지지력 등을 수록하여야 한다.

2.8 관로 현황조사

1) 내부부식 및 크랙 여부, 연결관 돌출여부, 오접 등 관련 시설기준(하천,하수도)에 부합하는 항목을 모두 조사한다.

2) 관로내부 조사시 교통사고, 맨홀추락 등 계약상대자, 보행자의 안전사고 방지를 위한 교통대책을 포함한 종합적인 안전대책 수립 후 현장조사를 이행토록 한다.

3) 필요시 CCTV 조사를 할 수 있으며 조사자료는 “서울시 하수도관리 전산시스템”에 탑재 가능하도록 작성한다.

4) 관로 조사시 관의 규격, 관내부 퇴적상태, 지장물, 유출입부 관저고 등을 기 수행된 용역자료, 시공자료 등의 조사분석 및 현장점검 등을 통하여 확인하여야 한다.

2.9 동일 또는 유사 공종의 건설공사 사후평가 조사

1) 서울특별시 One-PMIS(pmis.eseoul.go.kr), 정보소통광장(opengov.seoul.go.kr),

국토교통부 건설CALS 시스템(http://www.calspia.go.kr)을 활용하여 동일 또는 유사공종의 건설공사 사후평가 결과를 조사한다.

2) 조사 결과를 검토하여 설계에 반영한다.

2.10.용지조사

1) 지장물 및 소유자 확인

- 본 과업에 편입되는 용지 및 지장물을 정확히 조사하고, 지목별, 지장물별(가옥, 수목 등)로 지번과 소유자를 확인하여야 한다.

2) 조사 자료의 제출

- 지적조사에 따라 편입되는 용지에 대한 토지등기부등본 및 토지대장, 지장물에 대한 지장물 현황조사를 용지도와 함께 발주기관에 제출하여야 한다.

3) 조치사항

- 보상 및 공사에 영향을 줄 수 있는 서울특별시의 각종 인․허가 사항을 조사하여 과업수행에 차질이 없도록 하여야 한다.

2.11 위험공종 목록화하여 안전사고 예방

사고사례를 분석하여 위험공종을 목록화하고 안전사고 예방을 위한 꼭 지켜야 할 사항을 검토, 설계 시 반영토록 하며 아래의 내용을 포함하도록 한다.

(1) 지반굴착 및 흙막이공법 적용구간 안전대책

(2) 구조물 시공 시 안전대책

(3) 우기 시 및 동절기 안전대책

(4) 유지관리 종합안전대책 등

2.12 설계에 적용된 현장 조사결과 목록화

지반조사, 측량조사, 지장물조사, 지하매설물 관련기관 협의내용 등을 포함한 종합 조사보고서를 작성하며 아래의 내용을 포함토록 한다.

(1) 문헌자료와의 차이점 및 보완사항

(2) 현장조사결과에 따른 검토사항, 설계적용목록

3.0 기본 및 실시설계

3.1 일반사항

1) 기본 및 실시설계는 배수개선 대책 결과를 토대로 추진한다.

2) 본 과업 수행 시 주변 사업계획 및 진행중인 사업(도시개발사업 등)등을 면밀히 검토하여 상호 연계되는 계획이 되도록 하고 인근 주민의 요구사항을 계획 초기단계에서 부터 조사 및 검토하여 설계에 반영한다.

3) 복개하천을 감안하여 신설암거의 수리적‧구조적 안전성 측면에서의 설계기준을 제시한다.

4) 수리분석에 필요한 유출모형은 『사당역 일대 배수개선 대책 기본설계(2017년), 탄천 등 10개하천 기본계획(2015년)』에서 구성한 SWMM, HEC-RAS 모형을 활용하되, 측량 등의 결과에 따라 보완하여 사용한다.

5) 지하매설물 관리기관별 중·장기 정비계획 및 병행시행 가능 여부 등을 검토하고, 지장물로 인한 하수관로의 구조적, 기능적 결함 요인 등을 분석하여 구배, 통수능 확보를 위한 정비계획을 설계에 반영한다.

6) 기존 수방시설인 펌프장, 배수시설(하수관로,빗물받이등)의 방재능력을 재검토하여 신설되는 암거의 규모 및 범위를 설계에 반영한다.

7) 본 사업과 관련한 법적 제한조건, 지상 및 지하 매설 지장물 이설에 따른 시공의 난이도 및 이설에 따른 시간적‧공간적 제한조건, 지역주민의 민원 등 제반 제한조건 등을 종합적으로 검토‧분석하여 제반 문제점 등을 단면확장(암거신설) 사업이 안전 측면에서 합리적이고  경제적으로 신속히 완료될 수 있는 실현 가능한 선결과제 및 해결방안 등을 제시하여야 한다.

8) ‘지하안전관리에관한특별법’ 제14조 및 제24조에 따라 터파기공사를 설계할 때는 대상사업에 대한 ‘지하안전영향평가’ 또는 ‘소규모 지하안전영향평가’를 받도록 한다.

3.2 기본 및 실시설계

3.2.1 기본설계

1) 기본설계는 배수개선 대책 결과를 토대로 다음 각 호의 업무를 수행한다.

(1) 설계 개요 및 법령 등 제기준의 검토

(2) 기본계획 결과의 검토

(3) 기본적인 구조물 형식의 비교·검토

(4) 구조물 형식별 적용 공법의 비교·검토

(5) 기술적 대안 비교·검토

(6) 대안별 시설물의 규모, 디자인의 검토

(7) 대안별 시설물의 경제성 및 현장적용타당성 검토

(8) 시설물의 기능별 배치 검토

(9) 개략 공사비 및 공기 산정

(10) 측량, 지반, 지장물, 수리, 수문, 지질, 기상, 기후, 용지조사

(11) 주요 자재·장비 사용성 검토

(12) 주요 기자재 선정 기준

(13) 경제성 분석(공사비, 시설내구연한, 용지비 및 보상비, 유지관리비 및 주요기기별 LCC(Life Cycle Cost)를 감안한 총비용 산정 비교)

(14) 설계도서 및 개략 공사시방서 작성

(15) 설계설명서 및 계산서(수리수문, 구조, 기타) 작성

(16) 관계법령 등의 규정에 따라 기본설계시 검토하여야 할 사항

(17) 관계법령 등의 규정에 따라 기본설계시 검토하여야 할 사항

(18) 복개수로 설치에 따른 환경적 영향 검토

2) 관거부설의 기본설계는 다음 각 호의 업무를 수행한다.

(1) 침수해소를 위한 모든 시설물에 대해 효과적인 배수기능 및 유지관리의 용이성, 구조적 안정성 등을 고려하여 주요항목별로 세밀하게 검토하여 계획한다.

(2) 관로시설에 대하여 계획홍수위에 의한 배수위 영향을 검토하여 지반고 이상 배수위가 형성되는 지역을 기준으로 하여 관거증설계획의 타당성을 제시토록 한다.

(3) 하수관거 신설에 따른 유달시간 변경으로 인한 빗물펌프장 유입량의 변화와 그에 따른 펌프장 증설여부, 강우강도 및 기계적 수리적 여건에 따른 적정 가동수위를 제시토록 한다.

(4) 개량 관로공은 물의 흐름을 고려하여 수리상 문제가 없는 구조로 계획하고 유지관리에 용이하도록 위치 및 시설을 계획하여야 한다.

(5) 대상 배수유역 면적 및 계획하수량, 준설 등 유지관리, 지반 경사 등을 고려하여 하수관거의 규모를 결정하여야 한다.

(6) 하수암거에 적합하고 지역여건에 따라 빗물침투 가능한 유공관의 적용여부 등 적합한 관종 설치계획을 수립하여야 하며 빗물받이 등 부대시설 설치에 대한 내용이 포함되어야 한다.

3.2.2 실시설계

1) 실시설계는 기본설계 결과를 바탕으로 관계법령 및 기준 등에 적합하게 건설업자가 시공에 필요한 설계도면 및 시방서등 설계도서를 작성하는 것으로 다음 각호의 업무를 수행한다.

(1) 설계 개요 및 법령 등 제기준 검토

(2) 기본설계 결과의 검토

(3) 구조물 형식, 디자인 결정 및 설계

(4) 구조물별 적용 공법 결정 및 설계

(5) 시설물의 기능별 배치 결정

(6) 장비 반입구, 반입동선 및 준공 후 설비 유지관리 계획

(7) 각종 장비 등에 대한 배치계획

(8) 각종 설비의 현장․중앙제어 및 감시계획

(9) 주요 기자재에 대한 성능보증 사항

(10) 특수공구 목록 제시

(11) 공사비 및 공사기간 산정

(12) 토취장, 골재원, 사토장 등의 조사확인(현지조사 및 토석정보시스템 등 이용)  샘플링, 품질시험 및 자재공급계획

- 서울특별시에서 수행하고 있거나 또는 추진예정인 각종 공사장과  국토교통부 「토석정보공유시스템」을 이용하여 공사시 시공성 및 경제성을 최대한 높일 수 있는 토취장, 골재원 및 사토장을 조사하여 본 과업에 사용 여부를 발주기관과 협의하여 결정한다.

(13) 측량․지반․지장물․수리․수문․지질․기상․기후․용지조사

(14) 기본공정표 및 상세공정표의 작성

(15) 시방서, 내역서, 단가규정 및 구조 및 수리계산서 작성

(16) 공사중 재해대책 및 환경관련(소음, 진동, 비산먼지, 악취, 오염, 폐기물 등) 대책을 수립하여야 한다.

(17) “공사실명제” 시행에 따른 제반빈용을 반영(공사 준공표지판, 건설공사 시공관리 대장 CD, 주요 공정마다 감독관이 입회한 사진촬영 및 보존)

2) 관거부설의 실시설계는 다음 각호의 업무를 수행한다.

(1) 관거의 부설계획은 기존 주택이나 사유시설물에 영향을 미치지 않도록 계획하여야 하며, 또한 유지관리가 용이하도록 하여야 한다.

(2) 관거는 하중조건을 감안하여 경제적이고 안전하게 계획하여야 하며, 안전성을 고려한 기초계획을 수립하여야 한다.

(3) 기존관거 매설현황에 대한 세부도면 작성 시는 관종, 관경, 깊이, 경사도, 매설위치, 맨홀 등 하수시설물의 표기가 포함되어야 한다.

(4) 위치도는 지형도(1/50,000～1/5,000)에 설계구역 또는 설계구간을 표시하며, 평면도는 기존 공공하수도 관망도(1/600, 1/3,000)를 참고하여 미비 된 부분은 종단 측량하여 설계구역 또는 설계구간의 관거, 구간, 번호, 형상, 관경(BOX규격), 경사, 구간거리 등을 기입한다.

(5) 암거 및 관로 평면도의 축척은 1/500, 종단도는 횡측 1/500, 종측 1/100으로 한다.

(6) 종단도면은 관거의 위치, 형상, 관경, 경사, 구간거리, 지반고, 관저고, 토피 및 하천, 도로 등의 위치와 명칭, 유입 및 교차하는 관거의 위치, 번호, 형상, 관경, 관저고 및 하수관내 타지장물의 명칭, 위치, 형상 등을 기입하도록 한다.

(7) 기존 하수암거와 신설암거의 접합부는 유량이 원활히 분배되고 구조적으로 안전하도록 상세한 기준을 제시하여야 한다.

(8) 관거의 종단계획은 관거내 퇴적이나 침전이 발생치 않도록 하여야 하며 기존의 지장물 설치상태를 고려 시공 가능한 계획을 수립하여야 한다.

(9) 관거 종단계획은 지하실의 배수설비를 공공하수도에 직결할 시 역류현상을 방지하기 위한 시설기준을 설정, 유지관리가 용이하도록 하여야 한다.

(10) 지하수 하천수 등의 불명수 유출입이 없도록 수밀성이 보장되고 내구성이 있는 관종 및 관접합 방법을 선택하여야 한다.

(11) 암거의 경간 배치 시 도로횡단 및 구조물 통과구간을 피하여 이음부를 배치하여야 한다.

3.3 설계기준 설정

1) 배수개선 대책을 기초로 하여 국내외 유사사업에 적용된 기준 및 적용현황을 비교하고 단계별 방재성능 목표를 강우량에 적합하도록 설정, 제시 하도록 한다.

(1) 침수 예방이 가능한 강우빈도 및 1시간 강우강도를 제시

(2) 기존 시설의 침수 위험 및 통수능력 검토결과 제시

(3) 강우강도식 및 지속시간별 확률강우량 등 산정근거 제시

(4) 최근 강우 사상을 반영한 강우와 면밀한 수문분석을 통한 확률강우량 및 유출량(홍수량)을 산정 제시

(5) 현재 수행중인 “홍수량 산정 표준지침(한국수자원학회)”,“전국 하천유역 홍수량 산정용역”의 홍수량과 비교검토 결과 제시

(6) 본 사업에서 적용 홍수량은 사업의 규모 및 예산, 사업 후 설계홍수량에 대한 침수피해방지 등 중요한 요소이므로 금회 홍수량 산정과 관련하여 명확한 근거자료를 제시

2) 기본계획시 분석한 강우자료 및 유입량 분석 및 시설물계획 등을 검토하고, 대상유역의 특성을 고려하여 빗물펌프장, 저류시설, 하수관로 등의 대안 및 적정규모를 제시하도록 한다.

3.4 포장 및 보도설계

1) 포장설계

(1) 포장설계는 토질, 기후, 골재 및 교통량 등에 관한 조사자료를 기초로 포장구조 및 포장두께를 결정한다.

(2) 포장구조 및 공법은 기본설계에서 제시된 사항을 적용하는 것을 원칙으로 하나 지역여건, 지형여건, 경제여건이 변화할 경우에는 변경도 가능하며, 이 경우 구체적인 검토가 필요하다.

(3) 포장설계는 “도로포장 구조설계요령(국토교통부)”을 사용 한다.

(4) 시멘트콘크리트포장은 줄눈 및 표면처리에 대해서 상세하게 설계 한다.

(5) 길어깨포장은 폭우, 강설 등으로 인한 세굴 및 파손방지와 유지관리를 고려하여 설계 한다.

(6) 포장층은 동결심도 이상의 충분한 동결방지층을 두어 포장구조의 동결을 방지하여야 하며, 동결심도는 “도로 동상방지층 설계지침”에 의거 결정 한다.

(7) 포장구조 및 단면해석에 필요한 포장특성치와 물성치는 도로포장에 적용할 포장공법으로부터 설정토록 한다.

(8) 포장설계는 형식 및 주요인자를 비교․ 검토하여 최적의 설계가 되도록 하고 특히 교량상부 포장형식은 토공부 포장과의 연속성, 건설 후 유지관리, 시공성, 저소음 등을 비교 검토하여 적정한 포장형식을 결정한다.

(9) 구조물과 접속부 및 신구포장 경계면에서 발생하는 단차가 포장파손의 원인이 되므로 이에 대한 대책을 수립 설계에 반영 한다.

2) 보도설계

(1) 보도관련 공사 설계 지도・점검 이행

① 보도포장 관련 공사(설계) 시행기관 및 부서에서는 설계용역 준공 전(디자인 심의 대상 사업의 경우에는 심의 완료 후) 사업개요, 사업설명서, 설계도서(설계도, 공사시방서) 등을 서울시 보도환경개선과에 제출하여 점검을 받고 점검 지적사항에 대한 조치계획서를 제출하여 승인받아야 한다.

(2) 설계도면, 공사시방서, 내역서 작성

① 보도포장 전문기술교육 전문기술교육 이수 의무화, 도시화로 인한 불투수 면적 증가에 따른 도시 물환경 변화 문제점 해결을 위하여 투수성 포장 설치 원칙 등이 반영되도록 공사시방서 작성한다.

② 내역서 작성시 건설공사 표준품셈을 활용하여 작성하되, 현장에 대한 사전조사를 철저히 하여 각 현장 실정에 맞게 각종 할증률을 반영하여 공사중 통행불편 및 공사하자 등을 사전 예방토록 한다.

(3) 설계시 준수사항 : 보도 유효폭 2m 준수, 횡단경사 2% 이내 준수 등

(4) 재료 선정시 주의사항 이행

① KS 및 서울시 관련 지침에서 정한 기준을 통과한 제품을 적용 한다.

(5) 보도공사 설계는 보도공사 설계시공 매뉴얼(서울특별시) 및 보도 턱낮춤 및 점자블록 설치기준(보도환경개선과)에 따른다.

3.5 지장물 이설 설계

1) 이설비의 산출

시공장비, 작업공간, 고압선 등 시공장비 사용에 지장을 주는 지장물을 포함하여 지장물 중 이설이 필요한 시설(전신주, 가로등, 맨홀, 상․하수관, 가스관, 통신케이블, 고압케이블, 송유관 등)은 해당기관과 협의하여 이설비를 산출한다.

2) 이설계획

이설계획은 지하매설물 관리부서의 확인을 거쳐 이설 가능여부 및 공사 착공후 이설 시기등을 협의하여 그 결과를 설계도서에 첨부하고, 지장물 이설공사 순서를 설계하고, 이설에 필요한 기간을 공사기간에 포함한다.

3) 보호방안의 수립

공사 시 터파기 등으로 인해 보호공이 필요한 시설에 대하여는 지하매설물 관리자와 협의하여 적절한 보호방안을 수립, 공사중 손상이 발생하지 않도록 한다.

3.6 가시설 설계

1) 설계 구간내 각종 지하매설물의 위치를 정확히 조사하여 구조물의 위치, 가시설의 굴착공법, 지장물 이설여부 판단 및 이설방법 등을 설계 한다

2) 공사에 필요한 가시설은 기존 교통통행에 지장이 최소가 되는 공법을 제시하여야 하며, 가시설 및 공사에 따른 단계별 교통처리방안 제시와 안전을 고려한 설계가 되어야 한다.

3) 가시설은 구조물 방수작업이 가능하도록 필요한 이격거리가 확보되도록 설계하여야 한다.

4) 복공구간과 기존도로와의 접속부는 포장면 단차가 발생하지 않도록 하고, 교차로 및 횡단보도 구간의 복공은 미끄럼방지를 고려하여 설계하여야 한다.

5) 흙막이공은 터파기의 규모, 지반조건, 지하수 상태, 주위 여건 등을 고려하여 적합한 흙막이공법을 선정하여야 한다.

6) 지장물은 관계기관과 협의하여 이전하거나, 안전하게 시공이 될 수 있도록 매달기 등 보호공을 설치토록 설계하여야 한다.

7) 공사 중 가시설 계측방법에 대하여 검토 ․ 반영하여야 한다.

8) 굴착 시 인접한 시설물에 대해 굴착에 따른 사전조사를 실시하고 공사중 재해대책 및 환경관련(소음, 진동, 비산먼지, 악취, 오염 등) 대책을 수립하여야 한다.

9) 지하시설물 통합정보시스템 활용 의무화(공간정보담당관 운영)

(1) 발주기관은 지하시설물 통합정보시스템을 활용하여 대상지 주변 지하 시설물도를 계약상대자에게 기본적으로 제공한다.

(2) 계약상대자는 발주기관에서 제공된 지하 시설물도를 참고하여 누락된 지하시설물이 없도록 유관기관과 협의 이행토록 한다.(협의결과 사전보고)

(3) 지하시설물 정보의 무단 유출 방지 및 보안 대책을 강화하여 관리·감독을 철저히 이행토록 한다.

(4) 지하시설물의 정보가 외부로 무단 유출되지 않도록 계약상대자 등에게 보안각서를 징수하고 보안교육을 실시하도록 한다.

(5) 사업완료 후 계약상대자 등에 제공한 관련자료를 완전 폐기한다.

10) 사업구간내 일정구간 줄파기 시행

(1) 지하시설물이 집중된 교차로, 관로 접속구간과 직접 확인이 필요한 일부지역은 실시설계 시 줄파기를 선택적으로 실시, 설계비를 정산한다.

(2) 줄파기 및 사전 교통관리 협의를 통한 가시설계획, 굴착공법 등을 설계에 반영하고 반드시 자치구와 사전 협의를 진행토록 한다.

11) 띠장의 폐합시공이 되도록 띠장 불연속 구간은 띠장 밀림방지앵글 설치를 의무화한다.

12) 시공구간의 주변 건물 손상을 최소화할 수 있는 공법을 채택하고 그 근거를 제시하여야 하며 공사에 따른 침하량 등을 요소별로 산정하고 이에 대한 보완대책을 수립하여야 한다.

3.7 계측계획

1) 계측의 목적, 문제점 및 항목을 명확히 설정하도록 하여, 계측기의 선정, 설치, 빈도 등의 신뢰도가 높도록 계획한다

2) 지반조건 및 위험단면, 주변현황, 지장물 등을 종합적으로 고려하여 계획하도록 한다.

3) 계측위치는 구조물의 규모, 원지반 조건, 시공방법 등을 고려하여 계측목적에 부합되도록 선정한다.

4) 계측간격 및 측정빈도는 지반조건 및 굴착방법, 시공조건에 따라 변경 가능하도록 조절한다.

5) 계측과 병행하여 지보공 및 지질 상태를 파악, 평가하여 시공에 반영하도록 한다.

6) 계측결과와 당초 설계 조건을 비교․검토하여 시공에 반영될 수 있도록 역해석을 실시할 수 있는 자료를 제공하도록 한다.

7) 계측을 현장의 여건과 중요도에 따라 계측의 자동화 및 영구계측 시스템의 운영을 검토하도록 한다.

8) 계측기의 종목 및 수량은 계측관리 표준품셈이나 발주기관의 기준에 따른다.

9) 시공과 유지관리에 관련하여 발주기관의 별도 요구에 의한 계획을 수립한다.

3.8 교통처리계획 수립

1) 교통운용계획

조사・분석된 자료를 근거로 하여 차로수에 대한 적정성을 검토․결정하고 교통개선효과를  분석, 신호 체계운영 방안을 검토하여 최적의 교통소통이 이루어지도록 한다.

2) 기존 도로체계 검토

인접 간선도로 연결과 확장 및 개선으로 인해 파생되는 기존 도로체계에 미치는 교통영향을 분석하고 이에 따른 대응방안을 검토하여 제시한다.

3) 공사 중 교통처리계획 수립

공사 중 교통처리계획은 다음 사항을 면밀히 고려하여 이용시민의 불편을 최소화 할 수 있는 계획을 수립하여야 한다.

(1) 공사중 신호체계 운영계획, 공사 시행방안별 교통운영 효과 분석과 V/C 분석 및 용량부족시 용량 증대 방안 등을 강구

(2) 지하, 지상 지장물의 이설

(3) 우회도로 조사

(4) 야간공사의 필요성 검토

(5) 현장 진‧출입을 고려한 단계별 공사일정에 따른 도로점용 변화상황과 교통소통방안 검토

4) 작업공간 확보

교통처리계획 수립 시에는 장비의 작업동선, 자재 적치공간, 각종 환경방지시설 설치공간 등의 작업공간을 감안하여야 한다.

5) 교통소통대책 수립

원활한 교통소통과 교통안전을 위하여 안전시설(안전표지, 차선도색, 반사가드레일 등)을 설계에 반영하여야 한다.

3.9 사후평가

1) 사업 완료 후 수위측정장치에 의한 실강우시 수위와 해당 강우시 침수모델과의 비교검토를 통해 설계적정성 및 수위저감효과를 계측하는 방안 등을 제시한다.

3.10 시공 및 유지관리계획

1) 예정공정표는 단계별 공사 계획에 따라 공사항목, 흐름도(FLOW CHART), 사전계획에 기초하여 A3규격으로 축소하여 제출한다.

2) 예정공정표는 『서울특별시 설계용역관리편람』에 적합하도록 작성하며, 산출근거를 전자파일 문서로 첨부한다. 이때 유지관리에 사용하는 공정관리 프로그램은 발주기관에서 사용하는 공정관리 프로그램이나 이에 호환되는 프로그램을 사용한다.

3) 준공일자는 최소 소요일수에 여유일수를 감안하여 산정하며, 이는‘발주기관’과 협의하여 결정한다.

4) 신설암거에 대하여 추후 원활한 준설(청소) 및 보수보강이 가능하도록 유지관리계획(점검계획 등)을 수립한다.

5) 암거의 점검계획에는 점검빈도, 방법 등을 제시하고 ｢밀폐공간작업 질식재해예방 매뉴얼｣(고용노동부, 2014)을 참조하여 밀폐된 공간에서의 안전사고 방지계획을 수립한다.

6) 우기철 하수관로 내부에서 작업 및 조사를 수행할 경우 돌발강우시 안전사고 예방 및 대응책을 제시한다.

4.0 성과품 작성 및 납품

4.1 일반사항

1) 성과품 작성기준

계약상대자는 성과품 작성시 “서울특별시 설계용역관리편람” 및 “건설공사 설계도서 작성기준”에 의한 작성기준에 따라 작성하여 발주기관 검토 후 제출하여야 한다.

2) 모든 보고서, 계산서, 공사시방서, 지침 등은 A4크기 용지에 작성하는 것을 원칙으로 하되 도면, 집계표 등을 위해 A3크기 또는 적절한 크기의 용지를 사용 할 수 있다.

3) 보고서 등 성과품은 CD-ROM으로 별도 작성하고 문서는 한글, 도면은 Auto Cad File로 작성한다.

4) 기본설계 단계별 설계의 경제성 등 검토 결과를 최종 보고서에 수록하고 설계서에 반영한다.

5) 하수도관리 전산시스템 데이터로 입력될 각종 자료(관로 현황 조사자료, 유량계산서, 하수도대장도, 정비자료 등)는 즉시 하수도관리 전산시스템에 탑재되도록 작성 하여야 한다.

6) 계약 상대자는 최종 용역 보고서에 용역 손해배상 보험‧공제 증권을 수록해야 한다.

7) 기술용역 성과품 공개 및 관리 강화 방안

(1) 용역 완료시 전체 용역성과품 3부 및 CD 1부(표준포맷)를 서울도서관에 제출

(2) 용역 준공시 정보소통광장 공개현황(화면출력) 및 서울도서관에서 발급받은 제출확인서 재무부서 제출

4.2 성과품의 구성 및 내용

1) 종합보고서 작성

(1) 표    지

(2) 제 출 문(용역수행업체의 대표이사 명의)

(3) 참여기술자(명단, 생년월일, 업무내용, 업무에 실제 참여한 기간 및 서명)

(4) 목    차

(5) 위 치 도

(6) 과업의 목적

(7) 과업의 개요(내용), 과업수행 지침

(8) 조사 및 분석(측량, 지장물조사, 지반 및 지하수위조사, 수리 ․ 수문 및 배수시설조사, 구조물조사, 토취장 및 사토장조사, 용지조사, 기타조사 등)

(9) 설계기준

(10) 관련계획 검토사항

(11) 기본설계내용 검토

(12) 실시설계내용 (설계기준, 토공, 가시설, 포장, 구조물, 배수시설, 부대시설 설계, 기타)

(13) 시공 및 유지관리 시설계획(공사 예정공정표, 시공순서, 시공방법, 공사중 교통처리, 지장물 이설, 유지관리시설)

(14) 부록 (각종 조사자료,  주요 설계도면 및 협의, 지시사항, 주요자재 및 공법 선정 ․ 비교, 승인된 설계VE 제안 반영 내용 등)

(15) 기술자문회의 지적사항에 대한 반영여부와 보완내용.

(16) 설계실명화를 위해 각 시행과정에 참여한 담당자에 대하여 과업 참여기술자별 인적사항, 업무내용, 참여기간 등을 기록하되 참여기술자 주민등록번호는 공공기관의 개인정보에 관한 법률 제9조의 규정에 의거 개인정보 누출방지를 위하여 뒷자리를 암호화 처리한다.

(17) 기타 발주기관 요구 사항

2) 요약보고서 작성

(1) 표    지

(2) 제 출 문(용역수행업체의 대표이사 명의)

(3) 참여기술자(명단, 생년월일, 업무내용, 업무에 실제 참여한 기간 및 서명)

(4) 목    차

(5) 위 치 도

(6) 과업의 목적

(7) 과업의 개요(내용), 과업수행 지침

(8)~(13) 종합보고서 작성 참조하여 간략히 작성

(14) 결언

3) 지반조사 보고서 및 성과물

(1) 보고서 수록내용

지반조사 보고서는 과업내용서에 명시한 사항과 조사방법 및 결과, 조사지역의 지층분포 및 기타 설계에 필요한 자료들을 검토하여 수록한다.

① 시료 및 지질특성 지층명, 두께, 토성 및 역학적 성질, 시료의 종류, 공학적 특성 등

② 도면, 시추위치의 평면도, 시추주상도, 지질단면 등

③ 기타 각종 현장시험결과 및 성과분석자료, 조사시험결과로 얻어지는 각종 지반의 토질정수, 계획지역의 지반구성상태, 연약지반 등

④ 지반조사 날짜가 명기된 작업사진

(2) 시추주상도

「서울특별시 지반조사편람」의 표준주상도에 따라 다음사항을 명시한다.

① 시추공 번호, 시추지점 좌표 및 표고

② 분류된 지층명과 특성

③ 암석명, 색상, 풍화정도

④ 강도, 절리간격, 절리면상태, 암질표시율(RQD), 코어회수율(TCR)

⑤ 지하수위 관측치

⑥ 표준관입시험 결과의 N치

(3) 성과물

시료상자, 사진촬영앨범 등 관련 조사자료를 보고서와 함께 발주기관에 제출 한다.

4) 구조 및 수리계산서 작성

(1) 개요

(2) 구조계획도(구조물 일반도. 주요단면도)

(3) 설계조건(구조형식, 설계방법, 설계하중, 사용자재 및 특성, 지반조건 및 물성치, 사용PROGRAM, 설계기준 및 지침, 유역이나 배수시설의 초기 조건, 설계강우, 조도계수 등 주요 매개변수, 유출계수나 유출곡선지수, Green-Ampt 공식 등 유효강우량 산정 관련 계수나 인자, 강우-유출 변환법과 주요 매개변수, 홍수위 산정법과 적용 조건, 하도 또는 저수지 추적법과 적용 조건, 기타)

(4) 구조계산 (개요, 구조해석방법 및 모델, 사용자재, 단면상수, 하중조합, 구조해석, 설계단면적, 단면응력검토, 기초허용지지력, 안정성 검토)

(5) 가시설(개요, 구조해석방법 및 모델, 사용자재, 단면상수, 하중조건, 설계단면력, 단면응력검토, 안정검토)

(6) 수리계산 (개요, 설계빈도, 강우량, 홍수량, 수위, 유속, 통수단면적, Froude 수 등 수리 특성 자료와 대상 구조물 또는 시설물에 대한 기술적 분석 자료와 해석 또는 설계한 방법 및 결과를 제시. 특히 기왕의 홍수량이나 침수위 자료 등을 이용하여 사용한 모형의 매개변수 보정과 검정을 최대한 수행)

(7) 구조계산서 및 수리계산서 작성 방법

① 입력자료의 근거, 사용공식의 출처 명시

구조계산서는 정확하고 상세하게 정리 수록하여 검토가 용이하게 작성 되어야 한다. 특히 프로그램의  입․출력 자료는 모든 Case별로 이해하기 쉽게 정리되어 구조계산서에 포함하여야 한다. 또한 입력자료의 근거를 명시하고, 사용공식의 출처를 명시하여야 하며, 그에 대한 출력자료가 정리되어 있어야 한다.

② 프로그램 명시

각종 계산서에 사용한 전산PROGRAM과 판 번호, 발표일자 등과 이를 이용하여 설계한 사항 또는 부재 등을 정리 수록한다.

③ 프로그램의 승인

구조계산용 범용(SAP2000, MIDAS/CIVIL, GT-STRUDL, NASTR AN, ADINA등)이 아닌  경우에는 프로그램 사용의 적정성에 대하여 승인을 득한 후 사용한다.

수리계산용 범용(HEC-RAS, XP-SWMM)이 아닌 경우에는 프로그램 사용의 적정성에 대하여 승인을 득한 후 사용한다.

④ 구조계산서의 구성

전산 프로그램을 사용하여 구조해석을 수행한 경우 입․출력 자료는 별책 부록으로 하되,  구조계산서에는 구조해석 모델, 경계조건, 하중, 사용한 유한요소의 종류, 주요해석결과(최대․최소 단면력, 최대변위 등)를 명시하며, 출력자료가 구조계산서의 형태 및 순서로 정리되어 인쇄된 경우에는 ‘발주기관’과 협의 후 본 구조계산서의 해당항목에 수록한다.

⑤ 가정값의 표기

구조계산서 주요 설계계수가 가정값인 경우 반드시 가정값임을 표시하고, 시공시 확인이 필요한 경우에는 관련 도면 및 공사시방서에 동 사항을 명기하여야 한다.

⑥ 단위의 사용

구조계산서에 사용하는 주 단위는 SI단위를 사용하고, MKS단위는 보조단위로 사용하며, 특수 단위가 필요한 경우에는‘발주기관’과 협의하여 사용한다.

5) 설계도면

(1) 설계도면에 포함될 사항

∙ 표지, 목차

∙ 위치도 및 전체계획 평면도

∙ 표준단면도, 종 평면도, 횡단면도

∙ 구조물도 및 상세도

∙ 부대시설도 및 상세도

∙ 가시설도 및 상세도

∙ 교통처리계획도 (공사중 포함)

∙ 지장물 및 현황도

(2) 설명문의 기입

설계도면은 이해가 쉽도록 상세히 작성하여야 하며, 도면내용이 시공자가 이해하기가 어렵거나, 해석상 혼란이 발생할 소지가 있는 부분은 설명문을 기입하여야 한다.

(3) 설계방법의 표시

실시설계의 구조물 도면에는 설계방법(허용응력설계법 또는 강도설계법)에 대하여 표시하고 재료의 종류, 강도 등과 같은 주요 설계조건과 시공시에 유의하여야 할 사항 등 해당 도면에 공사내용에 대한 특기사항 등을 수록하여야 한다.

(4) 표제란

도면 하단의 표제란의 형식은 발주기관과 협의하여 결정한다.

(5) 서명, 날인

모든 설계도면에는 도면작성자, 검토자, 분야별책임기술자가 서명 또는 날인을 한다.

(6) 특기사항의 반영 및 발주기관의 승인

설계도면에는 주석란(Note)을 만들어 구조물 설계방법, 재료의 종류, 강도 등과 같은 주요 설계조건과 시공시에 유의하여야 할 사항 등, 해당도면 공사내용에 대한 특기사항 등을 수록하되, 시공시 불가피하게 조사, 확인, 검토등을 하여야 하는 조항을 둘 경우 발주기관의 승인을 받아야 하며, 이에 대한 비용도 반드시 설계 내역서에 반영 하도록 한다.

(7) 관련 도면의 표기

설계도면에는 관련 도면란을 만들어 해당도면의 내용과 밀접한 관련이 있는 도면명을 표기한다.

(8) 도면의 전산 작성

설계도면 작성시 CAD로 작성하고, CD-ROM에 저장시 전산데이터간 호환 가능하여야 한다.

(9) 도면의 작성기준

설계도면은 KS A0005(제도통칙)과 KS F1001(토목제도통칙) 에 따라 작성한다.

(10) 붕괴유발부재

양수펌프장과 같은 주요구조물이 생길 경우 붕괴유발부재(FCM)을 설계도면에 표시하여야 한다.

(11) 설계도면의 작성 및 제출

∙ 설계도면 우측에 관련된 구조계산서, 수리계산서 등을 부착하고  종․평면도상 구조물의 위치 및 치수등과 사용재료의 규격, 수량 등을 책임기술자 등이 설계도면 우측 하단에 범례로 정한 색으로 검토에 맞춰 형광펜으로 표시하여 작성한 설계검토도면 1부를 제출하여야 한다.

∙ 설계도면 검토 및 수정 완료후 검토자와 검토 입회자가(‘발주기관’) 설계검토 도면에 소속, 직책, 성명을 기재하고 날인한다.

<범         례>

구 분	검토내용	비고
녹 색	적정 및 수정완료
청 색	부적정
노 란 색	재검토

6) 공사시방서

(1) 공사시방서는 공사에 사용되는 각 공종별 시공방법, 자재에 대한 시방을 상세하게 수록하며 서울특별시 전문시방서 공종분류 체계에 맞게 작성하고, 자재․입찰절차․공사비․공사여건 등을 고려하여 공사조건에 적합하게 전문시방서 내용을 수정․보완하여야 하며, 필요시에는 관련 표준시방서와 참고자료를 이용하여 작성하여야 한다.

(2) 공사시방서에는 다음과 같은 사항을 포함한다.

① 적용범위, 용어의 정의, 설계도서의 적용 우선순위, 설계도서 검토의무 등에 관한 상세 사항

② 해당 건설공사 표준시방서 및 전문시방서, 관련법규 및 지침, 제기준의 명칭

③ 관련법규에 따른 요구사항 및 조건에 관한 상세 사항

④ 시공자가 작성하여야 할 시공상세도 목록

⑤ 시공자가 제출할 각종 보고서 및 서류 등에 관한 방법, 시기 및 절차 등에 관한 세부사항

⑥ 각종 검사, 기성지급, 품질관리, 안전관리, 환경관리 등에 대한 상세사항

⑦ 주요공종별 시공방법 및 절차, 시험방법, 허용오차, 사용자재, 사용장비, 소요인원 등에 관한 상세한 규정

⑧ 공사전반에 관한 주의사항 및 절차

⑨ 기타 주요 공사사항

(3) 공사시방서 작성시 고려사항

① 관련시방 또는 지침에 규정된 주요자재의 허용오차의 변경이 필요한 경우 이를 기재한다.

② 공사시방서는 전문용어를 사용하고, 해석에 이견이 없도록 하기 위해 정확하고 완전하며 간단 명료하게 작성한다.

③ 표준양식을 사용하도록 하고, 되도록 작성형식의 일관성을 유지하도록 한다.

④ 공법 및 공종에 맞는 자재, 장비, 인원을 선정한다.

⑤ 현실적으로 가능한 방법 및 내용으로 작성한다

⑥ 공사기성에 관련된 사항은 이해가 명확하도록 한다.

⑦ 공사 전반에 대해 기술하며, 목차는 가능한 공사순서대로 작성한다.

⑧ ‘발주기관’의 의도를 정확히 파악하고,‘발주기관’,‘시공자’,‘감독원(건설사업관리기술자)’등이 직면할 수 있는 어려움을 감안하여 신중히 작성한다.

⑨ 정확한 문법을 준수하고 오자, 오기 등이 없도록 작성한다.

⑩ 주요 설계 계수가 가정값인 경우 현장시공에 앞서 확인이 필요한 경우 공사시방서에 이러한 사실을 명시한다.

7) 설계예산서

(1) 예산서의 구성

설계예산서는 설계설명서, 설계내역서, 일위대가표와 단가산출서로 구분하고 단가산출서는 별책으로 작성하며 일위대가표는 분량이 많을 경우 별책으로 작성한다.

(2) 설계예산서

설계예산서에는 총공사비와 공사개요를 기재하며 총괄내역서에는 제경비의 산출근거가 포함되어야 한다.

(3) 노임의 기준

노임의 기준은 납품 전 공사노임단가 (대한건설협회가 통계청의 승인을 얻어 발표한 조사 노임)을 기준 한다.

(4) 품셈

공사원가 계산서는 당해연도 「건설공사 표준품셈」에 의하되 추정가격이 10억원 이상인 경우 「표준시장단가 적용 공종 및 단가」를 우선 적용한다.

(5) 유류가

유류가는 해당 지역의 거래가격으로 적용한다.

(6) 재료비

재료비는 조달청에서 조사하여 매월 가격정보지에 제재하는 가격과 기획재정부장관에 등록한 기관이 조사하여 발행한 물가정보지 등 3개 이상의 물가자료를 비교하여 산출한다.

(7) 중기손료

중기손료 작성시의 외환환율은 당해 년도 금융결재원이 외국환은행장 등에게 통보하는 기준환율(외국환거래법에 의한 기준환율 또는 재정환율)을 기준으로 하나 연초의 외환환율 기준으로 3%이상 증감이 발생할 때는 변동시점을 기준으로 적용한다.

(8) 견적서

공사비 산출을 위한 견적서는 3개 업체 이상의 것을 기준으로 하되, 부득이한 경우에는 발주기관과 상의하여 1개 또는 2개 업체의 견적서를 기준한다.

단, 견적가가 사회통념상 상당한 차이가 있다고 판단될 때는 시장조사 등을 실시하여 설계 하여야 한다.

(9) 설계예산서 양식

설계예산서는 발주기관에서 사용하고 있는 설계서 양식에 의하여 작성한다.

(10) 설계내역서의 수록사항

① 설계서 표지

② 설계내역 총괄 (설계예산, 도급공사, 원가계산서, 총괄내역서, 공종별 내역서, 일위대가 등)

③ 설계내역서 (도급비, 관급비, 이전비, 기타)

④ 일위대가표 (단가산출근거, 중기사용료, 단가조서, 견적서, 운반거리, 조견표 등)

(11) 수량산출서의 작성

수량산출서는 별책으로 작성 한다

① 각 공종별로 수량을 산출 ․ 집계하여야 한다.

② 각 공종별 단위수량은 표준품셈 적용기준에 의하여 산출하여야 한다.

③ 각 품목별 단가는 품명 규격을 표시하고 적용근거를 명시하여야 한다.

9) 용지도․지장물조서 및 인허가 서류

(1) 용지도 및 용지조서 작성

① 용지도

용지도는 작성자가 확인, 날인하여야 하며, 용지도상에는 도로부지 경계선 및 중심선을 표시하고 행정구역, 지번, 지적, 축척 등을 기입하고 주요건물(가옥, 전주, 지하매설물 등)을 표시하여야 한다.

② 용지조서

용지조서에는 지번, 지적, 지목, 소유자의 주소, 성명이 표시되어야 하고, 지적에는 당초지적과 계획도로로 분할될 지적을 구분하여 작성하여야 한다.

③ 특기사항

가. 소유권 이외의 권리(저당권, 지상권, 지역권 등)가 설정되어 있거나 예고등기, 가등기 등이 설정되어 있는 경우에는 그 내용을 기입하고 공유물일 때에는 공유지분을 기입한다.

나. 지적도상의 토지중 등기가 되어 있지 않거나 토지대장에도 미등록된 토지는 소유자란에 별도 기재하여야 한다.

④ 발주기관에 제출

용지조서 작성에 사용한 토지대장, 건축물 관리대장, 지적도, 등기부등본은 성과품 납품시 함께 제출하여야 한다.

(2) 보상대상 및 지장물 조서 작성

① 조사대상

과업구간내 보상대상 및 지장물은 종류별로 상세하게 조사 기입한다.

② 대상의 범위

보상대상 하수도 및 지장물은‘발주기관’과 협의하여 그 범위 등을 조사한다.

③ 도시계획시설사업 실시계획인가 서류작성

계약상대자는 발주기관의 요구에 따라 도시계획시설사업 실시계획인가 또는 공공하수도 설치인가 등 제반 인 ․ 허가에 필요한 자료를 작성하여 제출한다.

10) 기  타

(1) 수량산출서 작성시 자재할증, 손율, 고재처리 등은 건설공사표준품셈에 준한다.

(2) 도면의 크기는A0～A6에 준하는 것을 원칙으로 한다.

(3) 모든 보고서, 계산서, 공사시방서, 지침 등은 A4크기 용지에 작성하는 것을 원칙으로 하되 도면, 집계표 등을 위해 A3크기 또는 적절한 크기의 용지를 사용 할 수 있다.

(4) 소구역별 사업우선순위를 선정하여 사업 우선순위도 작성한다.

4.3 성과품 납품

1) 성과품 납품시기

(1) 모든 성과품의 인쇄는 발주기관과 협의하되 발주기관의 방침 등에 따라 성과품의 종류, 수량 및 제작방법이 변경될 수 있다.

2) 설계심의 제출자료

납 품 목 록		수 량	비 고
․기본설계 보고서		10부
․주요 구조 및 수리계산서		10부
․지반조사 보고서		10부
․기본설계 예산서	기본설계내역서	10부
	기본단가산출서	10부
	기본수량산출서	10부
․기본설계 도면		10부
․기타 성과자료		10부

3) 최종 성과품

성 과 품 종 류		수 량	비 고
기본 및 실시설계 보고서		10부
각종 계산서		10부
유지관리 지침서		10부
공 사 시 방 서		10부
설 계 예 산 서	설계설명서	10부
	설계내역서	10부
	단가산출서	10부
수 량 산 출 서		10부
단 가 산 출 서		10부
설 계 도 면		10부
지 장 물 도		10부
지적도 및 용지도		10부	용지조서 포함
현장조사 종합 보고서 (측량조사, 지장물조사, 지하매설물조사 등)		10부	설계에 적용된 현장 조사결과 보고서 포함
지반조사 보고서		10부
성과품 CD		10장
측 량 원 도 및 야 장		1식
현황조사 사진첩		1식
지 반 조 사 자 료		1식
하수도관리전사시스템 관련자료		1식
인허가 서류 및 도서		1식
기타 발주기관이 요구하는 자료		1식

□위치도