하늘공원 예방사방사업 추진계획

□ 용역개요

○ 용 역 명 : 매립지 하늘공원 북측사면 정밀안전진단용역

○ 규    모 : A=440,000㎡

○ 계약금액 : 43백만원

○ 용역기간 : ’13. 12. 19. ~ ’14. 3. 18.

○ 용역결과 : 종합평가는 B등급이나 일부 비탈면 토사사면은 “D등급”으로 긴급한 보수․보강이 필요함

□ 공사개요

○ 표면보강 및 뜬돌제거 880㎡

○ 배수로 정비 350m

○ 총공사비 230백만원

□ 추진계획

○ 3. 18 : 용역 준공

○ 4.4~4.11 : 공사설계 및 예산배정

○ 4. 16 : 공사발주

○ 4. 30 : 공사계약 및 착공

○ 6. 15 : 공사준공