사당배수지 건설공사

【 상수도사업본부 시설안전부 】

동작구 사당2동 등 4개동의 고지대에 대해 배수지를 통한 간접급수방식으로 전환하여 누수, 정전 등 사고 시에도 단수 없이 아리수를 안정적 공급하고 시민불편 해소를 위해 추진하는 사업

□ 사업개요

○ 사업위치 : 관악구 봉천동 산66-3번지(까치산근린공원 일부 부지)

○ 사업규모 : 배수지 5,000㎥
송배수관 400~500㎜, 연장 1.7㎞

○ 시 공 사 : ㈜한양아크라임 대표 박성훈

○ 사업관리 : ㈜대한콘설탄트 대표 이우정

○ 공사기간 : ’16. 12. 6. ~ ’19. 5. 24.

○ 총사업비 : 10,003백만원(도급비 : 4,489백만원)

□ 추진계획

○ 2016. 12. 5 : 공사계약 및 착공(’16.12.6)

○ 2017.  : 배수지 건설 토공, 가시설공, 구조물공 시행

○ 2018.  : 관로공사, 건축, 기계, 전기, 조경공사 시행

○ 2019.  : 시운전 및 준공

□ 연차별 투자계획

(단위 : 천원)

구 분	총사업비	2015	2016	2017	2018이후
계	10,003,000	294,000	2,000,000	3,642,000	4,067,000

작 성 자	시설안전부장: 강신재 ☎ 3146-1501 시설과장:김도섭 ☎ 1490 담당:윤 걸 ☎ 1494

□ 참고자료

○ 사당배수지 위치도 및 급수구역도

위  치  도

급수구역도