■ 공공주택 특별법 시행규칙 [별지 제3호서식]

사업계획

[  ] 승  인  서

[√] 변경승인서

사업 구분

［√］주택건설사업                    ［ ］대지조성사업

［ ］승인                            ［√］변경승인

승인번호

2015-임대주택과-주택건설사업계획승인-2

상호

에스에이치공사

등록번호

218-82-00136

대표자

변 창 흠

법인등록번호

(생년월일)

**************

영업소 소재지

서울시 강남구 개포로 621

대지 위치

서울특별시 노원구 상계동 상계・장암 도시개발사업지구 내 도시형생활주택용지

대지면적(㎡)

1,366

건축면적(㎡)

686.84

건폐율(％)

50.44

연면적(㎡)

1,936.41

용적률(％)

140.83

동 수(주/부)

1동/1

세대수

48세대

주택 형별

도시형생활주택(행복주택)

총사업비

5,812,000천원

착공 예정일

2015.10.28.

사용검사 예정일

2016.12.30

동 고유번호

동 명칭 및 번호

연면적(㎡)

동 고유번호

동 명칭 및 번호

연면적(㎡)

101동

공동주택

1,804.13

기타부대시설1

주민공동시설

102.53

기타부대시설2

방재실,MDF실,

택배보관실

30.15

변경 사항

1. 건축 면적 : 변경전    686.84㎡ / 변경후    689.06㎡ (증 2.22㎡)
2. 연  면  적 : 변경전 1,917.07㎡ / 변경후  1,936.41㎡ (증 19.34㎡ )
3. 층별 변경 : 지하1층 변경전 없음 / 변경후 12.73㎡ (증 12.73㎡)-우수조기계실 설치

4. 사업기간 변경 : 2015.03.31.~2015.11.30. → 2015.10.28.~2015.12.30.

「공공주택 특별법」 제35조제1항에 따라 위와 같이 사업계획을 ([ ] 승인 [√ ] 변경승인)합니다.

2016년         3월        30일

서울특별시장	직인

210mm×297mm[백상지 80g/㎡(재활용품)]

상계･장암지구 5단지 도시형생활주택 사업계획변경승인 내역

구 분			사 업 계 획 승인 내 역		비고
			변경전	변경후
① 대 지 위 치			서울특별시 노원구 상계동 상계･장암지구단위계획구역 내 도시형생활주택용지
② 대 지 면 적 (㎡)			1,366.00
③ 건 축 면 적 (㎡)			686.84	689.06
④ 건축 연면적 (㎡)			1,917.07	1,936.41
⑤ 건 폐 율 (%)			50.28	50.44
⑥ 용 적 률 (%)			140.34	140.83
⑦ 주택 규모	동수 및 층수		아파트 1동 48세대 (지하1, 지상4층)
	주택 형별	도시형 생활주택 (행복주택)	전용21㎡A형 : 31세대 전용21㎡AS형 : 11세대 전용31㎡A형 : 6세대
		계	총 48세대
⑧ 사 업 기 간			2015.03.31.～2015.11.30.	2015.10.28.~2016.12.30.
⑨ 부대 복리 시설 현황	경 로 당		-	-
	작은도서관		-	-
	관리사무소		-	-
	보육시설		-	-
	주민공동시설		101.30	102.53
	MDF, 방재실, 택배보관실		31.24	30.15
	경 비 실		-	-
	어린이놀이터		-	-
	기계,전기,발전기실		-	-
	주 차 장		25대 (지상:25대)	25대 (지상:25대)
	근린생활시설		-	-
⑩ 공동저수시설(TON)			-	-

⑪ 단위세대면적 변경내역

구 분	전용면적		주거공용면적		공급면적		기타공용면적		계약면적
	변경전	변경후	변경전	변경후	변경전	변경후	변경전	변경후	변경전	변경후
21A	21.81	21.92	13.30	13.35	35.11	35.27	2.60	2.86	37.71	38.13
21AS	21.94	21.92	13.27	13.35	35.21	35.27	2.62	2.86	37.84	38.13
31A	31.91	31.98	19.56	19.62	51.47	51.60	3.81	4.18	55.28	55.78