2015년도 생활체육시설 확충대상 사업계획서

□ 일반개요

○ 위        치 : 성동구 송정동 73(중랑물재생센터 내)

○ 소유자(관리부서) : 서울특별시(물재생시설과)

○ 토지이용계획 : 제1종 일반주거지역, 하수처리시설, 잡종지

※ 지역지구(자연녹지지역, 미관지구 등), 도시계획시설(공원, 체육시설 등), 지목 등

○ 대지(활용)면적 : 총 6,800㎡ (전체 801,503㎡)

○ 기존시설현황 : 족구장 1면, 테니스장 2면, 다목적 구장 1면

□ 사업개요

○ 사 업 명 : 중랑물재생센터 생활체육시설 설치사업

○ 사업기간 : 2015.02. ~ 2015.10.

○ 사업규모 : 축구장(인조잔디) 1면, 족구장(인조잔디) 2면

○ 사업내용

- 축구장 1면 표준규격으로 신설 및 인조잔디(104m×54m) 설치

- 족구장 1면(30m×20m) 마사토, 1면 인조잔디 설치

- 펜스 설치, 수목이식 및 기타 부대시설 1식

○ 총사업비 :  967백만원

(단위 : 백만원)

구 분	국비	시비	구비	기타
금 액	-	967	-
확보/미확보

□ 세부시설 및 소요예산

(단위 : 백만원)

공 종 별	규모	적용단가	소요 비용	집 행 계 획
				~2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월~
합 계			967	-	15	120	300	230	162	-	90	50
①설 계 비	1식	-	15	-	15	-	-	-	-	-	-	-
②공 사 비			952	-	-	120	300	230	162	-	90	50
토목공사	6,600㎡	70,000원/㎡	462	-	-	100	100	100	162	-	-	-
인조잔디공사	6,600㎡	50,000원/㎡	330	-	-	-	200	130	-	-	-	-
디자인휀스설치	300m	300,000원/m	90	-	-	-	-	-	-	-	90	-
수목이식	50주	400,000원/주	20	-	-	20	-	-	-	-	-	-
벤치 등 기타	1식	-	50	-	-	-	-	-	-	-	-	50

□ 확충 필요성

○ 기존 유휴공간을 마사토 등을 투입하여 축구장으로 직원 및 인근 주민들이 활용하고 있으나 주변이 도로로 안전문제 등 이용시민들에게 불편을 초래하여 수목 이식 등 확충이 필요함

○ 족구장은 연간 이용객이 계속 증가하는 추세이나 시설이 부족하여 수요를      충족하지 못하는 실정임

□ 시설부지 현황

○ 주변현황

- 축구장 주변은 녹지와 도로, 족구장 주변은 족구장 1면과 테니스코트 2면이       설치되어 있음

○ 부지현황

- 축구장은 마사토로 되어 있으며, 추가 설치될 족구장은 녹지(잔디) 임

□ 기대효과

○ 부족하고 노후된 체육시설 확충으로 직원 및 시민 생활체육 활성화에 기여

□ 세부 추진일정

○ 설      계 : ’15.02.27. ～ ’15.03.31.

○ 착공예정일 : ’15.04.30.

○ 준공예정일 : ’15.10.30.

※ 첨부 : 1. 현황사진 및 배치도 각1부.

2. 방침서(추진계획) 1부.

□ 현장사진
축구장 부지	족구장 부지
□ 배 치 도

’15년 생활 체육시설 확충대상 부지 현장조사서(종목별)

자치구명 :                                                   No.

대지위치	성동구 송정동 73 (중랑물재생센터 내)	종 목	축구, 족구
재산관리관	서울특별시장 (물재생시설과)	토지이용계획	제1종 일반주거지역
면 적	6,800㎡
사 업 비	967백만원	추 천
부지현황	입목의 수 : 플라타너스 25주, 소나무 17주, 일반수목 8주 경사도 : 평탄지 접근성 : 중랑물재생센터 내에 위치하고 있어 접근성이 좋음 현 이용실태 : 유휴부지 공간을 축구장으로 활용하고 있으나 정규 구장 설치 요청 및 안전문제 등으로 이용자들의 불만이 많으며, 족구장은 이용자가 많으나 시설이 부족한 실정임
사전행정 절차 등	없음
장애요인 및 극복방안	없음
주 민 및 관련부서 의 견	◦ 유휴부지를 마사토를 투입하여 축구장으로 활용하고 있는 시설을 보완 해주고 수요가 많은 족구장은 추가 설치 요청
주관부서 검토의견	◦ 도로와 연접해 있는 유휴부지의 공간으로 주변으로 확장하여 정규구장으로 조성하여 시설 안전문제 등을 해소하고, 부족한 족구장을 추가 설치하여 직원 및 시민들의 생활체육 활성화에 기여함이 타당함