2014년 보건지소 칼로리계단 조성 사업 계획서

중곡 보건지소 내 칼로리계단(일명 다이어트 계단)을 조성하여 건강과  문화가 있는 계단 오름을 통해 지역주민의 건강증진을 도모하고, 에너지 절감과 탄소량 배출 저감에 기여하고자 함

Ⅰ	추진개요

추진근거

❍ 광진구 보건지소-3337(2013.06.03.)호의 “주민참여예산 제안사업” 제출 및 서울시 건강증진과-25453(2013.12.31.)호의 “주민참여예산 확정내시” 통보

추진배경 및 필요성

❍ 칼로리 계단의 조성 필요성

- 2012.3월 건립된 중곡종합건강센터는 만성질환관리, 재활치료사업 등   질병 예방 교육 및 홍보 사업을 수행 하는 기관

-「칼로리 계단」은 매 층계마다 칼로리 소모량을 표시한 계단에 다양한

컨텐츠들을 접목시켜 건강하고 즐거운 계단 오르기를 돕는 계단으로         일명 건강계단, 다이어트 계단으로도 불림.

- 계단 이용 활성화로 운동 부족에 따른 질환 예방 효과, 비만예방 등         지역 주민 및 직원의 건강 증진 효과 기대

-  엘리베이터 사용을 줄임으로서 에너지 절감과 탄소 저감 효과 기대

추진 방향

❍ 건강은 올리고, 에너지는 줄이는 건강 계단 조성

- 건강, 홍보, 커뮤니티 컨텐츠 등 재미있고 유익한 건강컨텐츠로 구성해    이용자의 자발적 계단 오르기를 유도하여 보건지소 내 계단 이용률 제고

❍ 옥상 정원과 연계하여 쉼이 있는 문화 공간 조성

- 칼로리계단과 옥상 정원을 연계하여 지역 주민에게 건강한 휴식공간을    제공할 뿐 아니라 환경오염 저감, 도시 생태계 복원에도 기여

Ⅱ	세부 추진계획

사업개요

❍ 사업목적

- 건강과 문화가 있는 계단 오름을 통해 지역주민 건강 증진 및 에너지 절감

- 옥상 정원과 연계하여 지역주민의 휴식 공간 제공

❍ 사업위치

- 위   치 : 보건지소 청사(중곡종합건강센터)

- 주   소 : 긴고랑로 110(중곡동 125-11,13)

- 규   모 : 지하2층 ~HP층(옥상층) [총8층]

대지 750.8㎡ 연면적 2,544.78㎡

❍ 사업내용

- 청사 칼로리계단 조성 및 옥상정원과 연계

- 층별 건강과 문화가 있는 테마별 주제로 구성

세부사업계획

❍ 조성기간 : 2014.1월~4월

❍ 구성내용 : 건강컨텐츠, 홍보컨텐츠, 커뮤니티 컨텐츠 등

층별	계단 구성(안)	공간 컨셉
지하2층 ~ 지상1층	건강계단 (다이어트계단)	건강컨텐츠 : 비만도 계산법, 올바른 식습관, 걷기 장점, 비만과 다이어트, 흡연의 단점과 금연 등
지상2층	피아노계단	커뮤니티형 컨텐츠 : 피아노 계단과 갤러리 공간 구성
지상3층	트릭아트/포토존	커뮤니티형 컨텐츠 ; 블록 거울, 실사그림 등 오르내리는 즐거움, 포토죤
지상4층	자연 계단	해피송, 허브림 등 자연을 테마로 하여 풀내음 나는 쾌적한 자연공간으로 구성
지상5층	홍보 계단	광진구(광진구 추천명소 등) 홍보
PH층(옥상)	마법의 계단	마법의 거울 : 이용자의 계단 전․후 모습을 비교해 볼 수 있는 재미

예산집행 계획

❍ 소요예산 : 20백만원

- 산출내역 : 2,500,000원/1개층* 8층 = 20,000,000원

Ⅲ	추진일정

추진 세부일정

❍ 업체 선정 및 1차 협의 : 1월 중

- 기본 사업제안서 제출, 예상금액 협의, 현장 실측 실시

❍ 공사 의뢰 : 1월 말

- 공간 컨셉 및 부서의견 등 자료 전달

❍ 시안작업 및 2차 협의 : 2월 초

- 디자인 기획 및 작성

❍ 시안 확정 및 시공준비 : 2월 내

❍ 현장 시공 : 3월 중

❍ 검수 및 공사완료 : 3월~4월