첨단도로교통체계(보조)
(강남순환도시고속도로 교통관리시스템 구축)

□ 소관 중앙부처, 사업구분(국토교통부, 일반회계)

시 해당부서	신규사업여부	제도개선 필요여부	보조율
도시교통본부 교통정보센터	신규사업	무	국가 50%, 시 50%

□ 사업개요

○  위치 및 규모 : 금천구 독산동(소하JCT)~강남구 일원동(수서IC) 22.9km

구분		사업구간	총연장	사업기간
재정	4공구	금천구 독산동 ~금천구 시흥동	2.48km	2007.5~2016.5
	8공구	서초구 우면동 ~강남구 일원동	7.96km	2009.1~2016.5
민자	5~7공구	금천구 시흥동 ~서초구 우면동	12.4km	2007.11~2016.5
<사업 위치도>

○  사업기간 : 2014. 1. ~ 2016. 5.(2년 5개월)

※ 강남순환도시고속도로 개통시기(2016년 5월)와 맞추어서 완공

○  사업내용

-  강남순환도로(4~8공구) 본선 및 진출입도로 교통관리시스템 구축

구 분		내 용
공사	센터	교통정보센터 구축 1식
	교통정보수집	CCTV 6, 영상검지기(VDS) 89
	교통정보제공	도로전광판(VMS) 14, 대기경보시스템(QWS) 26
	교통류제어	차로관리시스템(LCS) 46
	통신망구축	전송장비구입 1식, 통신선로 구축 1식
용역		기본설계, 실시설계, 공사감리

※ 구체적인 사업내용과 사업비는 2014년 기본 및 실시설계용역 후 확정

○  사업필요성

-  강남순환도시고속도로는 수도서울의 강남지역에서 발생하는 극심한 교통정체 해소를 위해 건설 중인 자동차전용도로로 개통시기(‘16.5.)에 맞춰 기 구축된 도시고속도로 교통관리시스템과 연계 운영할 수 있는 첨단교통관리시스템을 구축하여 교통정보서비스, 교통혼잡관리 등 도로이용 효율을 극대화하기 위한 사업임.

○  사 업 비

(단위 : 백만원)

구 분	연도별
	'13년까지	'14년도 예산	'15년도 소요예산(예상)	'16년도 이후
계	-	794	10,426	-
국 비	-	-	5,213	-
시 비	-	794	5,213	-
구 비	-	-	-	-

□ 추진상황 및 향후계획

○ 투자심사 완료(2013.8.)

○ 기본 및 실시설계 시행(‘14.4.~’15.4.)

○ 교통관리시스템 설치공사 시행(‘15.5.~’16.5.)

○ 교통정보 수집 및 제공 실시(‘16.5.~)

□  고려사항

○  강남순환도시고속도로 교통관리시스템 구축사업 추진을 위하여 투자심사(‘13.8.), 기술용역타당성심사(’14.1.) 등을 거쳐 ‘14년부터 기본 및 실시설계를 추진 중에 있음.

○ 특히 본 사업은 광역교통정보를 제공하기 위한 것으로 서울시뿐만 아니라 수도권 주민의 교통편의를 증진하는 사업이므로 국비지원이 반드시 이루어져야 함.