사업계획(변경)승인서
주택법 제16조, 동법시행령 제15조 및 동법시행규칙 제9조․제11조의 규정에 의하여 아래와 같이 주택건설사업계획을 승인합니다.
사 업 구 분	■ 주택건설사업 □ 대지조성사업 □ 승인 ■ 변경승인
승 인 번 호	2009 - 주택건설사업계획승인 - 3 (제2회 변경) (양재동 212번지)
상 호	서울특별시 에스에이치공사				등 록 번 호	218-82-00136
대 표 자	이 종 수				법인(주민)등록번호	**************
영업소소재지	서울특별시 강남구 개포로 621
대 지 위 치	서울특별시 서초구 양재동 212일원				대지면적(㎡)	21,351.6
건축면적(㎡)	2,916.41				건 폐 율(%)	13.65
연 면 적(㎡)	55,498.88				용 적 률(%)	189.55
동수 (주/부)	3동/16동				세 대 수	390세대
주 택 형 별	아파트	국민임대		-	총 사 업 비	236,422,433천원 (국민주택기금 22,373,640천원)
		공공임대		-
		장기전세		390
착공예정일	2010. 12. 30				사 용 검 사 예 정 일	2014. 06. 20
동고유번호	동명칭및번호		연면적(㎡)		동고유번호	동명칭및번호	연면적(㎡)
201동	공동주택		8,007.86		기타부대시설	관리사무소, 경로당, 보육시설 등 16개동	14,945.73
202동	공동주택		12,265.77
203동	공동주택		20,279.52
변 경 사 항	∙대지면적, 건폐율 및 용적률 변경 ∙사업기간 변경
2014년 02월 28일 서 울 특 별 시 장 □

양재동 212번지 임대주택건설 사업계획 변경승인 내역

구 분			사 업 승 인 내 역		비 고
			변경전	변경후
① 대 지 위 치			서울특별시 서초구 양재동 212번지
② 대 지 면 적 (㎡)			21,774.4	21,351.6
③ 건 축 면 적 (㎡)			2,916.41
④ 건축 연면적 (㎡)			55,498.88
⑤ 건 폐 율 (%)			13.39	13.65
⑥ 용 적 률 (%)			185.87	189.55
⑦ 주택 규모	동수 및 층수		아파트3동 390세대 (지하1층, 지상25～35층)
	주택 형별	장기 전세	59㎡A형 : 66세대, 59㎡B형 : 66세대 59㎡C형 : 48세대, 59㎡D형 : 48세대 84㎡A형 : 66세대 84㎡B형 : 48세대 114㎡B형 : 48세대
		계	390세대
⑧ 사 업 기 간			2010.12.30 ～ 2013.12.7	2010.12.30 ～ 2014.06.20
⑨ 부대 복리 시설 현황	경로당		141.66(㎡)
	관리사무소		131.07(㎡)
	보육시설		172.13(㎡)
	문고		85.80(㎡)
	휘트니스		399.63(㎡)
	멀티프로그램실		81.46(㎡)
	주민공동시설		255.06(㎡)
	경비실		19.98(㎡) : 2개소
	어린이놀이터		724.20(㎡)
	운동시설 (배드민턴장)		414.46(㎡)
	펌프,전기, 발전기실		404.35(㎡)		펌프실(저수조용 포함)
	MDF실		40.67(㎡)
	동통신실		20.90(㎡) : 3개소
	방재실		30.12(㎡)
	지열공조실, 공조실		214.13(㎡)
	게스트하우스		38.64(㎡)
	재활용창고		42.43(㎡)
			467대(지상: 0대, 지하: 467대) 면적 : 12,867.70㎡
	주차장
⑩ 공동저수시설			614(t)

구 분			사 업 승 인 내 역						비고
			세대수	전용	주거공용	공급면적	기타공용	계약면적
⑪ 단위 세대 면적 변경	장기전세	59㎡A	66	59.77	24.89	84.66	31.59	116.25
		59㎡B	66	59.77	24.87	84.64	31.59	116.23
		59㎡C	48	59.98	24.08	84.06	31.71	115.77
		59㎡D	48	59.96	23.85	83.81	31.70	115.51
		84㎡A	66	84.97	32.40	117.37	44.92	162.29
		84㎡B	48	84.98	33.51	118.49	44.92	163.41
		114㎡A	48	114.78	43.22	158.00	60.69	218.69