2017년 주민참여예산사업 변경승인 요청

1. 변경개요

당초계획 : 신림체육센터 옥상에 친환경 벽화를 시공하여 주민들에게 개방하고, 주변 자연환경과 어우러지도록 체육시설을 조성

변경계획 : 신림체육센터 주차장 옹벽에 벽화를 시공하여, 상막한 주차장 환경을 체육시설과 어우러지도록 조성

변경사유 : 당초 계획했었던 신림체육센터 옥상벽화 시공 사업이 지역주민의 지원 및 자발적 참여로 목적이 달성되어, 사업예산을 체육센터 주자장 옹벽에 타일 벽화를 시공하고자 함

기간 : 2017.11. ~ 2017.12.

지역 : 관악구 난곡로58길 13(미성동, 신림체육센터)

옥상 조성 현황(당초)

주차장 옹벽 조성 계획(시안)

2. 예산 집행계획

(단위:백만원)

통계목	예산액	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
총사업비											5
시설비											5
시설부대비											0

3. 교부신청액 및 산출근거 : 금액 변동 없음

단위 : 천원

구분		금액	산출내역
총사업비		5,000
시설비		5,000
	공사비	5,000	- 타일(4800*1500) 벽화 시공 1식

4. 사업효과

- 낡고 오래되어 상막한 주차장 옹벽에 시설 홍보 벽화를 삽입함으로써, 주차장 환경개선 효과

체육관련 이미지를 조성하여, 지역주민 대상 홍보효과 증대

5. 추진방향 및 추진일정

- 2017.11. : 시공업체 선정 및 발주

2017.11.~12 : 벽화 시공 완료