향림 빗물순환마을 사업계획 변경 현황 및 사유

항 목	당초계획		변경계획		변경사유	비고
	수량	소요예산	수량	소요예산
합계		1,000		1,000
투수블럭 포장	1,120㎡	78	투수 1,014㎡ 침투측구L=155m (포장정비495㎡)	267	- 투수블록 설치 가능지역은 투수블록 포장으로 빗물침투를 가능하게 계획하였으며, - 경사지 등은 지형여건 상 포장재 밀림 등 시공 품질 저하 문제로 인해 투수블록 포장보다는 도로양쪽에 빗물 침투가 가능한 빗물 침투측구를 계획하여 빗물이 침투되도록 계획하였음. (※ 포장정비 : 빗물침투 측구 설치에 따른 부대 공사임)
침투측구 설치	140m	12	445m	143	- 당초 계획보다 설치구간 증가
소형빗물이용시설 설치(빗물저금통 등)	143개소	429	24개소	50	- 향림마을 전체에서 사업대상지를 모니터링 가능유역으로 축소하여 대상지 주택수 감소에 따른 빗물저금통 설치 개소수 감소
빗물이용시설 설치(지하)	3개소	60	0개소	-	- 사업대상지내 공공영역(주차장, 공공건물 등)이 없는 등 설치 공간 부재

항 목	당초계획		변경계획		변경사유	비고
	수량	소요예산	수량	소요예산
빗물저류조 설치(향림텃밭)	250톤	250	저류조 200톤 저류조 100톤	400	- 250톤 시설물 설치시 저류지 외각 산지 훼손이 발생하여 산지 훼손이 발생하지 않는 형태 시설규모 조정(1개소 →2개소) - 또한 유역면적 작아 유량이 적어 향림텃밭에 설치된 심정수 활용 및 자연유하 방식으로 빗물을 공급하기 위하여 시설용량의 일부를 분산 설치 계획함. - 향림텃밭에 계획한 당초 시설용량 확보가능 - 텃밭에 상수도를 사용하기 위한 배관망이 형성되어 있어 빗물 저금통 설치는 불필요.
빗물저금통 설치(향림텃밭)	23개소	69	0개소	0
옥상녹화	10개소	100	0개소	0	- 건축물의 노후화로 인하여 설치 불가 (공공 및 어린이집 옥상) - 대상지 구간에 공공건물이나 어린이집 등 공공영역이 포함되어 있지 않음.
Rain-Space	-	-	8개소	120	- 그린파킹사업을 참고하여 개인영역 부분에 빗물 저장·침투 공간(주차장 투수블록 포장, 빗물저금통 등)을 설치 지원하여 빗물을 테마로 하는 특화거리를 조성함으로써 시민들의 호응과 관심을 고조시켜 LID사업 효과를 극대화 하고자 함.
기타 이설비 등	1식	2	1식	20	- 향림 도시농업체험원 내 빗물저류조 설치에 따른 유역검토 및 수리계산 등 설계 용역